미디어아트 특화거리 조성 (성남물빛정원 미디어아트 설치 및 콘텐츠 제작) 과업지시서

2025. 12.

성  남  시

(문화관광과)

Ⅰ		과업개요

1. 과 업 명

❍ 미디어아트 특화거리 조성(성남물빛정원 미디어아트 설치 및 콘텐츠 제작)

2. 과업배경 및 목적

❍ 성남물빛정원은 약 30년 동안 방치된 구미동 옛 하수처리장 부지를 새롭게 단장하여 개장한 곳으로 산책로, 음악홀, 카페 등이 조성되어 문화 예술 및 휴식 공간으로 재탄생하고 있음

❍ 성남물빛정원 내에 주변환경과 어울리는 디지털 실감미디어기술과 예술이 융합된 미디어아트 특화 공간을 조성하여, 이색적인 볼거리 제공 및 성남의 새로운 문화예술 랜드마크로 발전시키고자 함

3. 사 업 비: 금900,000,000원(금구억원, 부가가치세 포함)

※ 창작, 설계, 영상장비, 조명, 영상물 제작․설치, 제세공과금 등 부대비용 일체 포함

※ 전기공사 분리발주

4. 과업범위

가. 공간적 범위: 경기도 성남시 구미동 195번지, 성남물빛정원 일원

나. 시간적 범위: 착수일로부터 3개월(90일)

※ 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

다. 내용적 범위

❍ 미디어아트 콘텐츠 기획·제작·설치

❍ 콘텐츠를 효과적으로 구현할 수 있는 상설 기반 하드웨어 구축

❍ 하드웨어 및 콘텐츠 통합관리 시스템 구축 및 운영

❍ 시설 운영·관리 및 유지보수계획 수립, 운영매뉴얼 작성

❍ 설계(안)에 대한 각종 보고, 설명회, 심의 및 인허가 진행

❍ 미디어 콘텐츠의 안정화를 위한 시범운영

Ⅱ		과업세부내용

※ 사업내용 예시(안) 요약

- 예시(안)을 바탕으로 제안사의 자유로운 상상으로 추가․변형 제안 가능

구 분	내 용
메인 테마 지정	• 성남물빛정원과 연계된 메인 테마 지정 - 과거 하수처리시설이었던 침전지 공간을 생태․예술적 공간으로 재탄생시키는 상징성․정체성 부여 - 자연과 예술, 과거와 미래의 조화를 시각적으로 표현 - 구조물의 원형을 유지하면서 도시의 산업적 흔적을 예술로 승화시켜 재생과 순환의 메시지 전달 - 관람객이 머물며 감상할 수 있는 미디어아트 공간 구현
색채	• 자연 및 주변환경과 조화를 이루는 감성적․세련된 조명 연출 • 알록달록한 색감은 지양하고, 은은하고 분위기있는 색채 사용
음향	• 뮤직홀과 어울리는 연주형 음향 콘셉트 설정 • 물의 흐름, 바람, 새소리 등 자연 친화적인 음향 콘셉트
미디어아트 연출 방법 (예시)	• 파노라마LED + 빛 조형물 - 침전지 구조물 측면(뮤직홀 방향)에 파노라마형 LED스크린을 설치하여 미디어아트 연출 - 침전지 루프에는 스크린 콘텐츠와 연계되는 다양한 빛 조형 설치로 공간의 확장감 강화 • 프로젝션 맵핑형 - 구조물 외벽면에 대형 프로젝션 맵핑을 구현하여 공간의 물리적 흔적과 도시 재생의 상징성을 예술적 콘텐츠로 표현 • 상징적 빛 조형물 조성 - 침전지 루프에 성남물빛정원의 상징성을 담은 다양한 연출로 낮에는 시각적 포인트(포토존 등), 야간에는 미디어 콘텐츠가 투사되거나 발광하는 방식으로 예술적 분위기 조성
유도사인	• 성남물빛정원 외부 사거리에서 성남물빛정원 진입부까지의 주요 동선에 안내 표지를 설치하여 방문객의 진입을 자연스럽게 유도

1. 사업구역 및 조성방법

가. 미디어아트 제작 및 설치

❍ 위치: 성남물빛정원 내 옛 하수처리장 침전지 구조물 외벽(25m×120m)

※ 제안사는 명확한 과업제시를 위하여 반드시 현장 실측 필요

위치도	현장사진

❍ 성남물빛정원 내 뮤직홀 2층 개방 공간을 대표 전망 포인트로 조성

- 뮤직홀 2층에서 조망 가능한 맞은편 옛 하수처리장 침전지 구조물 외벽을 미디어아트 설치 대상면으로 활용하여, 방문객이 자연스럽게 모여 미디어아트 감상이 가능한 이색적 조망과 포토 스팟 등 랜드마크형 전망 포인트로 조성

전망포인트 위치	뮤직홀 2층, 구조물 전망

❍ 미디어아트는 뮤직홀 2층에서의 조망을 중심으로 구성하되, 산책로 등 성남물빛정원 내 다양한 위치에서도 감상 가능하도록 연출 범위 확장 제시

나. 성남물빛정원 진입로 안내 유도사인 설치

❍ 위치: 동막교사거리 및 오리교1사거리 → 성남물빛정원 진입로 구간

- 위치도

※ 사진은 위치 참고용으로 유도사인 종류, 개수 등은 현장과 어울리게 조성

❍ 목적: 성남물빛정원의 위치 인지도를 높이고, 방문객이 주요 진입 방향에서 성남물빛정원으로 쉽게 접근할 수 있도록 안내 기능 강화

2. 대상지 기초조사 및 관련 법규 검토

가. 대상지 특성 및 상태조사, 현장실측 및 인프라 현황 등 조사

나. 인문·사회 환경, 유동인구, 물리적 환경 등 분석

다. 관련 법규 및 각종 지침·기준, 행정계획 등 검토

3. 미디어아트 공간 조성 및 기획

가. 성남물빛정원의의 역사성과 재생 상징성을 반영한 차별화된 미디어아트 콘셉트 및 스토리텔링 기획

나. 신기하고 호기심을 자극하는 예술적 콘텐츠로 구성하고 시민, 방문객 등 모두가 즐길 수 있는 시나리오 기반의 콘텐츠 개발

다. 주·야간 모두 감상 가능한 미디어아트 연출

라. 현장감, 몰입감 등을 체험할 수 있도록 디지털 기술과 조명기법 등을 자유롭게 제시

마. 성남물빛정원의 랜드마크가 될 수 있도록 독창적인 미디어아트 시설물, 빛 조형물, 경관조명 계획 수립

바. 수시로 콘텐츠의 업그레이드 및 수정·보완이 용이하도록 통합 제어 프로그램을 구성

사. 프로젝터, 조명, 음향, 제어시스템 등 미디어 플랫폼 구축 요소를 고려한 통합 기획 및 운영계획 수립

아. 빛 공해로 인한 피해가 발생하지 않도록 조명의 종류, 설치장소, 표출시간, 빛의 세기, 빛 온도, 휘도, 조도 등에 대한 충분한 사전 시뮬레이션을 실시하고, 전문가 자문 및 주변에 거주하는 주민들을 대상으로 주민설명회 등을 실시하여 빛 공해로 인한 민원 발생을 최소화해야 함.

자. 그 밖에 과업목표 달성에 필요하여 발주기관이 요구하는 사항

4. 미디어아트 시설물 및 콘텐츠 제작·설치

가. 성남물빛정원의 상징성·정체성·역사를 반영한 독창적이고 차별화된 메인 콘텐츠(영상 등)제작   ※ 메인콘텐츠 1편 이상 제작

나. 계절·테마(명절, 크리스마스 등)에 어울리는 상설 콘텐츠(영상 등) 기획 및 제작  ※ 분기별 1개 이상 제작 – 총 4개 이상

다. 모든 영상 제작물은 충분한 자료조사 및 분석과 명확한 근거를 바탕으로 정확한 제작 방향을 설정하여야 하며, 각각의 단계 및 분야별로 전문가 자문 또는 검토를 거쳐 발주기관의 승인을 받은 후 제작

라. 시설물 설치 시 구조적으로 안전해야 하며, 주간에 보이는 것을 고려하여 심미성, 조화성 등을 갖추어야 함

마. 대상지의 환경을 고려하여 최적화된 사양을 선정해야 하며, 자동적으로시스템이 가동될 수 있도록 자동화 운영시스템으로 설계

바. 조명기구와 함체 등의 시설물은 방수·방진·부식방지, 항온항습 기능을 반영하고 청소, 보수, 유지관리가 용이하도록 구축

사. 빛으로 인해 해충이 발생할 수 있는 문제점을 해결할 수 있도록 포충기, 해충기피제 등의 해충퇴치 시설물 설치

아. 디자인 및 연출계획은 그래픽 시뮬레이션으로 시각화하여 제출

자. 다른 지역과 동일 또는 유사한 콘텐츠 지양

차. 각종 H/W 장비는 구매 전 제품의 성능과 사양서를 사전에 발주기관에 제출하고 승인을 받은 후 구매해야 하며 장비 유지관리 메뉴얼을 별도로 작성하여 제출

카. 향후 운영자가 별도 교육 없이도 손쉽게 제어 및 통합 운영이 가능하고 데이터, 전원 등의 원격제어 및 모니터링이 가능한 프로그램 설계

타. 동절기, 하절기의 온도, 적설, 강우, 흙먼지 등의 요인에 의해 조명기구의 형태 및 색상이 변하지 않아야 하며, 태풍 또는 강풍에 대한 설계는 제반 설계기준에 적합하도록 제시

파. 일체의 설치기구는 감전, 누전 등으로 인한 안전사고와 불편을 초래하지 않도록 높은 강도와 구조적 안전성을 고려하여 설계

하. 향후 전기 케이블의 위치 파악이 용이하도록 케이블 상단에 관로띠를 매설하는 등 고려하여 설계

갸. 주요자재 이상 또는 이에 준하는 제품을 설치하여야 하고, 설치 시점에 따른   제품변화에 따라 동급 사양의 최신제품으로 교체를 요구할 수 있다.

5. 유도사인 제작·설치

가. 성남물빛정원 진입을 위한 주요 외부 사거리(동막교사거리, 오리교1사거리)에서 성남물빛정원 진입로까지의 접근 동선상 주요 지점에 설치

나. 교통 흐름, 보행 동선, 시인성, 경관요소 등을 종합적으로 검토하여 종류, 수량, 위치, 디자인 등을 자유롭게 제시

다. 미디어아트 거리의 연장된 이미지 구현

라. 성남시 공공디자인 가이드라인 및 옥외광고물법 등 관련 법규 준수

6. 유지관리 방안 수립

가. 사전 시범운영 시행(2주간)

❍ 시범운영에서 발견되는 오류나 불합리한 상황에 대하여 시스템이 정상적으로 가동될 수 있도록 조치

나. 시설의 안정적인 작동과 효율적인 유지보수 및 관리운영이 가능하도록 매뉴얼 작성(필요 장비에 대하여 상세히 작성)

다. 장비운영 및 전기 관련 사고 등 각종 안전사고 대책 수립

라. 향후 주기적으로 콘텐츠 업그레이드가 이루어질 수 있도록 콘텐츠 교체 시기, 교체 방법 등 보강 방안 제시

마. 하자보수 지원방안 마련

7. 기타사항

가. 각종 인·허가 등 필요한 법적·행정적 절차검토 및 관련된 각종 기관 등에 대한 협의이행, 각종 보고회, 설명회, 심의회, 보고자료, 도서작성 및 이행

Ⅲ		과업수행지침

1. 과업수행의 일반원칙

가. 일반원칙

❍ 과업수행자는 발주기관과 사전에 충분한 협의를 한 후 관련 법령·규정·지침·계획 등을 충분히 조사·분석하여야 하며, 과업 수행 중 상위계획이나 정책 등의 변화가 발생하면 이를 적용하여 성과품을 작성하여야 한다.

❍ 과업지서서의 문구와 용어의 해석, 과업의 범위 및 실시요령 등에 대하여 발주기관과 과업수행자 상호간에 의견을 달리하는 경우에는 발주기관의 해석과 의견을 따라야 한다.

❍ 경미한 사항의 추가 또는 변경은 발주기관과 협의하여 가능하나, 이 때 소요되는 경비는 과업수행자가 부담하도록 한다.

❍ 최종성과품 도서는 사전에 제출하여 발주기관의 검토를 거친 후 인쇄하여야 하고, 모든 과업은 발주기관의 준공검사를 받아야 완료된 것으로 본다.

❍ 과업수행자는 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 발주기관이 필요하다고 인정하는 중요사항은 사전 협의 후 과업내용에 포함하여야 하며, 이와 관련된 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

❍ 모든 과업은 총괄책임자의 책임 하에 추진하며, 발주기관의 의견을 과업의 추진에 반영하여야 한다.

❍ 과업수행자는 계약에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 본 과업에 임하며, 발주기관으로부터 재제작·설치, 제작·설치중지명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받았을 때에는 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 한다.

❍ 과업수행자는 계약조건에 위배하여 시공된 부분에 대하여는 재시공 또는 보완하여야 하며, 만약 발주기관이 지적한 사항에 대하여 재시공 또는 보완하지 않을 경우 발주기관은 다른 방법에 의해 이를 제거 또는 보완할 수 있으며, 이로 인하여 발행하는 비용은 과업수행자가 부담하여야 한다.

❍ 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 결정한다.

나. 자료의 적용

❍ 본 과업 수행의 기준연도는 2025년으로 하며, 적용되는 자료는 그 근거를 명확히 제시하고, 객관적으로 인정되는 최신의 것을 사용해야 한다.

❍ 계획의 지표, 기본 통계 등의 조사 자료는 정부 및 공공기관의 통계나 신뢰할 수 있는 연구기관의 보고서와 현지 조사 결과를 사용할 수 있으며, 이 경우 출처를 명기해야 한다.

❍ 과업 수행에 필요한 경우 전문기술 및 지식, 정보교환자료 등 신기술을 이용하고, 보다 명확한 과업수행과 기간단축을 위하여 가능한 전산처리에 의하여 결과를 얻도록 한다.

❍ 과업 수행시 관련 자료의 수집 또는 행정적인 지원이 필요한 경우 발주기관은 관련 자료 등을 과업수행자에게 제공할 수 있으며, 제공된 자료에 대하여 과업수행자는 그 내용의 오류, 정확성을 반드시 확인한 후에 사용하여야 한다.

다. 과업수행자의 의무

❍ 본 과업에 참여한 연구진은 전문 분야별 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여, 총괄책임자의 책임 하에 과업이 체계적이고 효율적으로 추진되도록 하여야 하며, 참여인력은 발주기관의 사전 승인 없이 교체할 수 없다.

❍ 과업수행자나 대리인이 과업 수행에 부적합하다고 인정되는 경우 발주기관은 교체를 명할 수 있고 과업수행자는 즉시 이에 따라야 한다.

❍ 착수계에 제출된 인원이 본 과업 수행에 기술적·양적으로 부족하다고 판단한 때에는 적정인원을 즉시 충원하여야 한다.

❍ 과업수행자는 본 과업을 수행함에 있어 각종 안전에 유의하여야 하며, 이에 따른 사고 발생으로 제3자에게 피해를 주었을 경우 및 제3자의 권리(지식재산권 등)를 무단으로 사용하여 문제가 발생한 경우 과업수행자에게 비용 부담 등 일체의 책임이 있다.

❍ 과업수행자는 과업 수행기간 중 실무회의, 각종 보고회, 전문가 자문회의, 관련 인·허가, 심의회, 주민의견 청취 등 각종 회의 및 행정절차에 필요한 자료를 준비하고 설명해야 하며, 이를 통해 제기된 모든 의견은 검토 후 적극 반영하여야 하고, 이에 소요되는 제경비는 과업수행자가 부담해야 한다.

❍ 과업수행자는 회의 등의 개최 시 필요한 보고자료 및 도면 등의 관련 자료를 발주기관에 미리 제출하여야 하고, 이에 소요되는 경비는 과업수행자가 부담하도록 한다.

❍ 과업수행자는 성과품(최종보고서 등)을 용역 완료 예정일 20일 전에 발주기관에 제출하여 확인을 받은 후 지시에 따라 작성, 납품해야 한다.

❍ 본 과업의 추진이 불가능하거나 계약 위반 행위가 있을 때에는 그 시점에서 정산 후 계약은 해지되며, 이 경우 과업수행자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

❍ 과업 수행과정에서 과업지시서에 명시되지 않은 사항과 중요한 결정 또는 판단이 필요한 사항이 있을 경우에는 발주기관과 사전에 협의하여 방침을 받도록 한다.

2. 과업관리 및 보고

가. 착수신고서 및 과업수행계획서

❍ 과업수행자는 계약일로부터 10일 이내 착수신고서 및 과업수행계획서를  제출한다.

❍ 착수신고서는 총괄책임자 선임계(이력서 및 자격증빙 첨부), 참여인력명단 및 보안각서, 예정공정표 기타 과업수행에 필요한 사항을 포함한다.

❍ 과업수행계획서는 공정별 세부추진계획 및 과업단계별 성과품 제출계획 등을 포함하여야 한다.

나. 보고회 개최 및 공정보고

❍ 착수보고: 착수일로부터 10일 이내

- 과업수행 방향 및 방법

- 분야별 참여인력 현황 및 조직 편성표

- 과업 세부수행 계획표

- 기타 과업수행에 필요한 사항

❍ 중간보고: 디자인 개발 완료 후 중간 결과 보고

※ 보고회 최소 3일 전에 과업감독자 확인을 받은 보고자료 작성․제출

- 예정공정표에 의한 진행 여부 및 디자인 개발(안) 보고

❍ 최종보고: 시설물 제작․설치 이후

※ 보고회 최소 7일 전에 과업감독자 확인을 받은 보고자료 작성․제출

- 전체 디자인 개발(안)의 과정 및 주민의견수렴 내용 등

- 시설물 제작·설치 현황 및 사후관리 및 유지보수 방안 등 과업의 전 범위에 대한 수행성과 보고

❍ 수시보고

- 부분별, 단계별로 과업의 진척 상황, 과업 수행결과에 대하여 발주기관의 요구에 따른 진행과정 보고

- 과업 수행 상 중요 문제점 및 대책

❍ 주민설명회 1회 이상 개최(개최 횟수는 발주기관 협의 후 결정)

❍ 업무보고

- 주간공정보고: 과업수행자는 주간업무보고서를 매주 정해진 요일에 발주기관에 제출하여야 한다.

- 월간공정보고: 과업수행자는 본 과업에 대한 월간공정보고서를 매월 지정일에 발주기관에 제출하여야 한다.

3. 설계변경 조건

가. 과업수행 중 발주기관의 요구에 의하여 과업내용을 변경할 수 있으며, 이 경우 과업수행자는 발주기관의 지시를 성실히 이행하여야 한다.

나. 본 과업의 추진과정에서 유관기관의 협의와 기타 발주기관의 필요로 인하여 과업추진이 지연될 경우에는 상호협의 하에 과업기간을 연장할 수 있다.

다. 다음의 경우 과업수행자는 과업내용을 발주기관과 협의하여 변경할 수 있음

❍ 과업업무량의 조정으로 참여연구원의 증감이나 등급변경이 발생한 경우

❍ 관련법령ㆍ규정 및 지침 등의 개정 및 상위계획 변경 등 여건변화로 인하여 과업의 범위 및 내용의 현저한 변경이나 증감이 발생한 경우

❍ 천재지변 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행의 변경이 필요한 경우

4. 책임의 한계

가. 과업수행자는 과업성과물의 하자 및 과업 수행 중 관리 소홀 등의 귀책사유로 인하여 발주기관에 손실을 초래하였을 경우 이에 대한 민·형사상의 책임을 진다.

나. 과업수행자는 과업수행자의 잘못으로 인하여 사업계획의 추진 중 차질이 발생하였을 경우 이에 상응하는 책임을 져야 한다.

다. 과업수행자가 발주기관에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 서면으로 제출하여야 그 효력이 발생한다.

라. 본 과업 완료 이후에도 과업에 관련된 사항에 대하여 재검토 및 보완이 필요한 때에는 별도의 과업비 청구 없이 과업수행자의 책임 하에 수정·보완하여야 한다.

마. 발주기관의 승인 및 협의를 거친 성과품이라 할지라도 추후 과업 내용의 잘못된 사항이 발견되거나 과업수행자의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대해서는 별도의 과업비 청구 없이 과업수행자의 책임 하에 수정·보완하여야 한다.

5. 저작권 및 지식재산권

가. 본 사업과 관련된 모든 소프트웨어에 대한 라이선스 조건 및 보증조건 등 관련 사항을 해결해야 한다.

나. 과업 수행 과정에서 생산된 모든 성과품에 대한 저작권 및 지식재산권은 발주기관이 소유함을 원칙으로 하고, 발주기관의 승인 없이 제3자에게 제공하거나 본 과업의 목적 이외의 용도로 사용할 수 없다.

다. 콘텐츠 제작에 사용되는 음악, 자료영상, 사진 등의 저작권료 등 제반  비용은 과업수행자가 지불한다.

라. 본 과업을 수행함에 있어 제3자의 지식재산권을 침해 등의 문제가 발생했을 시, 과업수행자는 피해자 측과 합의 또는 배상하는 등 민 ‧ 형사상의 모든 책임을 져야 한다.

마. 이밖에 저작권 및 지식재산권과 관련된 세부사항은 발주기관과 협의하여 결정한다.

6. 하자관리

가. 하자보수 지원방안에 지원범위, 지원인력, 지원방법, 지원내용 등 제시해야 한다.

나. 특히, 하자보수 대상(HW, SW, 개발시스템 등)별 지원범위, 공급된 상용 제품에 대한 Version Upgrade에 관한 사항, 장애발생 처리에 관한 사항, 기타 시스템의 정상운영을 위한 기술지원 등에 관한 사항을 제시해야 한다.

다. 과업수행자는 자체의 별도 품질보증을 위한 조직을 구성하여 검증 작업을 실시해야 한다.

라. 테스트 기간 동안 발견된 결함을 파악하여 공정기간 내 조치하여야 한다.

마. 산출물에 대한 검토 결과 보완 요구사항을 반영하고, 시스템의 자원분석, 세션유지, 응답속도 병목현상 탐지 등 다양한 형태로 분석하여 최적화 할 수 있는 방안을 제시해야 한다.

바. 사업자는 발주기관에 기술이전 및 유지관리와 시스템 운영 교육을 실시하여야 한다.

사. 검수 완료 후 무상 하자보수 기간(2년) 동안 시스템 이상 발생 시 장애접수 후 유지보수 요원의 신속한 대응을 제공해야 한다.

아. 해당 하자보수 기간 내에 발생하는 유지관리의 범위는 개발 완료된 시스템의 유지관리에 따른 일반적인 유지관리 내용이 포함된다.

자. 하자보수의 불이행으로 인하여 서비스 지연이나 손실을 주었을 경우 발주기관은 과업수행자에게 손해배상을 청구할 수 있다.

차. 예상 장애별 조치사항 및 비상복구 방안을 마련하여 비상시 대비할 수 있도록 하고, 장애처리 절차, 하자보수 체제 등 하자보수를 위한 종합적인 방안(분야별/등급별로 구분하여 지원범위, 방법, 인원 등)을 제시해야 한다.

카. 하자보수 기간 중 장애 발생 시 원인분석, 복구 등 즉각적인 조치가 가능하도록 기술지원 부서, 전문 인력 및 예비제품을 확보하여 항시 운영이 가능하도록 하여야 한다.

타. 무상하자보수 기간 중 최종결과물 품질에 이상이 있을 경우 즉시 결과물을 보완하여야 한다.

파. 기타 하자관리와 관련된 세부사항은 발주기관과 협의하여 결정한다.

7. 인허가 등 법률 부문

가. 과업수행자는 관련 규정, 표준, 법령, 인허가 등을 면밀히 검토하여, 과업수행 과정 및 목적물에 반드시 준수하여야 하는 사항을 해결해야 한다.

나. 공공디자인 가이드라인 제시

❍ 미디어 제품과 콘텐츠 연출은 다양한 기법으로 구성한다.

❍ 빛 공해 방지와 관련한 관리지침 가이드라인 제시, 빛 조절 제어방식 도입

❍ 콘텐츠 관리‧운영에 대한 효율적 방법, 비용 등이 명기된 가이드라인 제시

8. 안전관리

가. 과업 수행 중 과업수행자의 과실로 인한 일체 사고에 대하여 과업수행자가 전적으로 책임을 진다.

나. 모든 시설, 장비, 자재 등은 성능과 안전도가 검증된 인증, KC 표시품과 형식 승인품 및 그 이상인 제품을 우선 사용해야 하며, KC 표시품이 없을 경우 시중 최고품을 발주기관의 사전승인을 받은 후 사용하여야 한다.

❍ 품질관리 및 품질보증을 위하여 자재의 시험성적표(시험결과보고서)가 필요할 시에는 설계도서 및 해당 시방서에 일치될 수 있도록 사전계획(반입 전·후)을 수립하여 검토한다.

❍ 제작·설치를 시행함에 있어 소요 재료의 품질기준에 관한 자료와 진행 중 현장에서 시험테스트가 요구될 시에는 해당 종목에 맞는 시험기구 및 장비 등을 비치한다.

❍ 재료 또는 제작·설치의 특수성 등으로 국내에서 시험이 불가능할 경우와 수입자재일 경우 외국 시험전문기관에 시험을 의뢰할 수 있으며 과업수행자는 시험성적서를 제출한다.

다. 추락, 파손, 안전사고 등 위험요소가 존재하는 시설물의 경우 종합적인 안전대책 및 운영관리 계획을 제시하여야 한다.

❍ 하중, 보조시설 종류 및 규모 등 콘텐츠 및 기반시설(H/W 등) 등 설치 및 운영에 필요한 제반사항 포함

라. 과업수행자는 발주처의 승인을 받아 작성한 사항이라 할지라도, 과업수행자의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행 상 모든 하자에 대하여 과업수행자가 책임을 지며, 과업수행자는 과업 종료 후에도 사항에 대한 발주기관의 수정보완 요구가 있을 때에는 관련 규정에 따른다.

마. 시운전 및 보증, 시설운전·관리안내서 작성, 운영요원의 교육 등 준공 후 운영관리체계를 수립하고, 안전진단을 시행해야 한다.

바. 과업수행자는 과업수행에 있어서 안전관련 법규에 따라 철저한 안전관리를 시행하고 사고 및 재해방지에 노력하여야 하며, 사고 및 재해가 발생한  경우에는 즉시 발주기관에 보고하고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취해야 한다.

사. 아울러, 과업 수행 중 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 과업수행자의 종업원 또는 고용원의 안전사고에 대한 모든 책임을 져야 한다.

아. 본 과업과 관련되어 발생 가능한 모든 사고 등에 대비하여 과업수행자는 보험가입 및 보안용역 등 최선의 주의의무를 다해야 한다.

9. 보안사항

가. 과업수행자는 정부의 “보안업무규정”을 준수하며, 발주기관의 지시에 따라 보안관리를 철저히 하여야 한다.

나. 과업수행자는 과업 착수 시 발주기관이 제시하는 서식에 의하여 총괄책임자 및 투입 인력의 개인별 보안각서를 각각 작성하여 제출하여야 한다.

다. 과업수행자는 과업 수행에 따른 보완 대책을 수립하여 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 한다.

라. 과업 수행 중 또는 완료 후 과업수행자의 귀책으로 제3자의 권리 침해, 보안상 결함 및 보안사항 불이행 등으로 소송 및 분쟁이 발생할 경우  모든 책임은 과업수행자에게 있다.

마. 과업 수행 장소는 필요시 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

바. 과업의 내용이 외부에 유출될 경우 문제를 야기할 수 있는 성과물 작성할 때에는 참여 인원을 최소화하여야 하며, 업무일지를 비치하여 과업 수행내용에 대한 기록을 유지하여야 한다.

사. 과업을 수행하는 동안 작성한 자료와 성과품에 대하여는 내용의 중요성에 따라 대외비 및 일반자료로 분류하여 보관하고, 정·부·책임자를 지정하여 보고하여야 한다.

아. 비밀 또는 대외비로 분류된 성과물을 발간하고자 할 때에는 정부비밀취급 인가업체를 이용하여야 하며, 과업 수행 과정에서 발생된 폐기물은 문서 세단기로 파쇄 또는 소각처리 하여야 한다.

자. 과업수행자가 과업 수행과정에서 취득한 내용을 사용하여 발주기관에 손해를 끼쳤을 때에는 발주기관은 이에 대한 손해배상을 과업수행자에게 청구할 수 있다.

차. 과업진행과정에서 생산된 모든 자료는 과업 진행 이외의 다른 목적에 사용할 수 없음 또한 모든 성과품은 과업수행자가 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출할 수 없고, 외부 유출이 필요한 경우에는 발주기관의 승인을 받아야 한다.

카. 과업수행 과정에서 개최하는 각종 보고 및 회의 등에 본 과업의 내용이 포함될 경우에는 배포선을 감안하여 필요한 수량만을 생산하고, 종료 후 전량을 회수하여 파기하여야 한다.

10. 계약위반에 대한 조치

가. 다음의 상황이 발생할 경우 계약위반으로 간주하여 계약해지 등 법적 조치를 취할 수 있고, 이에 대하여 과업수행자는 이의를 제기할 수 없다.

❍ 제반 지시사항을 기한 내 이행하지 않았거나 발주기관의 지시에 불응하여 과업을 진행하였을 경우

❍ 현저하게 공정이 미달되었거나 계약기간 내 과업을 완료할 능력이 없다고 인정될 경우

❍ 과업 수행 중 불성실 또는 부주의로 인한 중대한 과실이 인정될 경우

❍ 과업 참여 시 제출된 각종 증빙자료가 허위로 작성되었음이 인정되었을 경우

❍ 과업의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 경우

❍ 기타 계약위반 행위라고 볼 수 있는 객관적 판단이 있을 경우

11. 우선협상대상자 선정 이후 계약조건

가. 우선협상대상자는 통보를 받은 즉시 발주기관과 협상 및 계약에 관해 협의하여야 하며, 협상 후 10일이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

나. 사업자의 총괄책임자는 보고회 개최 시 관련자료를 제출하고 회의에 참석하여, 질의에 답변하고 회의결과를 과업에 적극 반영하여야 한다.

※ 과업수행공정 및 진행상황에 대하여 발주기관이 관련자료 등을 별도 요구 시 사업자는 중간보고를 즉시 해야 함

다. 시설물의 하자보수 기간은 준공검수일로부터 2년으로 한다.

12. 사업수행조건

가. 동 사업수행에 필요한 장비일체는 사업시행자가 자체적으로 확보하여 사업을 수행하여야 한다.

나. 총괄책임자 및 공정별 책임자는 설치 전 과정을 전담하여 관리하여야 한다. 다만, 불가피한 사유가 있을 경우에는 발주기관과 협의하여 책임자를 변경할 수 있다.

다. 사업시행자는 과업지시서에 따라 성과품을 납품하고, 납품은 계약서에 정한 기일에 완료하여야 한다.

라. 사업수행 중 또는 사업수행 이후에라도 사업 목적물이 본 과업지시서 및 계약문서에 규정된 요구조건과 상이하게 완성되었다고 판명되어 발주기관이 보완을 지시할 경우에는 사업시행자의 부담으로 보완 및 수정하여야 한다.

마. 본 사업에 필요한 인․허가, 초상권․저작권 허락이나 검사를 받아야 할 경우 이에 대한 처리 및 소요비용은 사업시행자가 부담하여 수행하며, 이에 따른 관련 문서를 제출해야 한다.

바. 사업시행자가 제출한 설계도서상의 하자로 인하여 손실 또는 피해, 기타 사업 진행상 지장을 초래하였을 경우에는 사업시행자가 이에 대한 책임을 져야 한다.

사. 사업시행자는 시범운영을 통해 성남시의 운영과 관련하여 제시한 요구사항을 수정·보완하여야 한다. 이에 소요되는 비용은 사업시행자가 부담하며, 시범운영과 관련된 세부사항은 발주기관과 협의하여 정한다.

아. 본 사업수행과 관련된 모든 소요비용은 계약금액 범위 내에서 사업시행자가 부담한다.

자. 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유 발생 시 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 변경·중지할 수 있다.

차. 사업자는 사업을 수행함에 있어 요구되는 관련법규를 준수하여야 하고, 법령 등에 의한 각종 인·허가 관련 업무를 성실히 수행하여야 하며,   관련법령 등의 저촉 및 미비로 인해 발생하는 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 한다. 또한 이에 관련된 제반비용은 별도로 지급하지 않는다

카. 발주기관은 중요한 사안의 결정을 위하여 회의를 소집하거나 자문을 받도록 사업자에게 요구할 수 있고, 사업자는 이에 대한 자문결과를 보고서로 제출하여야 한다. 이때 발생하는 모든 비용은 사업자가 부담한다.

Ⅳ		성과품

❍ 과업수행자는 본 과업의 성과품을 충분히 검토할 수 있도록 성과 보고서의 인쇄 10일 전에 초안을 미리 제출하여 발주기관 협의 후에 최종 성과품을 제출하도록 한다.

❍ 과업수행자는 모든 성과품의 작성(과업 성과품 규격 및 수량 등)시 사전에 발주기관 협의하여 작성한다.

❍ 성과품 제출 목록

구 분	내 용	규 격	수 량	비 고
보고서	- 최종보고서	A4	20부
설계도서	- 실시설계도서 - 설계설명서, 도면, 시방서, 내역서, 원가계산서, 단가‧수량산출서	A3 A4	5부
유지관리 지침서	- 구축장비리스트, AS 확약서, 하자관리종합계획 및 상황별 대응매뉴얼, 안전진단보고서(필요시)	A4	5부
전산데이터	- 모든 성과품은 전산처리 납품 (문서, 콘텐츠, S/W 등 전체 과업성과물 일체 수록)	USB	2식
제작시설물	- 제작완료된 제품 납품, 설치	-	-	현장납품 ‧ 설치

※ 과업 진행 상황에 따라 보고회 및 심의 자문 준비를 위한 도서 별도로 제출 요청 가능

※ 과업 진행 과정 중에 발생하는 문서는 성과품 납품 시 일괄 제출

※ 도서를 작성하는 프로그램 호환여부 및 형식은 발주기관과 협의 후 성과품 제출

※ 분량 및 수량, 규격은 변동 가능

※ 양면 칼라인쇄 원칙