제4회 유엔남구 물놀이 축제

대행 용역 과업지시서

2026. 2.

	부산광역시 남구
	(문화관광과)

						목 차

Ⅰ. 과업의 개요	1

Ⅱ. 일반지시서

1. 일반사항	2

2. 현장대리인 지정 및 기술자 확보	3

3. 용역 착수 및 보고	3

4. 용역 시행	4

5. 관리	6

6. 성과품 납품	8

Ⅲ. 특별지시서

1. 과업내용	9

2. 과업의 수행방법	15

3. 기타사항	18

[붙임] 물놀이장 기본시설(안) 및 기타시설(안)	19

[별지1] 운영일지	21

[별지2] 사고발생보고서	23

Ⅰ	과업의 개요

1. 과업명 : 제4회 유엔남구 물놀이 축제 대행 용역

2. 과업의 목적 및 필요성

가. 과업의 목적

1) 다채로운 물놀이 시설과 프로그램으로 도심 속 대형 워터파크를 구현하여 축제 참가자들에게 즐거운 경험과 재미, 휴식 제공

2) 물놀이장 조성 및 물놀이 콘텐츠 운영, 공연·체험프로그램, 인력·안전·시설물·수질관리 등 「제4회 유엔남구 물놀이 축제」 추진 관련 일체의 운영 및 유지관리 업무 위탁

나. 과업의 필요성

1) 남구 대표 여름축제로서의 정체성 강화 및 차별성 확보를 위한 종합계획 수립

2) 제3회 물놀이축제가 부산시 축제 평가 방문객 만족도 2위를 달성함에 따라, 기존 성과를 기반으로 한단계 도약하는 축제로 추진

3. 과업의 범위

가. 위    치 : 용호별빛공원(부산 남구 용호동 5-5번지)

나. 용역기간 : 계약체결일 ∼ 8월 31일까지(기획, 설치, 철거 및 정산기간 포함)

1) 물놀이 축제 운영 : 2026. 7. 25.(토) ∼ 8. 3.(월) [10일간 예정]

※ 운영시기 및 기간은 우리구와 과업수행자 간 협의로 조정 가능하며, 기간조정에 따른 계약금액은 조정될 수 있음.

※ 전염병 및 기상여건 등으로 개장 기간 및 개장 여부가 변경될 수 있음.

2) 시설물 설치 : 2026. 7. 21.(화)까지(개장 4일전까지)

3) 시범운영    : 2026. 7. 23.(목) ~ 7. 24.(금)

4) 보고서 작성 및 제출 : 2026. 8. 24.(월)까지

다. 계약방법 : 협상에 의한 계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 시행령 제43조

라. 과업 시행 조건

- 물놀이 시설물 설치는 당초 제시한 제안서에 따라 계획서를 작성하되, 필요 시 사전에 발주처와 협의하여 조정할 수 있으며, 발주처 승인 후 설치함

- 슬라이드 등 물놀이 시설은 검사 기간이 소요되므로 운영 시작 전에 관련 검사를 필히 완료하여야 함

마. 시설현황 : 부지면적 16,000㎡(물놀이장 8,000∼10,000㎡ 정도), 급수구경 D=50㎜

바. 주요내용(특별지시서 참조)

- 물놀이축제 기획·연출·집행·운영 전반에 관한 종합계획 수립 시행

※ 물놀이 시설 및 물놀이 콘텐츠에 중점

- 출연자 섭외 및 프로그램 기획에 관한 사항

- 시설물 제작 설치, 행사장 공간 배치 및 운영 총괄

※ 축제장 내 전기공사(간선 설비, 발전차 등)는 별도 분리발주 예정 *전기공사업법 및 지방계약법 근거

- 개막식 개최, 물놀이 시설 운영 관리, 물놀이 콘텐츠 운영, 행사․체험프로그램(무료) 운영, 먹거리존 운영 등에 관한 사항

- 행사장 안전대책, 보험가입, 인력관리, 청소, 우천 시 대책에 관한 사항

※ 물놀이장 안전관리 대책 마련 및 자연재해·기상악화(태풍, 우천 등)에 대한 물놀이장 운영 방안 제시

- 행사 홍보계획 수립 및 홍보물 제작․설치․운영에 관한 사항

- 행사 기록, 만족도 조사 및 결과 보고에 관한 사항

- 기타 과업수행과 관련하여 부산광역시 남구가 지정하는 사항 등

Ⅱ	일반지시서

1. 일반사항

본 과업지시서는「제4회 유엔남구 물놀이 축제」 대행 용역을 수행함에 있어 필요한 사항 등을 규정함을 목적으로 하며, 과업수행자는 착수 전 본 과업지시서 등 규정을 정확하게 숙지하고 업무를 수행하여야 한다.

1.1 적용범위

가. 본 과업지시서는「제4회 유엔남구 물놀이 축제」 대행 용역에 대하여 적용하고, 기술적인 사항은 특별지시서에 따르며 이 과업지시서를 준수한다.

나. 본 과업지시서에서 “발주처”라 함은 부산광역시 남구를 말하며, “과업수행자”라 함은 부산광역시 남구와 본 행사대행 용역사업 계약을 체결하고 이 과업을 수행하는 행사대행 용역사업자를 말한다.

다. 본 지시서에 감독관이라 함은 현장 용역감독을 말한다. 감독관은 과업수행자의 현장대리인에게 작업지시, 승인, 협의 또는 검사 등의 업무를 수행한다.

2. 현장대리인 지정 및 기술자 확보

2.1 현장대리인의 지정

가. 현장대리인은 본 용역 수행에 필요한 제반 지식과 충분한 경험이 있는 자로 한다.

나. 현장대리인은 물놀이축제 운영·관리를 총괄하는 현장 책임자로서, 용역계약서 및 관련 지시서에 따라 업무를 성실히 이행하며, 필요 시 감독관의 지시에 따라 업무를 수행하고 감독관의 검사 및 승인을 받아야 한다.

2.2 기술자 확보

가. 본 용역에 적합한 경험·기술을 갖춘 기술자를 현장(물놀이 축제장)에 상주하게 하고 그 중 1인을 현장대리인으로 한다.

3. 용역 착수 및 보고

3.1 용역 착수

가. 과업수행자는 계약 후 10일 이내에 다음 각 호의 사항이 포함된 용역 착수신고서를 제출하여야 한다.

1) 현장대리인계

2) 용역공정예정표

3) 세부사업계획서(Ⅲ. 특별지시서 1-3 세부사업계획서 제출 참조)

4) 인력 및 장비투입계획서

5) 용역수행자 명단

6) 산출내역서(원가계산서+산출조서)

7) 기타 관리용역에 필요한 제반 서류

나. 과업수행자는 본 용역추진을 위한 관리 및 방법을 미리 감독관과 협의하여 승인을 받은 후 용역시행 세부 관리계획서를 제출하고 용역에 착수한다.

3.2 용역 보고회 개최

가. 과업수행자는 과업 착수 후 10일 이내에 구체적인 과업 수행계획에 대하여 착수보고서를 제출하고 착수보고회를 개최하여야 한다.

나. 과업수행자는 축제 개최 45일 전까지 착수보고회, 수시협의 등에서 제시된 건의사항, 문제점 등을 반영한 최종 운영계획을 수립하여야 한다.

3.3 운영보고

가. 과업수행자는 운영기간 동안 지정된 서식(별지 1)에 의거 매일 운영관리일지를 작성하여 감독관에게 보고하여야 하며, 안전사고 등 각종 특이사항 발생 시에는 즉시 유선보고 후 서면으로 보고하여야 한다.

3.4 결과보고

가. 과업수행자는 과업종료 후 20일 이내 최종 완료계를 제출하여야 하며, 완료계에는 물놀이장 운영 상황을 알 수 있도록 전·중·후의 상황이 선명하게 식별되는 사진첩(20장 이상)을 첨부하여야 한다.

나. 과업기간 중 설계변경이 있었을 경우 변경된 부분을 구별하여 표기하고 완료계 제출 시 함께 제출한다.

4. 용역시행

4.1 과업수행자의 의무

가. 본 용역은 협약서, 지시서 등 관련 서류 및 감독관의 지시에 따라 수행하여야 한다.

나. 본 사업은 지역주민과 관광객에게 즐거운 경험과 재미, 휴식을 제공하는데 그 목적이 있는 바, 과업수행자는 사명감과 책임감을 가지고 성실히 용역을 수행하고 민원이 발생하지 않도록 공무원에 준하는 친절함과 예의를 갖추어 이용객과의 분쟁을 미연에 방지하여야 한다.

다. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 물놀이축제 운영 관리상 필요하다고 인정되는 중요 사항은 발주처와 협의하여 결정하고, 필요한 서류를 작성·제출하는 등 협조하여야 하며, 경미한 사항에 대하여 추가 과업이 필요할 시 과업수행자 부담으로 시행하여야 한다.

라. 용역 수행 과정에서 과업수행자의 귀책사유로 발생하는 사고 및 피해에 대하여는 과업수행자가 민·형사상 책임을 부담한다.

마. 과업수행자는 영업배상책임보험에 가입하여야 하고, 대인 1.5억원 이상, 후유장애 1.5억원 이상을 보장하고 에어슬라이드 등 물놀이 시설을 담보에 포함하여야 한다.

바. 본 과업으로 인하여 과업수행자가 부산광역시 남구나 제3자에게 피해를 주었을 경우 과업수행자가 손실 보상하여야 한다.

사. 과업내용 중 세부내용은 발주처의 사정에 따라 일부 변경될 수 있으며 발주처와 과업수행자 간 협의를 거쳐 변경계약을 체결할 수 있다. 이 경우 과업수행자는 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

4.2 안전·보건 확보 의무

가. 과업수행자는「제4회 유엔남구 물놀이 축제 대행 용역」을 수행함에 있어 종사자(이용자)의 안전을 확보하기 위해 안전·보건관계법령 및 중대재해처벌법 상 의무사항을 빠짐없이 이행하고, 만약 의무사항을 이행하지 않아 중대산업재해가 발생할 경우 그에 따라 발생하는 법적 처벌 및 발주처의 불이익 조치에 대해 이의를 제기할 수 없다.

나. 과업수행자는 종사자나 이용자로부터 유해·위험 요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수․보강 등 개선 작업을 신속하게 조치하고, 발주처 및 관계기관의 이행명령에 따른 개선사항을 성실히 이행한다.

다. 사업수행에 필요한 작업, 점검 등 모든 작업을 할 때에는 안전보건 기준에 따른 철저한 안전 대책을 수립한 후 작업에 임하여야 하며, 안전사고가 발생한 때에는 과업수행자의 책임 하에 후속 조치를 취하여야 한다.

라. 중대산업재해 발생 시 즉시 보고 및 관련 규정에 따른 사고 조치를 하여야 한다.

마. 과업수행자는 안전한 작업환경 조성을 위해 본 용역에 대한 안전보건관리계획서를 작성한 후 제출하여야 한다.

바. 과업수행자는 제출된 안전보건계획서에 대한 평가를 통해 미비한 부분은 대책 마련 및 개선을 하여야 한다.

4.3 노무관리

가. 과업수행자가 동원한 모든 근로자에 대한 노무관리 책임은 과업수행자에게 있으며, 용역 수행으로 인한 근로자의 사고 및 질병이 발생하지 않도록 관리하여야 하고 근로자 안전사고 발생 시 모든 관리 및 보상 책임은 과업수행자에게 있다.

나. 발주처는 과업수행자의 현장대리인 또는 기타 직원이 물놀이 축제 운영·관리상 부적당하다고 인정되는 경우 해당 인력의 교체를 명할 수 있고 과업수행자는 이에 따라야 한다.

다. 물놀이 축제장에 배치되는 근무요원은 근무 시 반드시 통일된 복장과 모자를 착용하여야 하며 색상 등 디자인은 감독관의 승인을 득한 후 결정한다.

라. 과업수행자는 근로기준법을 준수하여 평일 및 주말 관리 인원을 고려한 인력운용계획을 수립하고, 운영기간 동안 인력 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다.

4.4 설계변경

가. 발주처의 정책 변경, 제안요청서상의 예측 내용과 달라진 경우 또는 기타 불가피한 사정이 발생한 경우에는 발주처와 과업수행자 간 협의를 거쳐 계약 범위, 기간 등 과업 내용을 변경할 수 있다.

5.  관   리

5.1 용역관리

가.	과업수행자는 별도로 정한 경우를 제외하고, 계약문서에 명기된 기간 내에 용역을 착수하고 지체 없이 추진하여 계약기간 동안 성실히 수행하여야 한다.

나. 용역의 일시중지 및 계약해지

1) 용역의 일시중지

가) 태풍·집중호우 등 기상 여건 악화로 시설물 손상 또는 이용객·종사자 안전에 중대한 우려가 있다고 인정되는 경우

나) 이용객 또는 근무 인력의 안전 확보를 위해 일시중지가 필요하다고 인정되는 경우

다) 과업수행자가 협약서 또는 지시서대로 운영하지 않거나 감독관의 지시에 응하지 않을 때

라) 기타 불가피한 사정으로 물놀이축제의 정상적인 운영이 곤란하다고 판단되는 경우

2) 계약해지

가) 과업수행자의 부도 및 기타 경영상의 중대한 사유로 과업수행이 불가능한 점이 명백히 인정되었을 경우

나) 과업수행자가 과업을 수행함에 있어 고의·과실 또는 무성의로 과업이 지연되거나 시정 요구사항이 이행되지 않아 과업의 정상 수행이 어렵다고 발주처가 인정하였을 경우

다) 물놀이장 개장 전, 천재지변 또는 사회적 재난·재해, 전염병 등으로 인해 발주처가 장기간 사업수행이 불가능하다고 판단하는 경우

라) 업체 선정 시 제출한 제안서의 내용과 실제 과업수행내용, 회사소개 내용 등에 중대한 차이가 있거나, 발주처의 사전 승인 없이 과업 내용을 임의로 변경하는 경우

마) 선정된 업체(단체)가 계약을 통보받은 날로부터 10일 이내에 계약을 체결하지 아니하면 제안서평가위원회에서 선정된 차순위 업체(단체)와 계약을 체결할 수 있으며 이 경우 이의를 제기할 수 없음

바) 그 밖에 사항은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제9장(계약 일반조건) 제8절(계약이행의 지체와 계약의 해제·해지)을 따른다.

3) 지연배상금

가) 과업수행자는 계약서에 정한 과업수행 기한 내에 과업을 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 관련 법령에서 정한 지연배상금률에 계약금액 및 지체일수를 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부하여야 한다.

나) 발주처는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 과업수행이 지체되었다고 인정되는 경우, 그 해당일수를 상기 지체일수에 산입하지 아니한다.

- 천재지변 등 불가항력적인 사유로 인한 경우

- 발주처의 책임으로 과업 착수 지연 또는 수행 중단된 경우

- 과업수행자의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증 이행할 경우

- 그 밖에 과업수행자의 책임에 속하지 않는 사유로 지체된 경우

다. 작업시간

1) 용역은 「근로기준법」에 따라 정해진 근로시간 내에 수행하는 것을 원칙으로 하며, 규정된 근로시간 외에 수행할 필요가 있는 경우에는 사전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

2) 용역 시행상 필요에 따라 작업시간의 연장 또는 단축, 야간작업이 필요하다고 감독관이 인정하는 경우에는 과업수행자는 그 지시에 따라야 한다.

라. 공정관리

1) 과업수행자는 관리계획에 따라 예정공정표를 작성하고 감독관의 승인을 받아야 한다.

2) 과업수행자는 실시공정에 따라 적절한 관리를 행하고 성실히 완수한다.

3) 관련 및 별도 용역의 공정은 관계자와 협의하여 원만히 진행한다.

4) 발주처는 품질확인 및 원활한 용역 수행을 위하여 과업수행자에 대해 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 과업수행자는 감독관과 협의하여 지적사항을 2일 이내에 시정하여야 한다.

마. 용역용 재료의 관리

1) 용역용 재료는 품질과 규격 및 기능이 손상되지 않도록 관리한다.

2) 용역에 쓰이는 재료의 수량은 감독관의 확인을 받고 기록해야 한다.

바. 기타사항

1) 각종 현수막, 홍보물 및 성과품 등의 제작에 있어서는 발주처 홍보계획 기본(안)을 준수하고 사전에 발주처와 협의를 거쳐야 한다.

2) 모든 성과품은 과업수행자가 임의로 복사·외부 유출하거나 본 과업 외의 목적으로 사용할 수 없으며, 별도의 명시가 없는 한 그 소유권은 발주처에 귀속된다.

3) 과업수행자의 귀책사유로 인하여 과업 성과품과 관련된 저작권, 특허권 등 지식재산권 침해가 발생한 경우에는 그로 인한 민·형사상 책임은 과업수행자가 부담한다.

5.2 기록관리

가. 용역기록

- 과업수행자는 용역의 진척, 재료의 반입 및 사용전후, 기타 필요한 사항을 기재한 용역보고서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

나. 용역기록 사진 및 관련 도면

1) 용역 수행 과정은 각 단계별로 사진첩으로 작성하여 용역 완료 시 제출하고, 사진첩 제출은 특별지시서 또는 감독관의 지시에 따른다.

2) 사진촬영은 공정별로 용역 진행에 따라 동일한 위치에서 전·중·후의 상황이 선명하게 식별되도록 촬영하여야 하며 특이사항, 안전사고 예방, 각종 현수막 게첩, 관리요원의 복장 등에 대하여는 별도 사진을 촬영하여 발주처에 제출한다.

3) 시설물 설치·운영과 관련한 최종 배치도는 당초 계획도면 대비 변경된 사항을 구별하여 표기하고, 용역 완료 시 발주처에 제출한다.

6.  성과품 납부

6.1 성과품은 행사 종료 후 20일 이내에 최종 결과보고서와 함께 행사별·프로그램별 사진 및 영상을 수록한 USB 2개를 제출하여야 한다.

6.2 결과보고서는 내용, 구성 등에 대해 사전에 원고를 작성하여 발주처의 검사를 받은 후 인쇄·제출하여야 한다.

6.3 행사 종료 후 과업수행자는 행사에 사용된 장비 및 장치를 즉시 철수하여야 하며, 축제장 내 시설물의 변형·변조 또는 바닥 훼손 등에 대해서는 원상복구 하여야 한다.

※ 과업의 성과품

항목	규격	수량	제출시기	제출방법	비고
착수보고서	A4	20	⦁계약 후 10일 이내	출력물
중간보고서	A4	-	⦁최종계획 수립 전	전자파일
최종보고서	A4	2	⦁행사 개최 45일 전	출력물, 전자파일
결과보고서	A4	5	⦁과업 완료 후 20일 이내 - 결과(완료)보고서 및 정산서 - 만족도 조사 보고서	출력물, 전자파일
사진 및 영상물	USB	2	⦁축제 전체 사진 - 날짜별□프로그램별 폴더 생성 ⦁축제 전체 영상물 - 날짜별□프로그램별 폴더 생성	전자파일, USB

Ⅲ	특별지시서

1.  과업 내용

1.1 기본현황

가. 과업명칭 : 제4회 유엔남구 물놀이 축제 대행 용역

나. 기    간 : 2026. 7. 25.(토) ∼ 8. 3.(월), [10일간/예정]

다. 위    치 : 용호별빛공원(부산 남구 용호동 5-5번지)

라. 이용요금 : 무료

마. 참여대상

1) 7. 25.(토) ∼ 8. 2.(일) : 누구나

2) 8. 3.(월) : 장애인 대상 물놀이 축제

1.2 용역수행사항

가. 무대, 물놀이 시설 및 휴게·부대시설 설치, 점검, 운영, 안전관리 총괄

나. 물놀이장, 축제장 주변 및 부대시설의 청소 등 환경 관리

다. 물놀이시설 상시점검, 수질관리 및 이용자 안전관리(적정 인원 설정·관리)

1) 실시간 입장객 관리 방법 제시

2) 영업배상책임보험 가입 : 대인 1.5억원, 후유장애 1.5억원 이상, 에어슬라이드 담보 포함

라. 장애인 대상 물놀이 축제 운영을 위한 별도 운영대책 수립·운영

1) 장애인 이용자 특성을 고려한 행사 운영 방안, 동선 및 안전관리, 인력 배치, 응급대응 체계 등 포함

2) 장애인 물놀이 축제일에도 무대 공연을 1회 이상 편성 운영

마. 개막식, 물놀이 축제 콘텐츠, 기타 행사, 공연, 이벤트 등 프로그램 개발·운영

바. 먹거리존 운영을 위한 푸드트럭 섭외 등 주민 편의시설 설치·운영

※ 먹거리존 메뉴와 가격 등은 사전에 발주처와 반드시 협의(지역의 소상공인, 사회적 협동기업 등 포함)

사. 물놀이 축제 운영을 위한 사전예약 시스템 구축·운영

1) 카카오톡채널, 네이버시스템 등 예약 플랫폼 활용

2) 예약 현황 관리, 예약자 안내 및 알림 발송 등 예약자 관리 전반 수행

아. 물놀이 축제 방문객 대상으로 모바일 만족도 조사 운영 ※ 만족도 조사 참여 유인책 제시

자. 행사 홍보·마케팅 계획 수립 및 추진(입간판, 현수막 제작 및 리플릿 포함)

※ SNS(커뮤니티, 블로그, 인스타그램 등) 홍보방안 구체적 제시

차. 운영종료 후 철거 등 사후관리 및 운영 관련 현장민원 발생 처리

카. 일일 입장인원 등 운영일지 작성·보고 및 사업종료 후 사업결과 보고서 작성

※ 운영일지는 매일 오후 6시까지 발주처 제출

타. 사업기간 내 진행되는 각종 행사․체험프로그램(무료) 운영 포함

파. 기타 발주처가 지시하는 사항

1.3 세부 사업계획서 제출

가. 과업수행자는 계약일로부터 10일 이내에 아래 사항을 포함한 구체적인 과업수행 계획서를 감독관과 사전 협의 후 승인을 얻어 작성·제출하여야 한다. 아울러 과업수행에 필요한 제반서류를 함께 제출하고, 과업수행 중 내용변경이 불가피할 경우에는 발주처와 사전 협의하여 변경할 수 있다.

1) 물놀이 축제 운영 개요

가) 물놀이장·부대시설 등 운영 일정표 및 운영방법

나) 개막식, 물놀이 축제 프로그램 및 총괄 관리자 소개, 기대효과 등

※ 물놀이 시설 및 물놀이 콘텐츠에 중점

다) 인력 투입 계획

2) 시설 배치 및 세부 운영 계획

가) 물놀이장 내·외부 주변 환경정비(배수, 바닥 등)

나) 물놀이시설 배치일정, 주민휴게공간, 부대시설 등 배치계획(배치도)

※ 물놀이장 외 워터클라이밍, 분수터널, 워터버켓, 유스풀 등 다채로운 물놀이 시설 포함

다) 물놀이 축제 세부 운영계획 및 내역서

라) 물놀이장별 수심표시 및 입수객 이용 기준 제시(키, 나이제한 등)

마) 시설물별 이용제한 기준 제시(복장, 음주자 및 보호자 동반여부 등)

바) 시설물별 1회 적정 수용인원 및 최대 수용인원

사) 시설물별 1일 예상 이용인원 및 총 이용인원

아) 기타 물놀이장 설치·운영에 필요한 사항

3) 개막식 계획

가) 전문 사회자(아나운서급) 섭외

나) 색다른 개막 퍼포먼스 및 무대 공연 제시

※ 계약 체결 이전 출연진 섭외안 제시하여야 함

4) 장애인 대상 물놀이 축제 운영계획

가) 장애인 물놀이 축제일 무대 공연 별도 편성

나) 해당 일자 운영방안, 인력 배치 및 안전관리 계획 등

5) 사전예약 시스템 운영계획

가) 예약 플랫폼(카카오톡채널, 네이버시스템 등) 제시

나) 예약현황 관리 및 알림 발송 등 예약자 관리 운영 방안

6) 물놀이 축제 홍보 계획 ※ SNS(커뮤니티, 블로그, 인스타그램 등) 홍보방안 구체적 제시

7) 수질 관리, 안전관리 및 종사자 안전교육 계획

※ 안전요원 배치도, 안전관리계획, 안전요원 교육프로그램 및 안전 모니터링계획 등 포함

8) 주민 휴게공간(텐트, 파라솔, 해먹 등) 구성·운영계획

※ 주민 휴게공간은 구획을 정하여 운영하는 방안 제시(몽골텐트 내 구획표시 등)

9) 먹거리 존 운영 방안

10) 각종 부대시설 효율적 설치계획 (안전사고 예방)

11) 독창적 프로그램 및 콘텐츠 운영계획(물총싸움, 서핑챌린지 등)

12) 행사․체험 프로그램(무료) 운영계획

나. 축제와 관련한 시설(물), 출연자, 운영인력, 이용객 등에 대하여 안전을 최우선으로 하며, 책임보험 가입, 안전진단 등 사전․사후 세부적인 계획을 제시하여야 한다.

※ 물놀이장 안전관리 대책 강화 방안 강구, 자연재해 및 기상악화(태풍, 우천 등)에 대한 물놀이장 운영 방안 제시

1.4 이용객 안전관리

가. 안전관리는「관광진흥법 시행규칙 제39조의2」에 따른 물놀이형 유원시설업자의 안전․위생기준에 따라 상시 관리한다.

나. 과업수행자는 물놀이축제 이용객의 안전사고 및 인명피해 예방, 폐장 후 안전사고 방지 등 물놀이장 운영·관리에 대한 종합적인 안전관리를 실시하여야 하며, 안전요원 배치도, 안전관리계획, 안전요원 교육프로그램 및 안전 모니터링계획 등을 수립하여 착수계와 함께 제출하여야 한다.

다. 과업수행자는 주·야간 상시 사고 예방활동을 실시하여야 하고, 사고 발생 즉시 응급처치 및 환자이송을 실시하는 한편, 즉시 발주처에 보고하여야 한다.

라. 시설물별 입수객 이용기준(동시 수용 인원, 풀장별 키 제한 등)을 마련하고, 기준 및 방법은 발주처와 협의 후 운영한다.

마. 과업수행자는 이용객의 낙상사고 예방을 위해 수영장 및 워터슬라이드 주변에 충격 완화재를 반드시 시공하고, 미끄럼 방지를 위해 물놀이장 바닥 전면에 매트 등을 설치하여야 한다.

바. 각 물놀이 시설에는 수심을 확인할 수 있도록 수심 표시(풀당 2~4개소)를 하여야 한다.

사. 과업수행자는 물놀이장 주변 위험요소를 점검하고, 필요한 안전조치를 과업수행자 부담으로 이행하여야 하며, 발주처의 안전조치 요구가 있을 경우 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

아. 과업수행자는 이용객 안전을 위한 안내문, 현수막, A보드 등을 물놀이장 전역에 설치하고, 주요 사항을 명확히 안내할 수 있도록 방송시설을 운영하여야 한다.

자. 조립식 수영장 등 주요 물놀이 시설에는 이용객을 상시 조망할 수 있도록 망루를 설치하고, 해당 위치에 안전요원을 고정 배치하여야 한다.

차. 분전함 등 전기설비는 물기가 없는 건조한 장소에 설치되도록 관리하고, 운영 중에는 시건 상태 및 안전 여부를 수시로 확인하여야 한다.

카. 여과기, 에어모터(에어블러워 등 공기주입장치) 등 돌출 시설물에는 안전가드를 설치하고, 에어모터는 바닥에서 일정 높이를 띄워 설치하여야 한다.

타. 안전점검 시 지적사항은 과업수행자가 책임지고 사전 운영일까지 조치한다.

파. 과업수행자는 행사 전반과 관련하여 발생하는 민원에 적극 대응하여야 하며, 이로 인하여 발생하는 비용은 과업수행자가 부담한다.

1.5 인력운영 기준

가. 물놀이장에 반드시 확보․근무하여야 할 최소 인력은 아래와 같으며, 모든 인력은 정위치에서 근무하여야 한다. 인력의 휴가, 부상 등으로 결원 발생 시 과업수행자 부담으로 대체 인력을 확보하여야 한다.

나. 아래의 인원은 최소 인력 기준이며 이용자가 많을 경우 과업수행자 부담으로 추가 인력을 확보하여 이용자 안전과 서비스에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 인력 채용·운영 시「근로기준법」등 관련 법규를 준수하여야 하며, 관내 주민을 우선적으로 채용한다.

라. 평일 최소 인력확보 기준

총괄 관리자	안전 관리자	안전관리요원	운영요원 (사회자, 프로그램진행, 안내 등)	응급구조사❉ (운전기사 포함)	야간경비	합 계
1	1	15	6	2	1	26

마. 주말 및 공휴일 최소 인력확보 기준

총괄 관리자	안전 관리자	안전관리요원	운영요원 (사회자, 프로그램진행, 안내 등)	응급구조사❉ (운전기사 포함)	야간경비	합 계
1	1	17	8	2	1	30

❉응급구조사(운전기사 포함)는 발주처에서 별도 채용 예정, 과업수행자가 배치․관리

※ 개막식, 체험프로그램 운영요원 별도

바. 안전관리자 등 자격조건 및 현장배치

1) 필수확보인력 : 안전관리자는 아래 자격조건 중 하나를 갖춘 자로서, 용역 착수 전 발주처의 승인을 받아 현장에 배치하여야 하며, 물놀이장 이용객의 안전관리 및 안전사고 예방에 만전을 기하여야 한다.

가) 안전관리자 : 인명구조요원, 응급구조사 1‧2급, 수상인명구조원 수료증, CPR자격증, 응급처치법 수료증 소지자 등

2) 안전관리요원의 자격은 「관광진흥법 시행규칙」 제39조의2에 의거한 물놀이형 유원시설업자의 안전․위생 기준을 준수하여야 한다.

3) 그 외 인력은 현장여건과 방문인원에 따라 유동적으로 업무를 조정하여 배치할 수 있다.

1.6 수질관리

가. 야외 물놀이장 수질은「관광진흥법 시행규칙」제39조의2에 따른 물놀이형 유원시설업자의 안전․위생 기준을 준수하여야 한다.

나. 수질검사는「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조 및 제4조제2항에 따라 아래의 기준으로 매 2시간마다 실시하여야 하며, 물의 순환 횟수, 수질검사 일자 및 수질검사 결과 등을 게시하고 관리일지를 작성·비치하여야 한다.

1) 유리잔류염소는 0.4㎎/l 에서 2.0㎎/l까지 유지하여야 한다. 다만, 오존소독 등 사전처리를 하는 경우에는 0.2㎎/l 이상을 유지하여야 한다.

2) 수소이온농도는 5.8부터 8.6까지 되도록 하여야 한다.

3) 탁도는 2.8NTU 이하로 하여야 한다.

4) 과망간산칼륨의 소비량은 15㎎/l 이하로 하여야 한다.

5) 각 풀의 대장균군은 10밀리리터들이 시험대상 5개 중 양성이 2개 이하이어야 한다.

다. 과업수행자는 수질 관리를 위해 물놀이장의 욕수(浴水)는 1일 3회 이상 여과기를 통과하도록 하여야 하며, 풀당 여과기를 (조립식 각 2대) 설치․운영하고, 여과기 1대당 여과능력이 24ton/h 이상의 것으로 한다.

라. 수영장 욕수는 오염도에 따라 교체시기를 정하고, 욕수 교체 시 수영장 내부 침전물 등 오염물질을 제거하는 등 수질관리에 만전을 기하여야 한다.

※ 욕수 교체 시기는 감독관과 협의하여야 하며, 감독관의 요구가 있을 시 과업수행자는 이에 즉시 응하여야 한다.

마. 물놀이장은 수영모·수영복 또는 이에 준하는 복장을 착용한 이용자에 한하여 이용하도록 관리한다. (유아풀의 경우 방수기저귀 등 착용 안내)

바. 유행성결막염, 전염성 피부병 등 전염성 질환자는 수영장 시설 이용을 제한한다.

사. 수영장 내 음식물 반입을 금지하고 기타 이물질이 수영장에 유입되지 않도록 수영장, 놀이기구, 부대시설에 대해 수시 청소를 실시하여야 한다.

아. 과업수행자는 이용자가 쉽게 볼 수 있는 곳에 시설물별 정원, 동시 수용인원, 수질검사 일자 및 결과 등을 게시하여야 한다.

1.7 시설물 설치

가. 무대, 물놀이시설 및 부대시설 설치는 축제개최 4일전까지 완료하고, 시험운행은 2일 전까지 실시한다.

1) 축제장(물놀이장)내 배관·케이블 등은 이용객 이동 동선을 고려하여 걸림·접촉 위험이 없도록 안전하게 설치한다.

2) 물놀이시설 등은 규격서를 참고하여 과업수행자가 제안한다.

3) 조립식수영장 등 주요 물놀이 시설에는 이용객을 상시 조망할 수 있도록 망루를 설치하여야 하며, 구조·설치 위치 등은 발주처와 사전 협의 후 결정한다.

4) 무대, 물놀이 시설 및 부대시설을 포함한 모든 시설은 설치기한 내 정상 작동하도록 설치하여야 하며, 미비사항 발견 시 개장 전까지 반드시 교체·보완하여야 한다.

5) 수영장, 몽골텐트 등 관련 시설물은 깨끗한 상급으로 준비하여야 하며, 행사장 여건(강풍 등)을 감안하여 단단히 고정 조치(천막 및 로프 처짐, 관람객 등 위험, 훼손 발생 시 즉시 보완)하여야 한다.

나. 과업수행자는 과업 착수 후 진행과정을 감독관에게 수시 보고 하여야 하며, 최종설치 전에 발주처와 협의하여야 한다.

다. 과업수행자는 시운전 결과에 따라 관련 시설을 점검·정비하여 축제 개최 전 원활한 운영이 가능하도록 하여야 한다.

라. 과업수행자는 축제장 시설물(물놀이시설 포함) 및 편의시설의 지지상태 및 이완 여부를 철저히 점검하여야 한다.

마. 무대·물놀이장 시설물의 운반, 설치, 보수, 철거 등에 소요되는 일체의 경비는 과업수행자의 부담으로 한다.

바. 과업수행자는 시설물 설치에 따른 각종 인허가 절차를 이행해야 하며, 운영·관리에 필요한 제반 비용(무대구조안전진단, 유기기구검사․신고, 보험가입, 소모품 등) 일체는 과업수행자가 부담하여 추진한다.

사. 시설 설치 전 도면 사진 등을 감독관에게 제출하여 제품 사양에 대한 승인을 받아야 하며, 설치 현장 도착 후 감독관의 검수 및 지시에 따라 지정 장소에 하역하고, 급수·배수 및 안전시설을 적정하게 설치하여 사용 적합성 확인을 받아야 한다.

아. 물놀이 시설물 중 안전검사가 필요한 시설물은 안전검사 확인증을 감독관에게 제출하여야 한다.

자. 수영장은 생산물 배상책임보험에 가입된 제품이어야 한다.

차. 발주처의 사정으로 계약사항(설치 기간, 장소 등)에 변경이 필요한 경우, 쌍방 협의를 통해 계약을 변경할 수 있으며, 과업수행자는 이에 적극 협조하여야 한다.

카. 과업수행자는 물놀이장 설치 장소 바닥 및 시설물 보호를 위한 대책을 강구하여야 하며, 파손 시 원상복구를 하여야 한다.

1.8 물놀이 축제 프로그램 운영

‘도심 속 대형 워터파크’라는 주제 하에 개막식 개최, 물놀이 풀장별 콘셉트 선정, 시설 배치 및 독창적 프로그램(공연, 체험, 이벤트, 보호자 힐링 등)을 개발·운영하여야 하며, 사전에 발주처의 승인을 득하여야 한다.

1.9 물놀이 축제 만족도 조사 운영

물놀이 축제 방문자를 대상으로 수질, 접근성, 운영 기간, 프로그램 등을 항목으로 매일 모바일 만족도 조사를 실시하고, 그 결과는 결과보고서에 반영하여 발주처에 제출하여야 한다.

1.10 먹거리존 등 운영

푸드트럭(매점)은 푸드트럭 대수, 판매 품목, 운영방식, 가격책정 등에 대하여 발주처와 사전 협의하여 결정한다. 또한 발주처가 남구 내 소상공인, 사회적 기업 등의 참여를 요청할 경우 적극 협조하여야 한다.

※ 푸드트럭 운영에 소요되는 전기 등 제반 시설은 푸드트럭 자체적으로 해결

2. 과업의 수행방법

2.1 시설물 관리 세부 사항

가. 안전사고 예방 및 시설물 관리를 위해 주·야간 상시 관리하며, 운영상 예상되는 미비사항 및 문제점 등에 대하여 점검·보완을 실시하여야 한다.

나. 축제 운영 중 전기설비 사용과 관련하여 누전·침수·파손 등 외관상 이상 여부를 수시로 확인하고, 이상 발생 시 전기공사업자 및 주최 측에 즉시 통보하여 감전 등 안전사고 예방에 철저를 기한다.

다. 물놀이장 시설 및 주변의 청결 상태를 수시로 점검·청소하고, 필요시 충분한 일광소독으로 전염병을 예방한다.

라. 화장실 및 샤워실은 하절기 특성을 고려하여 악취 등 이용객 불편이 발생하지 않도록 수시로 청소·관리하여 최상의 상태를 유지하며, 분뇨 처리는 과업수행자의 책임으로 한다.

마. 용역기간 중 물놀이시설 및 부대시설의 손·망실(자연재해 포함) 시 즉시 보수 또는 교체하여야 하며, 보수에 3일 이상 소요되는 경우에는 발주처와 협의하여 사양이 동등한 시설로 2일 이내 대체 설치하여야 한다.

바. 과업수행자는 물놀이장 설치 장소의 바닥 및 시설물 보호를 위한 대책을 강구하여야 하며, 파손 발생 시 원상복구하여야 한다.

사. 축제장(물놀이장) 안전 확보를 위해 펜스 등 안전시설을 설치하여야 하며, 물놀이 시설의 구조 또는 사양이 발주처의 요구와 상이하거나 노후화된 경우에는 교체 요구에 따라야 한다.

2.2 운영상 세부사항

가. 용역지침

1) 환자 발생 시 즉시 응급조치를 실시하고 병원으로 후송하며, 관련 사항을 성실히 관리하여야 한다.

2) 여과기의 이상 유무를 상시 확인하여 매일 양호한 수질을 유지하여야 한다.

3) 집중호우 등으로 혼탁수가 유입되면 감독관에게 보고 후 욕수교체 및 바닥 청소를 실시한다.

4) 수질관리, 안전관리, 물놀이시설 및 부대시설 관리·청소, 비품 수시 보충 등을 실시하여 이용객 이용에 불편이 없도록 관리하여야 한다.

5) 음식물은 물놀이 시설물 내 반입을 금지하도록 이용객에게 안내·계도하여야 한다.

6) 현장 배치 인력은 통일된 복장을 착용하고 지정 위치에 고정 배치하여 수질관리, 안전관리 및 청소 등 전반적인 관리를 실시하여야 한다.

7) 기상예보상 집중호우·태풍 등 특보 발효 시 시설물 안전대책을 수립·조치하고, 해제 시 즉시 복구하여야 한다. (※ 태풍 등 풍수해 발생 시에는 감독관에게 보고하고 설계변경 등 조치를 협의한다.)

8) 수영장 욕수 배수는 반드시 지정된 배수로에 배출하도록 한다.

9) 물놀이장 운영 중 발생한 모든 쓰레기는 과업수행자 부담으로 매일 처리하여 적치되지 않도록 한다.

10) 야간 근무 시 근로자 안전에 유의하며, 취객 등 외부인 출입을 제한하고, 안전관리 및 민원사항에 대하여는 즉시 처리하고 발주처에 보고하여야 한다.

11) 운영관리시간

가) 운영관리                    : 주·야간 상시 관리체계 유지

나) 개장 전 내부청소, 주변 정리 : 08:30 ~ 09:30

다) 운영인력 대상 안전교육      : 09:30 ~ 10:00

라) 이용객 개장 시간            : 10:00 ~ 17:00

마) 안전관리 및 환경정비        : 10:00 ~ 17:00

바) 폐장 후 내부청소, 주변 정리 : 17:00 ~ 18:00

사) 야간순찰(안전사고방지 및 시설물 보호관리 등) 및 야간민원사항 처리 : 폐장정리 후 ~ 익일 개장준비 전

※ 개장시간(10시) 이전 수영장 급수를 완료하여야 하며, 폐장(17시) 이후 물빼기 및 청소를 실시하여야 한다. 급수 및 배수 중 안전사고가 발생하지 않도록 주변을 통제하여야 한다.

12) 열대야 지속 또는 이용 수요 증가로 운영시간 연장이 필요하다고 판단되는 경우, 사전 준비 후 운영시간을 연장할 수 있다.

13) 이용객이 증가할 경우 과업수행자는 추가 인력을 확보하여 이용객 안전 및 서비스 운영에 지장이 없도록 하여야 한다.

14) 기타 불가피한 사유가 발생한 경우에는 감독관에게 사전 보고 후 지시에 따라 운영시간을 조정할 수 있다.

15) 과업수행자는 [별지 1] 서식에 따른 운영일지를 매일 작성하여 감독부서의 확인을 받아야 하며, 사고 발생 시 즉시 유선 보고 후 [별지 2] 서식에 기재하여 감독부서에 통보하여야 한다.

나. 우천 및 태풍 등 기상특보 발효 시

1) 태풍, 풍랑 등 기상특보 발효 시의 운영 기준을 마련하여 시행한다.

2) 우천 시에는 감독관에게 보고하여 개장 여부 및 운영 상황을 점검한다.

3) 국지성 강우의 경우에는 감독관에게 보고한 후 운영을 지속할 수 있다.

다. 사업비 정산 등 회계처리

1) 예산집행은 세부실행계획서의 예산계획에 따라 집행하며, 사업비는 과업수행자의 청구에 의해 사후 지급을 원칙으로 한다. 발주처는 과업이행 수준 및 청구내역을 검토하여 계약금액 범위 내에서 지급액을 결정한다.

※ 사업계획의 변경이 불가피한 경우, 사전에 발주처의 승인을 받아야 함.

2) 과업수행자는 사업비를 발주처가 정하는 목적과 용도에 따라 집행하여야 하며, 인건비(출연료 등)는 타비용에 우선 지출하여야 한다.

3) 사업비의 정산은 계약체결 금액으로 정산하며, 총액을 초과한 소요금액에 대해 발주처의 지급의무는 없다.

4) 과업수행자는 별도의 회계 책임자를 지정하여 보고하고 운영하여야 하며, 예산집행은 세금계산서, 법인신용카드, 은행입금증(무통장입금) 등의 방법으로 하며 특별한 경우 외에는 현금지출을 할 수 없다.

5) 과업수행자는 본 사업을 담당하는 상근직원에 대하여는 회사에서 지급하는 임금 외에 행사비에서 별도의 인건비를 지급할 수 없다.

6) 본 사업과 관련하여 감사 결과 또는 정산서 검토 결과 사업내용이 부실하거나 사업비가 과다 지급된 것으로 판정된 경우, 발주처는 최종 지급액에서 과다 지급액을 차감하여 지급하거나, 이미 지급된 경우에는 과업수행자는 발주처에게 과다 지급액을 반납하여야 한다.

7) 과업수행자의 책임있는 사유에 의하여 물놀이장 운영이 중단되거나, 근로자 배치기준을 위배하여 적발된 일수에 대하여는 해당 기간을 제외하고 용역비를 정산한다.

8) 천재지변 등 불가항력적인 사유로 물놀이장 운영이 장기간 불가능한 경우에는, 실제 운영(사용) 일수를 기준으로 용역비를 정산할 수 있다.

※ 천재지변, 재난(감염병 포함) 등의 사유로 물놀이장 운영이 불가할 경우 사용 일수에 따라 정산이 가능하도록 세부 사업비 집행계획을 착수 전 제출하여야 한다. 또한 불가항력 사유로 행사 취소 또는 계약 해지가 이루어지는 경우에는, 사전에 발주처가 승인한 과업에 한하여 해지 통보일까지 발생한 비용을 다음 기준에 따라 정산한다.

□ 계약해지 통보일 이전에 제작이 불가피한 물품의 경우, 발주처가 사전에 승인한 과업에 한하여 과업 승인 시점부터 계약해지 통보일까지 실제로 발생한 재료비만을 증빙자료가 확인되는 경우에 한해 정산한다.

□ 계약해지 통보일 이전까지의 인건비는 발주처가 사전에 승인한 필수 운영인력으로서 운영책임자 1인, 운영담당자 2인 등 총 3인 이내에 한하여, 조달청

「행사대행용역 입찰 및 계약관리지침」 등 관련 기준을 준용하여 발주처가 인정하는 범위 내에서 정산한다.

3.  기타사항

3.1 과업수행자는 물놀이장 이용객을 상시 관리·조망할 수 있도록 운영본부를 설치하고, 이용객 안전을 위해 의료비품을 상시 구비하여야 하며, 운영요원 편의를 위한 시설(냉장고, 에어컨, 대형 선풍기, 음용수 등)을 설치하여야 한다.

3.2 과업수행자는 본 과업 수행을 위해 사전 현장조사를 철저히 실시하는 등 과업수행에 소홀함이 없어야 한다.

3.3 과업수행 내용 및 지침에 대하여는 수시로 감독관과 협의하여야 하며, 감독관의 요구가 있을 경우 이에 즉시 응하여야 한다.

3.4 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 등에 따른다.

3.5 본 과업지시서 내용의 해석상 이견이 있을 경우에는 발주처와 과업수행자 간 협의를 거쳐 결정한다.

【물놀이장 기본시설(안)】

순번	내 용	규격	이미지(예시)
1	물놀이장 (조립식, 에어풀장)	· 10m x 20m x 0.7m 2조 · 10m x 10m x 0.6m 3조 · 6m x 6m x 0.6m 5조 · 페달보트, 워터클라이밍 등 물놀이기구 2조 이상 · 수영장 주변 낙상대비 충격완화를 위한 매트 및 이동 보행로 설치
2	슬라이드	· 탑승높이 3~5m이하, 6조 · 대형풀장으로 이어지는 롱슬라이드 1조 · 후면 낙상 충격방지 시설 포함
3	물놀이시설	·워터캐논(물분사), 인공강우, 워터터널, 워터드롭 등 2종 이상
4	거품분사기	·인체 및 환경에 무해한 거품 사용 (옥수수오일 등)
5	냉방쉼터	· 컨테이너 1동(7*3m) · 테이블, 의자, 에어컨 포함
6	화장실	· 이동식 화장실 2동 / (7*3m)*2동 · 남 : 소변기 4, 대변기 2, 세면대 1 · 여 : 대변기 5, 세면대 1 · 에어컨 포함
7	샤워실	· 몽골텐트 또는 컨테이너 2동 · 샤워기 남, 여 각 12기 이상
8	탈의실	· 몽골텐트 또는 컨테이너 3동 · 남, 여, 가족탈의실 · 에어컨 포함
9	응급(의료)부스	· 컨테이너 1동(7*3m) · 에어컨 포함

【기 타 시 설(안)】

항 목	규격	수량	기 타
무대	12m×5m	1	레이허 형태(영상, 음향 포함)
몽골텐트	5m×5m	60	수영장 주위설치(이용자, 안내소, 물품대여소 등)
안전휀스	현장 내 설치	500m	입장 및 수영장 주변
풀장 그늘막	㎡	2,000	수영장 위 그늘막 설치
발보호용 바닥깔개, 매트	㎡	3,300	풀, 슬라이드, 유휴부지 주변 설치
부직포	㎡	2,000	수영장 및 슬라이드바닥 설치
비품	식	1	책상, 의자, 수유대, 구급약품, 탈의실 내 보관대, 냉장고, 노트북 등
대여용품	식	1	구명조끼, 물총 등 물놀이용품
소독약(액체염소)	L	4,000	수영장 소독
수질분석시약	시약횟수	200	염소시약
염소분석계	Hi test	1	1일 3회분석
개장현수막	7000×900	40	개장알림 현수막
가로등 배너	600×1800	40	개장알림
부스 현수막	5000×600	60	운영본부, 수유실, 응급실, 샤워실, 휴게쉼터
공지안내현수막	600×1000	10	주요 출입구 및 수영장
백월현수막	4900×2200	2	입구 배치도 등
A자 간판 양면 실사	900×1800	10	주요 안내판,공지사항,안전교육용
이중직차광막	㎡	1,000	물놀이장 인근 그늘 조성
체육시설운영보험	식	1	운영중 사고발생시 보험 처리
유원시설안전 비검사대상 신고	인허가	-	유원시설 검사 및 수질분석
무대구조안전진단	-	-	무대구조안전진단

※ 상기 시설물은 최소 사양이며, 제안서에 제시(안)에 따라 수량 조정 가능

- 탈의실, 몽골텐트 등 개량화가 불가능한 설치물은 제안서에 적정배치하여 수량 조정

기타시설	• 몽골텐트 : 물놀이장 주변으로 본부, 매점, 휴게공간 등 • 여과기 : 시간당 처리 용량 24㎥/h 이상 • 펌프 : 1.5 ~ 2.0hp 이상, 슬라이드 용 펌프 포함 • 안전을 위한 감시탑(망루)과 충분한 계단 설치 • 물놀이장 시설물 낙상 대비 충격 완화 바닥판 설치 포함 • 물놀이장 이동통로 등 노출바닥 전체를 부직포·인조잔디·방수포 등 시공 • 방송시설 : 물놀이장 전체에 안내방송 가능토록 운영. • 위험시설물 접근 방지를 위한 안전펜스 설치 • 축제 분위기 조성을 위한 만국기, 에어아치, 매점·푸드트럭 등 시설물 설치 • 현수막, A보드, 안내문 등 이용객의 불편이 없도록 설치

※ 시설규격은 최소사양으로 규격서 상 시설을 그대로 제안하는 것은 불가하며, 업체별 독창적 시설 설치·운영방안을 제안하여야 함(시설규격은 현장 여건에 따라 변경 될 수 있음)

【별지 1】

제4회 유엔남구 물놀이축제 운영일지

													결재	현장대리인					감독관
운영장소 : 용호별빛공원 2026년 월 일( 요일) 날씨 :
□ 금일 근무인력
근무분야	근무인원		성명①			성명②	성명③		성명④		성명⑤	성명⑥			성명⑦	성명⑧		근무시간
관리(시설)팀장																		: ~ :
안전관리자
안전관리요원
운영요원
야간경비
간호요원
기 타
□ 물놀이축제 이용객수
금 일					( )명					누 계							( )명
□ 시설 점검 및 안전관리
구 분		주요내용(구체적으로작성)											조치결과							확인자
물놀이 풀장
워터슬라이드
바닥매트 및 휀스
기타 물놀이 시설
배관‧ 급수‧전기시설 등
부대시설
안전교육 현황
기 타

□ 수질관리 및 청소
구 분	시 간	주요내용 및 검사결과	조치결과			확인자
물교체
수질검사	10:00
	12:00
	14:00
	16:00
물놀이시설 내부청소
일반청소(바닥매트, 주변)
□ (전일)야간순찰
구 분	주요내용(구체적으로작성)			조치결과		확인자
물놀이풀장
시설장주변
기타사고발생
□ 기타보고사항
※ 안전교육을 실시하였을 경우 시간 및 참석인원 등 기재

【별지 2】

사고발생 보고서(즉시보고)

□ 사고발생개요
○ 일 시 :
○ 장 소 :
○ 피해내용 : 인명피해 ( )명, 물적피해 ( )명
○ 사고원인 :
□ 사고자 인적사항
구분	성명	성별	생년월일	연락처	비고
사고자
보호자
※ 비고 : 부상, 경·중상, 사망 등
□ 사고내용(서술식/6하원칙)
□ 조치사항
○ 예) 부상자 병원 호송 및 가족인계조치
○
위 사실을 확인함 2026. . . 직위 : 제4회 유엔남구 물놀이축제 현장팀장 성명 : (인)