- XIOM 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 -
「XIOM 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 개막식 및 부대행사 운영 대행 용역」 과업지시서

2026. 03.

목     차

I. 과업의 일반 사항	3

1. 대회 개요	3

2. 사업 개요	3

Ⅱ. 과업의 세부 사항	4

1. 과업 개요	4

2. 주요 과업 내용	4

Ⅲ. 과업수행 지침	9

1. 과업수행 일반사항	9

2. 과업수행 특별사항	10

3. 과업 위반에 대한 조치	11

4. 경기장 출입 및 보험 조치	12

5. 보안대책 및 기타	12

6. 과업수행 성과물 관리	13

7. 성과물 제출	14

8. 협상 및 기타	14

Ⅰ		과업의 일반사항

1. 대회 개요

가. 대 회 명 : XIOM 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회

나. 기    간 : 2026년 6월 5일(금) ~ 12일(금) / 8일간

다. 장    소 : 강릉 스피드스케이팅 경기장 / 강릉 아이스 아레나

라. 주    최 : 국제탁구연맹(ITTF)

마. 주    관 : 재단법인 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 조직위원회

바. 후    원 : 문화체육관광부, 강원특별자치도, 강릉시

사. 참가규모 : 총 100여 개국 약 4,000명

2. 과업개요

가. 과 업 명 : XIOM 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 개막식 및 부대행사 운영 대행 용역

나. 기    간 : 계약일로부터 2026년 7월 31일(금)까지

다. 일    시 :

□ 개  막  식 : 2026년 6월 6일 17:00~18:30(‘90)

□ 갈 라 디 너 : 2026년 6월 9일 18:00~21:00(‘180)

□ 시  상  식 : 2026년 6월 11, 12일 시간 미정

□ 페어웰 파티 : 2026년 6월 12일 시상식 종료 직후 진행(‘120)

바. 계약방식 : 제한경쟁입찰

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조

- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준[제7장 협상에 의한 계약체결기준]

사. 예   산 : 250,000,000 (금이억오천만원정 / 부가가치세 포함)

마. 기본방향

1) 국내 최초로 개최되는 세계마스터즈탁구선수권대회의 위상을 반영한 화려하고      상징적인 개막식 및 부대행사 연출 구현
2) 한국만이 가진 고유한 특색과 탁구 종목의 가치를 극대화할 수 있는 연출 표현 구현
3) 독창적이고 세련된 연출을 통해 관람객 및 시청자에게 감동을 전달하는 무대 구성

바. 과업 범위

1) XIOM 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 개막식, 갈라디너, 시상식 및 페어웰 파티 기획, 연출, 제작, 운영, 관리 등을 포함한 해당 사업 기획 및 운영에 관한 모든 제반 사항

Ⅱ		과업지시서과업의 세부 사항

1. 과업개요

가. XIOM 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 개막식 및 부대행사의 연출안 및 세부 운영 계획을 개발하고, 기획, 구성, 예산 등 개막식 운영의 모든 제반 사항을 포함

나. 하기 명시된 과업 내용을 세부 운영 계획에 모두 반영하여야 하며, 명시된 과업 외에 과업수행을 위해 필요한 사항은 제안사의 추가 제안 가능

2. 주요과업내용

구분	종류	주요내용	비고
기획	콘셉트 기획 (개막식, 부대 행사)	종목 특성과 가치를 고려한 전체 콘셉트 계획 수립 개최 도시의 상징성을 부각할 수 있는 방안 기획
연출	공간 구성	기초 기획안 완성도 극대화 제한된 시·공간의 효율적 활용
	프로그램 (공연) 구상	전체 콘셉트를 반영한 프로그램 구상 각 프로그램별 세부 연출(안) 수립
	시스템 계획	음향·조명·특수효과 디자인 활용 계획 수립 전력 추가 첨단기술 적용 방안 마련
제작	무대 설치 및 철거	개막식, 시상식, 페어웰 등을 위한 무대 및 LED 설치 행사 후 시설 및 장비 철거, 경기장 원상복구
	프로그램 (공연) 제작	관람 및 기타 촬영에 적합한 프로그램 제작 대회 규모에 부합하는 출연자 및 출연 규모 설정
	제작물	개막식 영상 및 대회룩을 활용한 음악·의상 등 스토리보드 반영 제작(사전 제작물 포함)
운영	프로그램	행사 기획에 대한 과업 프로그램 운영(개막식, 부대행사)
	리허설	제한된 시·공간을 고려한 리허설 계획 수립 출연진 관리(안전, 보안) 및 연습 일정 공유
	본공연	본공연 및 의전 프로그램 운영 및 진행
	기타	비디오·오디오 시스템 장비 조달, 운영 및 유지보수
관리	운영 인력	감독단, 출연진, 운영 스태프 등 개막식 참가 전원에 대한 관리 계획 수립 수송·숙박·식음 등 행정 일괄 관리 출연진 프로그램 숙지 및 업무 교육 및 관리
	안전	시설물, 기타 물자 오류 발생 시 대응 체계 구축 인원 및 물자에 대한 보험 가입
	보안	리허설 포함 각 단계별 보안 계획 수립 비(非)관계자 출입 및 프로그램 발설 통제
기타	결과보고	대회 연출 전반에 대한 기록영상물 및 결과보고서 작성 및 제출
	지식재산권	특허권, 디자인권, 저작권 등 사용 권리 확보 및 관리 권리 사용 계약 체결
	기타	기타 과업 연출·제작·운영·관리에 필요한 제반·요청 사항 수행

가. 용역범위

나. 세부 과업 내용

1) 전체 콘셉트 기획

• 조직위가 제시하는 기본 계획안과 슬로건을 반영하여 개막식 및 부대행사 주제 선정

• 종목의 특성과 가치를 효과적으로 부각하는 개막식 전체 콘셉트 기획

• 개최 도시의 상징성을 강조할 수 있는 연출 방안 수립

• 독창적이고 첨단적 기술을 활용한 연출을 통해 관람객 및 시청자에 감동 전달

• 개막식 및 부대행사 전체 구성을 고려한 총괄 기획 및 세부 실행 계획 (기간별, 단계별, 프로세스별) 수립·추진

2) 공간 구성

• 기초 기획안의 완성도를 극대화할 수 있는 공간 구성 전략 수립

• 제한된 시·공간을 효율적으로 활용한 공간 구성 방안 수립

• 개막식 및 부대행사 구현에 최적화된 무대·시스템·구조물 등 설치 및 반영

• 출연진 및 참가 인원 등 주요 출입 동선계획 확립

3) 프로그램(공연) 구상

• 전체 콘셉트를 반영하여 세부 프로그램별 계획 수립

• 신(Scene)별 연출·출연 규모·동선계획·음악·촬영·특수효과·제작물 등 종합적 구성

• 조직위 및 ITTF 이해를 도울 가시적 자료 준비(스토리보드, 이미지, 영상 등)

4) 시스템 계획

• 세부 계획안에 최적화된 효율적인 시스템 계획 수립

• 전체 시스템 배치도를 포함한 무대·음향·조명·특수효과·제작물·전력 등에 대한 종합 운영 계획 구축 및 실행

• 대회 진행에 차질이 없도록 최적의 장비 시스템 확보, 경기장과 기존 시설에 적합한 상태로 설치 및 운영

5) 프로그램 제작

• 전체 콘셉트와 세부 계획안에 따른 프로그램 제작

• 관람 및 기타 촬영 환경을 고려한 연출 및 구성 요소 반영하여 제작

• 대회 규모에 걸맞은 출연진 및 출연 규모 설정

• 레거시 측면을 고려한 프로그램 및 제작물 기획 및 제작

6) 제작물 계획

• 대회룩과 전체 콘셉트에 맞는 제작물 총괄 기획

• 전체 제작물 계획을 포함한 (사전)영상물·음악·출연자·대·소형 연출물·의상·소품 등에 스토리보드 반영하여 제공

7) 리허설 운영

• 제한된 시·공간을 고려한 리허설 운영 계획 수립 및 수행

- 시스템: 대회 전 수시 진행

- 출연진: 최소 1회 리허설 필수

- 시상식 진행 인력: ’26년 6월 11 및 12일, 2회 리허설 진행 (시간 미정)

• 프로그램 완성도 제고를 위한 출연진 관리 및 연습 일정 공유

8) 본공연 운영

• 제작 운영단 업무 범위 설정 및 프로그램 단계별 운영 진행

• 참석 내빈에 따른 의전 프로그램(개회사, 축사 등) 대책 수립 및 운영

9) 운영 인력 관리

• 감독단: 대회 전담 PM 선정 외 전문 인력 섭외 및 계획 수립

• 출연진: 주요 프로필 제시, 섭외·교육·운영·관리 계획 수립

• 운영 스태프: 시스템 운영에 필요한 분야별 전문 인력 섭외 및 업무별 구성 및 배치 계획 수립

10) 이외 기타 운영 인력에 대한 근태관리

• 운영 인력에 대한 수송·숙박·식음 등 행정 업무 일괄 관리

11) 안전관리

• 모든 운영에 있어서 안전을 최우선으로 고려

• 무대 등 제작물, 시스템, 기타 물자 오류 발생에 대한 대응 체계 구축

• 운영 인력의 불참, 응급환자 발생 등에 대한 긴급상황 발생 대응 체계 수립

• 수송·숙박·식음 등에 대한 문제 상황 발생 관련 관리 체계 수립

• 인원 및 물자에 대한 보험 가입 추진

12) 보안 관리

• 리허설 포함 전(全) 단계별 보안 계획 수립

• 비 관계자 출입 및 프로그램, 대회 보안 운영 계획 등의 유출 통제

13) 기타 개막식 연출 전반에 대한 사항

• 특허권, 디자인권, 저작권 등 지식재산권이나 초상권에 대한 사용 권리 획득

• 기 창작된 저작물 등에 대한 권리 사용 계약 체결 후 조직위 제출

• 기타 개막식 연출·제작·운영·관리에 필요한 제반 사항 수행

다. 과업 추진 일정

2026. 03. ~ 2026. 06.
번호	내용	추진 일정															기간 (주)
		`26. 03.			`26. 04.					`26. 05.				`26. 06.
1	용역 공고 및 과업수행자 선정																4주
2	전체 콘셉트 및 프로그램 기획																2주
3	세부 프로그램 구성 및 섭외																4주
4	음악, 연출, 조명 등 시스템 제작																4주
5	프로그램 장비 및 의상, 물자 준비																4주
6	시나리오 완성																3주
7	출연진 연습																6주
8	디지털 디자인																4주
9	촬영물 및 송출용 영상 제작																4주
10	무대 설치 및 중간 리허설																2주
11	피드백																2주
12	최종 리허설																1주

라. 보고 방식

1) 착수 보고

• 착수 보고는 계약 체결일로부터 2주 이내 실시함

2) 상시/기타 보고

• 본 과업 기간 중 조직위 요청이 있을 경우, 과업 수행 현황 수시 보고

• 변경보고 : 업무의 수행 방법 및 산출물의 변경 발생 시 즉시 보고

• 보고 내용에 대하여 조직위의 지시 사항 (서면 지시 포함)이 있을 때, 지시 사항을 성실히 수행하고 조치 결과를 서면으로 제출하여야 함.

• 당일 보고 사항 각 FA별 조직위 PM에게 보고

3) 결과 보고

• 사업 종료 후, 개막식 및 부대행사 준비 장면, 영상 및 제작물 등 이미지, 운영장면 등을 포함한 결과보고서 제출 (2026년 7월 10일(금)까지)

• 결과보고서 내용, 순서 및 편집 방법 등 조직위와 사전 협의

Ⅲ		과업수행 지침

1. 과업수행 일반사항

가. 과업수행자는 본 제안요청서 (과업지시서)의 내용 및 계약서에 명시된 계약조건 등을 성실히 이행하여야 하며, 본 과업과 관련한 모든 중요한 사항은 조직위의 사전 서면 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

나. 과업수행자는 현장여건을 조사한 후 개막식 및 부대행사에 필요한 시스템의 규모, 주요 시설물, 작업 범위 등을 파악하여 운영 계획에 반영하고 완료 후 조직위와 협의하여 확정된 내용에 따라 프로그램을 구성하여야 한다.

다. 시설물의 형태와 크기 등의 조정이 필요한 경우, 과업수행자는 조직위 또는 조직위의 위임을 받은 자와 사전에 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

라. 조직위는 과업수행자에 대한 정기 또는 수시 점검을 시행할 수 있으며, 과업수행자는 조직위의 시정 요구에 따르는 경우 시설물 안전에 지장을 초래하는 등의 특별한 사유가 없는 한 조직위와 협의하여 지적사항을 바로잡아야 한다.

마. 과업수행자는 현장대리인 등 당해 사업을 위하여 임명, 지정, 고용한 자의 관련 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 지며, 현장대리인 또는 과업수행자의 고용인 및 노무자 등이 본 과업수행 또는 관리에 부적당하다고 인정될 경우, 조직위는 원활한 사업 추진을 위하여 과업수행자에 대하여 이들의 교체를 요구할 수 있고 특별한 사유가 없는 한 과업수행자는 이에 응하여야 한다.

바. 과업수행자는 관계 법규에 따른 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 과업수행자의 고의 또는 과실로 인하여 발생하는 사고 및 이로 인한 손해에 대하여 법적 책임을 져야한다.

사. 과업수행자는 본 과업을 수행하는 과정에서 관계 법률 및 계약에 저촉되는 행위로 인해 조직위가 입게 된 모든 손해를 배상하여야 한다.

아. 과업수행자는 과업수행에 필요한 전문 지식과 인력을 최대한 활용하기 위해 용역계약금액 내에서 국내외 전문가의 자문이나 외부 인력을 활용할 수 있다.

자. 과업수행자는 용역 착수와 함께 과업내역에 정통하고 충분한 지식을 갖춘 자를 책임수행자로 임명하고 책임수행자는 과업내역에 명시된 업무와 계약조건 이행을 위한 중요 사항에 대하여 조직위와 협의한다.

차. 용역계약서 및 과업지시서 상의 해석에 대하여 조직위와 과업수행자 상호 간의 이견이 있을 때는 조직위의 해석에 따른다.

카. 과업수행자의 고의 또는 과실로 인하여 중대한 하자가 발생한 경우에는 과업수행자의 부담으로 이를 즉시 보완하여 과업을 수행하여야 한다.

타. 과업수행자는 과업수행과정에서 발견된 문제점 등에 대해서는 충분한 검토와 조직위와의 협의를 통해 최선의 대안을 찾아야 한다.

파. 과업수행자는 운영 인력에 대한 숙식 및 이동에 대한 모든 비용을 포함하여 출장비 일체를 계약금액에 반영하여야 한다.

하. 과업수행자는 용역에 따른 종합보험을 가입, 관계 종사원에 대한 산재 보험 가입 등 노동 관계법에 따른 사용자로서의 모든 책임을 진다.

2. 과업수행 특별사항

가. 위 과업지시서는 과업수행을 위한 기본 사항들을 규정하였으며, 이 규정에 명시되지 않은 사항이라도 조직위의 요청 또는 과업수행자가 용역 수행과정에서 부득이한 사유가 발생하여 필요하다고 인정되는 사항은 조직위와 협의를 거쳐 과업 내용에 포함할 수 있다.

나. 과업지시서상 용어해석의 차이가 있을 경우에는 감독원과 수급인이 상호 협의하여 결정하여야 한다.

다. 조직위가 과업변경이 필요하다고 인정하여 과업변경을 요구할 경우, 과업수행자는 조직위의 요구사항에 따라야 한다. 과업수행자의 책임 없는 사유로 인한 과업 변경으로 과업량이 증가된 경우에는 계약 금액을 조정해야 하며, 과업 내용에 누락된 경미한 사항은 과업수행자의 부담으로 시행한다.

라. 조직위로부터 계획 변경 등으로 인한 추가 과업을 요청받은 경우, 과업수행자는 산출내역서에 따라 설치 가격을 산정하여 과업 변경에 대한 검토서를 제출하여야 하며, 조직위로부터 추가 과업 내용 및 비용에 대한 서면 승인을 받은 후 과업에 착수하여야 한다.

마. 과업 목적물이 행사 시작 전에 파손, 오염, 분실, 변형되는 경우, 과업수행자가 교체, 원상복구, 손해배상 등에 대한 일체의 책임을 진다.

바. 과업수행자는 과업 목적물의 유지관리를 위하여 현장관리에 필요한 인원을 조직위가 지정한 장소 또는 현장에 상주시켜야 한다.

사. 경기장 조성을 비롯한 다양한 공정이 8일 이내 한 공간에서 이루어지므로, 이를 고려한 장비 및 시스템 구축 세부 계획이 마련되어야 한다.

아. 과업수행자는 과업 지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업 목적 달성을 위하여 필요하다고 판단되는 경우, 조직위에 이를 보고하여 승인을 득한 후 추가 과업을 수행하여야 한다. 단, 조직위의 승인을 받을 수 없을 정도로 긴급한 경우에는 우선 조치 후 즉시 조직위에 보고하여야 한다.

3. 과업위반에 대한 조치

가. 조직위는 과업수행자가 과업 내용을 이해하지 않는 등 계약조건에서 정한 사유가 발생한 경우에는 당해 계약의 일부 또는 전부를 해지할 수 있다.

나. 다음 각호의 경우 조직위는 본 과업의 전부 또는 일부 정지를 명할 수 있으며, 이 경우 과업수행자는 정지 기간 중 선량한 관리자의 주의의무를 해태하여서는 아니 된다. 과업수행자는 자신의 책임 없는 사유가 아닌 한, 계약기간의 연장 또는 추가 금액을 청구할 수 없다.

• 용역의 수행이 계약 내용과 일치하지 아니하는 경우

• 안전을 위해 용역의 전부 또는 일부의 정지가 필요한 경우

• 기타 발주기관의 필요에 의하여 계약 담당자가 지시한 경우

4. 경기장 출입 및 보험 조치

가. 본 대회의 개최 장소는 일반인의 출입이 통제되는 곳으로 과업수행자는 신분이 명확한 직원으로 과업 수행 인력을 구성하고 이들에게 경기장 운영‧안전교육을 하여 주의사항을 숙지시켜야 함.

나. 과업수행자가 지정한 경기장 출입 인력은 사전 신원조회 후 출입증이 발급된 자만 출입이 가능함.

다. 과업수행자는 사전에 허가된 장소에만 출입할 수 있음. 과업수행을 위하여 불가피하게 출입이 허가된 장소 이외의 장소에 출입하여야 하는 경우, 조직위로부터 사전 승인을 받아야 함.

라. 과업수행자는 본 과업수행 인력 등 관련자에 대한 상해보험에 가입하여야 하며, 본 과업을 수행하는 데 고의 또는 과실로 본 과업 목적물 또는 제3자에게 재산상 손해가 발생한 경우 그 배상을 담보하는 용역손해배상보험 또는 공제증서를 조직위에 제출하여야 함.

5. 보안 대책 및 기타

가. 과업수행자는 조직위에 필요한 보안 관계 법규 등을 준수하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 과업수행자가 부담하여야 한다.

나. 과업참여자를 교체하기 위해서는 사전에 조직위의 승인을 받아야 하며, 과업수행에 차질이 없도록, 참여자 간 인수인계를 철저히 하여야 한다.

다. 과업수행자는 과업수행 과정에서 취득한 정보에 대해 외부에 누설해서는 아니 되며, 과업 종료 후 조직위가 지정한 “중요자료”를 영구삭제 조치하고 조직위의 확인을 받아야 한다.

라. 과업수행자는 과업수행과 관련된 문서, 자료 등을 과업수행 이외의 목적으로 사용할 수 없으며, 조직위의 사전 서면동의 없이 타인에게 제공할 수 없다.

마. 과업수행 중 주요 시설물의 상황, 지자체 및 관계기관과의 협의 결과, 조직위의 정책 또는 계획이 변경되는 등 불가피한 사유가 발생하는 경우, 조직위는 본 과업의 일부 또는 전부를 중단하거나 과업 지시 내용을 변경할 수 있다.

바. 과업수행자는 본 과업수행에 따른 주요 내용을 문서로 작성·보관하여야 하며, 조직위의 제출 요구가 있을 때는 이에 따라야 한다. 본 과업의 종료 후에라도 조직위는 그러한 자료의 작성·제출을 요구할 수 있다.

사. 과업 내용에 대하여 재검토 또는 보완이 필요한 경우 과업수행자는 본 과업의 종료 후에라도 재검토 보완하여야 하며, 이에 따른 추가 비용은 조직위와 협의하여 결정한다.

6. 과업수행 성과물 관리

가. 본 과업의 성과물은 조직위의 검사를 받아야 하며, 조직위가 검사에 필요한 자료 및 보충 설명서 등을 요구할 경우 과업수행자는 이에 응하여야 한다.

나. 본 과업의 성과물이 과업수행지침의 내용과 상이하거나 그 요구수준에 미달하여 조직위의 보완 요구가 있는 경우, 과업수행자는 즉시 자신의 부담으로 성과물을 수정‧보완하여야 한다. 성과물과 과업수행지침의 내용이 상이한지에 대한 판단은 조직위가 하며, 해당 성과물이 과업수행지침의 내용에 부합한다는 입증책임은 과업수행자에게 있다.

다. 본 계약목적물은 사전에 국제탁구연맹(ITTF) 등의 승인을 받게 되는 국제 대회라는 특수성을 고려했을 때 모든 성과물에 대한 권리는 조직위에 귀속된다.

라. 본 과업의 성과물의 구성 부분 중 일부가 제3자의 지식재산물 (특허물, 저작물 등)을 침해하여 분쟁이 발생하면 계약상대자는 민·형사상 모든 책임을 져야 한다.

마. 과업수행자는 조직위의 사전 승인 없이 본 과업과 관련하여 입수‧취득한 자료(구매 자료, 관련 자료 분석물, 전산 프로그램 및 저작물 포함), 권리(사용권 등) 및 산출물을 과업수행 외의 목적으로 사용하거나 제3자에게 제공할 수 없으며, 기타 영리‧홍보 목적으로 배포할 수 없다.

바. 과업수행자는 본 과업에 따라 발생한 결과물 일체에 대하여 과업수행자의 이름으로 업무표장 또는 상표, 디자인 등 지식재산권 출원‧등록을 할 수 없다. 본 과업에 따라 발생한 결과물 일체에 대한 업무표장 및 상표, 디자인 등 지식재산권은 반드시 조직위 또는 조직위가 지정하는 자의 이름으로 출원‧등록되며, 과업수행자는 이에 따른 등록‧출원 절차 진행에 협조한다.

7. 성과물 제출

가. 대회 종료 후 대회 연출 진행 전반을 촬영한 기록 영상물과 기획 단계부터 시행 결과까지를 총괄하는 종합보고서 형태의 용역결과보고서 등 아래 성과물을 2026년 7월 10일(금)까지 제출하여야 한다.

나. 결과보고서는 내용, 순서, 편집 방법 등을 조직위와 사전 협의하여야 하며 사전에 원고 및 구성계획을 작성하여 조직위의 검사를 받은 후 인쇄, 작성하여야 하고 제출 전에 조직위 사전 승인을 득하여야 한다.

다. 성과품은 원본을 제출하여야 하며 파손 등에 의해 부득이 불가능할 때에는 재제작하여 제출하여야 한다.

라. 제작물, 지적재산권 등 과업 수행으로 인해 발생하는 성과품은 조직위의 소유로 하고, 조직위 승인 없이 제3자에게 제공하거나, 과업목적 이외에 사용할 수 없으며 과업수행자는 성과품 사후처리를 사후 활용계획 등과 연동하여 조직위와 협의하여 진행한다.

구 분	형 태	수 량
행사결과보고서	책자	10부
	USB 또는 외장하드	2개
기록영상 및 사진	책자	2부
	USB 또는 외장하드	2개
기타 조직위가 요구하는 성과물	협회/조직위의 요청 형태	요청 수량

*상기 성과물은 추후 변동 가능

8. 협상 및 기타

가. 사업목적 수행을 위하여 보다 효율적이라고 판단될 경우 양측이 협의하여 제안한 안을 변경하여 추진할 수 있다.

나. 계약 체결 후 계획(용역내용)이 변경될 수 있으며, 과업내용 변경의 경우 기획재정부 계약예규에 따라 조정한다.

끝.