과업지시서

「한국의 갯벌」세계유산위원회 전시홍보관 설치 및 운영 용역

2026. 4.

Ⅰ		과업의 개요

□ 과 업 명 : 「한국의 갯벌」 세계유산위원회 전시홍보관 설치 및 운영

□ 과업 필요성

ㅇ 제48차 세계유산위원회 개최 및 「한국의 갯벌」 세계유산 등재 (신청)에 따른 국제적 홍보 플랫폼 구축 및 선도적 자연유산 관리 모델 제시

ㅇ 세계유산의 OUV 보전을 위한 소통 공간을 제공함으로써, 「한국의 갯벌」의 가치 보전 성과에 대한 공감대를 형성하고 지속가능한 협력 네트워크 구축

□ 과업목적

ㅇ 「한국의 갯벌」의 탁월한 보편적 가치(OUV) 및 보전·관리 성과를 국제사회에 전문적□체계적 홍보

ㅇ 세계유산위원 및 국내외 전문가 대상 교류 및 소통 프로그램을 통해 「한국의 갯벌」 국제적 인지도를 제고하고 우호적 협력 관계 형성

ㅇ 휴식 기능과 홍보 콘텐츠가 유기적으로 결합된 복합 공간을 구현하여 참석자의 체류 만족도 극대화 및 홍보 효과 제고

□ 기초금액 : 총 174,000,000원(부가세 포함)

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

□ 과업기간 : 계약일로부터 2026년 7월 31일까지

□ 주요내용 : 홍보부스 및 휴식존 조성 및 운영, 체험·홍보 프로그램 운영, 교류·협력 등

Ⅱ		과업의 범위

□ 시간적 범위

ㅇ 2026년 5 ~ 7월 (세계유산위원회 기간 7. 19. ~ 7. 29.).

□ 공간적 범위

ㅇ 부산 벡스코 행사장 일원

- 홍보부스 : 제1전시관 2B, 3A홀

- 휴식존 : 제1전시관 내 1홀 앞 로비 구역

- 교류·협력 : 벡스코 주변 회의실 등

※ 공간 범위는 세계유산위원회 가이드라인에 따라 변동될 수 있음

□ 내용적 범위

ㅇ 홍보부스 조성 및 운영

- 연속유산으로서 연속성을 강조하는 통합형 홍보부스(목공부스 우선) 조성

- 한국의 갯벌, 지역별 갯벌, 국제 협력 등 부스 내 컨셉 구성

- 한국의 갯벌 부스 홍보를 위한 이벤트 및 체험 프로그램 기획 및 운영 등

ㅇ 휴식존 조성 및 운영

- 몰입형 미디어를 통한 한국의 갯벌 OUV 부각하는 대형 LED 설치

- 자연스러운 교류와 네트워킹을 유도하는 오픈 스페이스형 글로벌 소통 라운지 운영

ㅇ 교류·협력 프로그램(부대행사)

- 국제기관(기구) 초청 라운드 테이블 회의 개최

- 주요 내·외빈 및 방문객 제공 기념품 제작

ㅇ 공통 운영

- 설계, 전기, 통신, 운반, 설치, 철거, 폐기물 처리 등 벡스코 내 전시홍보관 전 과정 일체 포함

- 벡스코 전시 가이드라인 준용

Ⅲ		과업의 세부내용

□ 홍보부스 조성 및 운영

□ 과업 개요

ㅇ 위  치 : 제1전시관 내 2B, 3A홀

ㅇ 면  적 : 108㎡(3m×3m 부스 12개)

ㅇ 설치기간 : 2026년 7월 16일 08:00 ~ 2026년 7월 18일 21:00

ㅇ 철거기간 : 2026년 7월 31일까지(철거시간: 08:00~20:00)

□ 추진방향

ㅇ ‘한국의 갯벌’이라는 단일 유산으로서의 통합 브랜딩 및 유산 구역별
지형적 특성과 고유한 생태적 가치를 조화롭게 연출

- 범국가적 유산 홍보와 지역별 특수성이 공존하는 다층적 전시

ㅇ 전 지구적 관점의 ‘하나의 바다, 하나의 갯벌’을 테마로 갯벌의 국제적․생태적 연결성 강조 및 공동 보전 노력을 위한 비전 제시

ㅇ 세계유산 등재 기준인 생물학적 다양성의 현장 보존에 대한 중요성 및 의미를 전달하는 조형물 및 콘텐츠 구성

□ 세부 과업 내용

① 부스 구성 계획 수립

부스 구성	주요 내용
한국의 갯벌존	- 등재 의미, 핵심가치, 연속유산의 중요도, 연속성
지역별 갯벌존	- 지역별 갯벌의 주요 생물종 및 물새 소개 생태적 기능, 갯벌의 차이 설명
국제 협력존	- 환황해권 교류·협력 사례 - 국제기구 교류·협력 사례
체험·이벤트존	- VR 체험 및 참여형 이벤트 - 통합 안내데스크 제작

※ 모든 전시물의 설명문은 국□영문 병기 필요

ㅇ 한국의 갯벌존

- 한국의 갯벌 등재추진단 보유 자료를 활용하여 내용 제작 및 편집

· 한국의 갯벌 전용 LED 스크린 최소 1개 이상

· 등재 의미, 핵심 가치, 연속유산의 중요도 내용 포함 및 연계성 강조
※ 등재 지역(1단계) 및 등재 예정 지역(2단계) 구분

ㅇ 지역별 갯벌존

- 추진단 보유 영상 및 사진 등을 활용하여 구성

· 전용 LED 스크린 최소 2개 이상

· 9개 지역별 갯벌의 주요 생물종 및 물새 소개

· 생태적 기능, 갯벌의 차이 등 설명

· 지역별 특색을 강조한 색상 및 디자인 구성

· 등재 지역과 예정 지역이 그라데이션으로 이어질 수 있는 공간 구성 및 배치
※ 지역별 중복 내용 지양

ㅇ 국제 협력존

- 추진단 보유 자료 및 추가 제공 자료를 활용하여 구성

· 각 교류·협력 사례 전용 LED 스크린 최소 1개 이상

· 환황해권 교류□협력 사례 : 중국 옌청 습지센터 MOU 사례 및 사진 전시

· 국제기구 교류□협력 사례 : EAAFP(동아시아-대양주 철새이동경로 파트너쉽), CEPA 등

ㅇ 체험□이벤트존

- 추진단 보유 VR 활용 체험 구성

· 체험□이벤트 존 전용 터치 스크린 최소 2개 이상 구비

· VR을 활용 갯벌의 생태와 가치를 직접 체험할 수 있는 구성

· 갯벌 보전 다짐과 메시지를 공유하는 소통의 공간으로 구성(소원 트리 등)

· 참여형 이벤트 진행 및 바이럴 유도(기념품 뽑기 기회 활용 등)

- 별도 통합 안내데스크 제작(포토존으로 활용할 수 있는 디자인)

ㅇ 전체 구성

- (연출) 목공부스 우선, 먼저 각 지역별 갯벌을 설명하되 결국 하나의 한국의 갯벌로 이어지는 통합적 연출, 나아가 환황해권을 넘어서 세계까지 연결

※ 지역별 갯벌존 → 한국의 갯벌존 → 국제 협력존 순

- (소품 구성) 갯벌의 뻘을 형상화한 빔, 어도구를 형상화한 등롱 조명 및 모형 활용과 갯벌의 감성을 담은 조개, 조약돌 및 러그 배치, 갯벌 생물을 형상화한 사인물 제작을 통해 갯벌의 정체성 시각화

- (벽면 구성) 갯벌 사진 및 설명을 통해 디자인 일관성 유지

- (영상 송출) LED 스크린 설치를 통해 지역별 갯벌의 생동감과 아름다움, 물새 및 주요 생물종 안내(추진단 영상 활용)

- (이벤트·체험) 갯벌 관련 메시지 작성 및 기념품 제공

- (안내데스크) 포토존으로 활용할 수 있는 디자인 제작, 지자체 리플렛 비치

▲ 참고 이미지

② 부스 운영 계획 수립

ㅇ 7월 19일 ~ 7월 29일 총 11일간 전문 운영 인력 및 필요 물품 산출 등

③ 이벤트 운영

ㅇ 체험형 이벤트 운영 계획 수립

- 한국 갯벌의 OUV(Outstanding Universal Value), 탁월한 보편적 가치를 행사 참여자 및 주변인에게도 널리 알릴 수 있는 체험형□소통형 이벤트 운영

예 시	내 용	사 진
갯벌 생물을 잡아보자	시트지 등을 활용한 갯벌 디자인의 불투명 상자와 그 안에 들어갈 갯벌 생물 모형 준비, 참여자가 무작위의 모형을 뽑고 해당 모형에 대해 기념품 증정

예 시	내 용	사 진
갯벌 메시지 럭키 드로우	세계유산 한국의 갯벌에 대한 관심이나 소감 등을 갯벌 관련 디자인(새 깃털 등)의 종이에 적어 준비된 게시판(새 모양 등)에 게시할 시 기념품 획득용 돌림판 기회 증정, 추가 기념품 돌림판 기회를 원할 경우 해당 종이를 SNS에 게시할 시 추가 기회 증정

ㅇ 이벤트 기념품 제작 예시

예 시	사 진	예 시	사 진	예 시	사 진
인형		키링		자석

※ 추진단 보유 캐릭터 활용(AI 파일 제공) 기념품 제작

④ 인원 편성 및 배치 계획

ㅇ 용역사 2명* 이상

※ 영어 가능자 및 이벤트 운영 인력 포함

ㅇ 등재 및 신청 세계유산의 홍보부스 안내 및 홍보물 배부 등

ㅇ 세계유산, 연속유산, 갯벌, 한국의 세계유산 등 관련 내용 설명

ㅇ 체험 및 이벤트 참여 방문객 대응

⑤ 현장 운영 결과 보고

ㅇ 방문 인원 통계 및 운영 사진 등

□ 설치 환경 및 예시

① 설치장소

ㅇ 제1전시관 내 2B, 3A홀(변경 가능)

▲ 도면 및 사진(2B, 3A홀)

② 예시

▲ 입구	▲ 사인물
▲ 안내데스크	▲ 체험
▲ 행사	▲ 천장

□ 휴식존 조성 및 운영

□ 과업 개요

ㅇ 콘셉트(안) : 쉼, 만남, 갯벌을 느끼다(Rest, Connect. Feeling the Getbol, Korean Tidal flats)

ㅇ 위  치 : 제1전시관 내 1홀 앞 로비 구역 ※ 발주처 요구에 따라 구역 및 면적 변동 가능

ㅇ 면  적 : 81㎡(27m×3m)

ㅇ 설치기간 : 2026년 7월 17일 08:00 ~ 2026년 7월 18일 21:00

ㅇ 철거기간 : 2026년 7월 30일까지(철거시간: 08:00~20:00)※ 행사 일정에 따라 변동 가능

□ 세부 과업 내용

① 공간 및 동선 연출

ㅇ 오픈에어(Open-air) 분위기 구현

- 벡스코의 높은 층고와 유리 커튼월의 채광을 최대한 활용하며, 양방향 동선 중심의 상시 개방형 구조를 통해 시각적 청량감과 공간감을 확보해야 함

- 가림막 설치는 지양하되, 바닥 마감재의 변화나 디자인 경계 요소를 활용하여 통행로와 자연스럽게 분리된 전용 휴식 공간을 조성해야 함

ㅇ 자연과 조화된 공간 연출

- 갯벌의 유기적인 공간과 해안선의 미학 등과 같이 자연적 요소를 공간 설계 모티프로 활용해야 함

- 벡스코의 현대적 인테리어와 조화를 이루도록 한국의 갯벌의 생물다양성, 물새등을 고려한 가구, 디자인, 색채 계획, 공간 연출 등에 반영해야 함

ㅇ 사용자 편의 중심 동선 및 안전 설계

- 주 출입구로부터 최소 8m 이상의 충분한 이격거리를 설정하여, 유동 인원의 병목 현상을 방지하고 보행자의 안전과 편의를 최우선적으로 확보해야 함

② 고해상도 LED 스크린 구축

ㅇ 대형 LED 스크린 구축 및 사양

- 휴식존 중간에 대형 LED스크린(W 9m×H 4m)을 안전하게 설치하여 시각적 기반 마련해야 함

- 실내조명 및 채광 환경에서도 선명한 화질을 유지할 수 있는 패널 설치, 화면 간 왜곡이 없는 최적의 시야각 확보해야 함

ㅇ 대형 LED 스크린 마감

- LED 스크린 설치 시, 양측면 및 배면 전체를 휴식존 공간과 일체감 마감해야 함

- 구조물 및 배선이 외부로 노출되지 않도록 풀 클로징(Full-Closing) 시공을 원칙으로 하되, 비상시 정비를 위한 점검구(Door)를 외관 디자인을 해치지 않도록 설치해야 함

- LED 스크린 하단 0.3~0.5m의 단을 조성하여 최대 4.5m 높이의 구조물을 설치해야 함

- 벡스코 규정에 따라 필요시 구조안전진단서를 제출해야하므로, 제반되는 비용은 과업 수행자가 지출해야 함

ㅇ 영상 및 음향 송출 시스템 운영 및 기술 지원

- 영상이 원활하게 송출될 수 있도록 영상 업체와 상의하에 고성능 컨트롤러 및 운영 PC, 통합 배선 시스템, 음향 시설 등을 완벽히 구축해야 함

- 대형 스크린의 무게를 고려하여 전도 방지 설계를 적용하여 견고하게 지지 구조물을 설치해야 함

- 주 회의장(제1전시관 1홀) 앞에 설치되어 회의 진행과 보행 동선에 방해되지 않도록 근거리용 스피거 또는 현장 상황에 따라 즉시 볼륨 조절이 가능한 제어 환경을 갖춘 스피커를 갖춰야 함

③ 바닥재 및 소품 조성

ㅇ 바닥재 조성 및 안전 관리

- 휴식존 전체 면적(81㎡)에 대하여 화재 안전성을 확보한 방염 인증된 소재
(파인텍스 등)를 부착 시공해야 함

- 바닥재 시공 시 기존 바닥과 단차를 최소화하여 보행자의 걸림 사고를 방지하고 시각적으로 깔끔한 공간 분리 효과를 제공해야 함

ㅇ 가구 및 편의 기능 인프라 구축

- 참석자의 다양한 휴식 형태를 고려하여 한국의 갯벌 내 생물 다양성, 물새 등을 활용하여 창의적인 디자인을 적용한 테이블, 벤치, 스툴 등을 조화롭게 배치하여야 함

- 본 구역은 폭 3m의 협소한 공간인 점을 고려하여, 보행 동선에 문제가 없도록 테이블(소형) 5개 이상, 벤치 또는 스툴 등 3개 이상 배치해야 하며, 모든 가구는 장시간 사용에도 변형이 없는 견고한 소재를 사용해야 함

- 모든 테이블에 개인 노트북, 핸드폰 등을 활용하기 위한 매립형 콘센트 및 USB 전용 충전 포트를 설치하고, 전선 노출을 최소화한 시공을 시행해야 함

④ 운영

ㅇ LED 스크린 사전 점검

- ‘26년 7월 17일 오후 15시까지 LED 스크린을 설치하여 실제 송출용 영상으로 전면 시운전을 실시하여 영상의 왜곡, 불균형, 신호 끊김 등 하드웨어 전반의 이상 유무를 점검해야 함

- 점검 시 수행사는 전문 기술 인력 1인 이상을 현장에 상주시켜 발주처와 공동 점검을 시행해야 하며, 현장에서 발견된 기술적 결함 및 보정 사항은 즉각 조치하여야 함

ㅇ LED 스크린 관련 기술적 인력 운영

- 위원회 기간 중 영상 끊김이나 하드웨어 오작동이 없도록 시스템을 상시 점검하며, 기기 장애 발생 시 10분 이내의 즉각적인 현장 복구가 가능한 전문 기술 인력 1인 이상을 상주시켜 운용해야 함

- 위원회 기간 중 국가유산청의 요청에 따라 LED 스크린에 자막, 안내문 등을 띄울 수 있으므로, 해당 기술적인 부분 요청에 대해 대응해야 함

ㅇ 현장 안전 관리

- 행사 기간 중 용역사는 1인 이상을 배치하여 시설물의 파손, 들뜸, 흔들림 등을 매일 상시 점검해야 하며 즉각적인 보수 조치 및 통제를 하여 2차 사고를 예방해야 함

□ 설치 환경 및 시스템 사양

① 설치장소

ㅇ 제1전시관 내 1홀 앞 로비 구역

▲ 도면 및 사진(1홀 로비 전면부)

②  시스템 최소 사양

ㅇ LED 스크린 모듈

- 화면 크기 : W 9,000㎜ × H 4,000㎜ (설치 환경에 따라 조정 가능)

- 픽셀 피치(Pixel Pitch) : 2.5㎜ 이하 (고해상도 구현) ※ 데드 픽셀(Dead Pixel) 점검 필요

- LED 소자 : SMD – 3 – in –1 (Black Type)

- 밝기 : 800 ~ 1,300nit 이상 (실내 채광 대응)

- 주사율(Refresh Rate) : 3,840㎐ 이상 (촬영 시 플리커 방지)

- 시야각 : 수평 160도, 수직 140도 이상 (광 시야각 확보)

- 명암비 : 5,000 : 1 (심도있는 색 표현)

- 제어시스템 : 원격 또는 동기제어 방식(안정적 송출 및 실시간 화면 보정 지원)

- LED 스크린의 전력 공급이 원활하도록 설치   ※ 배선 및 간선 작업 등 전기공사 일체

- 설치 구조 : 자립형 스탠드 구조(전도 방지 및 하중 설계 반영 필수)

□ 교류·협력 프로그램(부대행사)

ㅇ 운영기간 : 2026년 7월 19일 ~ 2026년 7월 29일 중 1회 이상

ㅇ 세계자연유산, 황해권 갯벌의 지속가능한 보전을 위한 라운드 테이블 개최

- 옌청습지보호센터 관계자, 추진단 집필진 등 참여 회의

※ 회의 장소 대관, 현수막, 기념 오·만찬 등 편성

ㅇ 주요 기관, 단체, 인물 별도 기념품 제작 및 제공

※ 한국의 갯벌 정체성 강조, 스토리텔링이 담긴 디자인 기획

Ⅳ		추진일정 및 과업성과물 제출

□ 추진일정 ※ 발주처 및 유산청 협의에 따라 일정 변동 가능

세 부 내 용	추 진 일 정(월)
	5		6		7
	상순	하순	상순	하순	상순	하순
○ 발주처 및 국가유산청 협의
착수보고
최종보고
수시보고
실시설계 최종확정
물품 및 조성 감리
○ 디자인 설계
컨셉 및 기획 조정
세부 파트별 디자인 설계
실시설계 완료
전시 내용 편집 및 검수
이벤트 진행 및 기념품 제작 협의
물품 제작 발주
○ 전시공간 조성 및 장비 설치(휴식존 : 7월17일 08:00 ~ 7월18일 20:00, 홍보부스 : 7월16일 08:00 ~ 7월18일 20:00)
인테리어(조명, 색채, 바닥 등)조성
콘텐츠 탑재
영상/음향/통신테스트
공간조성 및 개선 공사
구조안전 진단 및 구조물 보강
사인물 부착, 준공청소
○ 시범운영 및 시스템 점검
인프라 운영/ 구현 제반사항 조정
○ 영상 송출 및 운영
영상 송출 및 안전관리 등
○ 전시홍보관 운영
인력 배치, 안내 및 이벤트 진행
○ 교류□협력프로그램(부대행사)
회의 사전 준비 및 진행 보조
○ 종료
전시홍보관(휴식존, 홍보부스) 철거
최종 성과품 납품

□ 과업 성과물 ※ 발주처와 협의하여 성과물 변동 가능

ㅇ 과업 성과물은 다음과 같이 제출시기에 맞춰 공문, 이메일로 제출해야 한다.

ㅇ 성과물에 결정적인 오류가 있을 때에는 발주처는 성과품의 재제작을 요구할 수 있으며, 계약자는 발주처의 요구에 응해야 한다.

ㅇ 과업이 완료된 후라도 성과품의 미비사항이 발생할 경우 최종 성과품에 그 내용을 즉시 보완하여 제출하여야 한다.

[전시홍보관(휴식존□홍보부스)]

구 분	제 출 시 기	제출부수	비 고
실시 설계도면	과업종료 시	1부, 이메일	PDF, CAD 등 작업 파일
결과보고서	과업종료 시	1부	공간 조성 사진 방염 필증 및 안전 점검 결과서, 집행 내역 등
원자료, 사진자료	요청 시, 과업종료 시	USB 1개, 이메일	현장기록사진 및 영상 설계도면 및 디자인 파일

Ⅴ		과업 수행지침

□ 일반사항

ㅇ 본 과업지시서는“제48차 유네스코 세계유산위원회 참가 및 홍보”를 위한 용역을 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정한다.

ㅇ 과업의 모든 내용은 본 과업지시서에 의해 수행하되, 과업지시서에 규정하지 아니한 사항은 관계 법령 또는 제반 관련 규정에 따라 (재)한국의 갯벌세계유산등재추진단과 협의 후 수행해야 한다.

ㅇ 과업수행자는 본 과업의 효율적인 수행을 위하여 본 계약기간 중 발주처의 요청이 있을 때 수행 상황을 확인할 수 있도록 조치하여야 하며, 과업 진행 상황을 발주처와 수시로 협의하여야 한다. 또한, 과업내용의 변경이나 조정, 문제점 등이 있을 경우 발주처와 협의하여 처리하여야 한다.

ㅇ 과업 수행자는 과업지시서, 제안요청서 상의 문구, 용어의 해석, 과업의 범위 및 명시되지 않은 사항 등에 대하여 발주기관과 협의하고 이견이 있는 경우는 발주처의 의견을 우선으로 한다.

ㅇ 과업 수행자는 계약일로부터 10일 이내에 분야별 사업내용, 참여기관, 책임자, 책임소재 등의 세부사항을 알 수 있는 서류를 작성하여 착수계와 함께 제출해야 한다.

□ 과업수행 현황 및 결과 보고

ㅇ 과업 수행자는 과업의 진행사항을 수시로 발주기관에 보고‧협의하여야 하며, 별도 요청 시에는 그 내용을 서면으로 제출하여야 한다.

① (착수보고) 계약일로부터 10일 이내에 본 사업을 수행하기 위한 구체적인 사업수행계획서와 착수보고서 등을 제출하여야 한다.

	< 주요내용 >
① 사업 세부실행계획 ② 산출내역서, 용역이행 및 보안유지각서 등 ③ 기타 사업 추진 중에 이루어져야 할 사항

② (최종보고) 사업 종료일 전까지 발주처의 감독관과 협의하여 사업수행에 대한 최종보고서를 과업 산출물과 함께 제출‧보고하여야 한다.
※「최종보고서」및 관련 자료의 파일(USB 제출)

③ (수시보고) 본 과업은 단기간 내 수행되는 특성을 고려하여, 효율적인 공정관리를 위해 발주처의 요청이 있거나 사업 추진상 공유가 필요한 사안이 발생할 경우 지체없이 관련 자료를 제출하고 진행 상황을 보고하여야 한다.

□ 과업의 변경

ㅇ 발주처는 정책변경, 여건변동 등 불가피한 경우에 본 과업의 일부 또는 전부에 대한 과업지시를 변경할 수 있으며, 과업 수행자는 이에 응하여야 한다.

ㅇ 발주처는 과업지시서에 명시되지 않았더라도 과업 내용상 당연히 수반되어야 할 사항에 대하여 추가로 과업지시를 할 수 있으며, 과업 수행자는 별도의 추가비용 청구 없이 이에 응하여야 한다.

ㅇ 발주처는 과업 수행상 필요하다고 인정할 때 및 과업 내용의 변경이 불가피할 때는 계약금액의 범위 내에서 변경할 수 있다.

ㅇ 본 과업 추진과 관련하여 발주처의 추진 계획 및 정책변경 등에 따라 과업의 계속 수행이 불가능하거나 불필요할 경우에는 발주처의 필요에 따라 부분 시공할 수 있으며, 부분 시공 시의 정산기준은 사전협의 하에 결정한다.

□ 소유권, 지적재산권

ㅇ 본 용역을 수행하기 위해 제3자의 저작물을 이용한 경우 제3자에게 저작재산권을 양도받거나 이용□허락을 받음으로써 발주처가 해당 산출물을 이용함에 있어 법적 또는 기술적 문제가 발생하지 않도록 하여야 하며, 제3자와 저작권에 대하여 문제가 발생할 때는 과업 수행자가 이에 대한 법적 책임을 져야 한다.

ㅇ 본 용역에서 취득한 재산적 가치가 있는 권리는 발주처에 귀속됨을 원칙으로 하며, 과업 수행자는 계약 종료 전까지 세부 목록 등을 발주처에 제출하여야 한다.

ㅇ 단, 자부담 예산을 집행하여 취득한 권리는 자부담자의 소유로 하며, 과업 수행자가 제작한 홍보물 등 자료의 디자인 및 내용 등에 대한 지식재산권은 과업 수행자, 발주처가 공동 소유한다.

□ 상호협력

ㅇ 과업 수행자는 본 용역을 원만히 수행하기 위하여 대외 섭외 등 필요한 경우에는 상호 적극적으로 협력해야 한다.

□ 안전사고 대비 등

ㅇ 과업 수행자는 본 사업을 수행함에 있어 과업 수행 시 안전사고가 발생하지 않도록 직접 관리․감독을 수행해야 한다.

ㅇ 과업 수행자는 전체 또는 부문별 사업관리책임자를 지정하여야 하며, 긴급 및 비상 상황에 대처할 수 있는 안전계획을 수립하여야 한다.

ㅇ 본 용역의 수행과정에서 과업 수행자의 귀책 사유로 제3자에게 피해를 주었을 경우 과업 수행자는 그에 대하여 자기 비용으로 배상해야 한다.

ㅇ  과업 수행자는 본 과업을 수행함에 있어 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 「산업안전보건법」 등 관련 법령을 철저히 준수하여야 하며, 작업자 안전 확보 및 사고 예방을 위한 안전관리 보건 조치 의무를 다하여야 한다.

□ 사업비 집행 및 정산

ㅇ 회의경비는 해당 과업과 관련한 자문회, 업무협의, 보고회 등을 위해 소요되는 경비로, 꼭 필요한 경우 최소한으로 하고 외부 위원이 참석한 경우에만 반영·집행해야 한다.

□ 서류제출

ㅇ  과업 착수와 동시에 착수계(사업의 범위, 사업내용, 사업내용별 추진공정이 구체적으로 제시되어야 함)를 제출한다.

ㅇ 발주처에 제출하는 모든 서류는 공문과 메일로 해야 한다.

□ 계약기간의 연장

ㅇ 발주처는 아래의 사유로 용역 기간 내 계약 이행이 불가하다고 판단될 때는 계약기간을 연장할 수 있다.

- 천재지변 또는 이에 준하는 사항이 발생하였을 때

- 기타 정당한 사유가 있다고 판단한 경우

□ 위반행위에 대한 조치

ㅇ 발주처는 다음과 같은 행위가 발생하였을 때 과업 수행상 특별한 사유가 없는 한 위반행위로 간주하여 관계 규정에 의거 조치할 수 있다.

- 본 계약을 수행함에 있어 과업 내용이나 과업 지침을 위반한 경우

- 과업 수행 중 성실하지 못하거나 제반 지시사항을 기간 내에 이행하지 않는 등 소기의 성과를 얻을 수 없다고 판단될 때

- 과업의 전부 또는 일부를 발주기관의 사전 승인 없이 하도급 주었을 때

- 고의로 과업 관련 검토회의, 심의, 납품 기일 등을 지키지 않았다고 판단할 경우

- 그밖에 성실한 과업 이행하지 않아 계약 목적의 달성이 어려운 경우

□ 계약의 해지

ㅇ 2026년 제48차 세계유산위원회 기간(2026. 07. 19. ~ 07. 29.) 중 휴식존 영상 송출이 원활하지 않아 위원회 행사 운영에 차질을 초래할 경우(30분 이상 송출 중단 시), 발주처는 본 계약을 즉시 해지할 수 있다. 또한, 계약 해지 시 모든 책임은 과업수행자에게 있으며, 과업수행자는 행사의 대외적 이미지 실추 및 유·무형의 제반 손해에 대하여 전액 배상 책임을 져야 한다.

ㅇ 본 계약의 해지 조건은 아래와 같이 하고 과업 수행자의 귀책사유에 기인한 해지의 경우 해지에 따른 제반 손해를 책임 배상하여야 한다.

- 과업을 수행함에 있어 계약조건을 이행하지 않는 경우

- 성실한 과업이행을 하지 않아 계약의 목적 달성이 어려울 경우

- 기타 과업을 계획대로 수행할 수 없는 사유가 발생했을 경우

□ 기타사항

ㅇ 본 과업에 대한 모든 서류, 자료 등은 과업에 관련되지 않는 목적으로 사용할 수가 없으며, 발주처의 사전 승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.

- 자료의 외부 유출로 인한 사회적 물의가 일어나지 않도록 각별히 유의하여야 함

- 발주처의 승인 없이 과업 수행자의 자료 외부 유출로 인한 문제에 대해서는 발주처는 과업 수행자에게 책임을 물을 수 있음

ㅇ 본 사업에 참여자는 본 용역사업 업무와 관련하여 충분한 전문성과 경험 등을 가진 자이여야 한다.

- 사업을 수행함에 있어 발주처가 부적당하다고 판단하거나 태만하다고 인정되는 종사자에 대해서 교체를 요구하는 경우, 해당 종사자를 즉시 교체하여야 함

- 과업 수행자는 사업 수행에 참여한 종사자를 임의로 교체할 수 없으며, 불가피한 사유가 발생하였을 경우에는 발주처와 협의하여야 함

ㅇ 상기 사항 이외의 내용에는 발주부서와 협의하여 처리해야 한다.