제 안 요 청 서

사 업 명	국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축
주관기관	국립익산박물관

2026년 5월

구분	직책	소속	성명	연락처	전자우편
사업책임자	학예연구실장	학예연구실	윤종균	063-830-0920	FAX. 063)832-2226 ninninart@korea.kr
사업실무자	학예연구사	학예연구실	강지원	063-830-0926

목  차

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업목적	1

2. 사업일반	1

3. 입찰방식	2

4. 입찰 참가자격	2

5. 입찰 추진일정	4

Ⅱ. 과업내용 및 지침

1. 과업범위	5

2. 과업내용	6

3. 과업지침	9

4. 사업수행조건	18

5. 납품목록	19

Ⅲ. 제안서 작성 및 제출

1. 제출도서의 종류 및 규격	21

2. 제안서 작성 요령	21

3. 제출도서의 작성방법 및 목차	22

4. 효력 및 유의사항	25

Ⅳ. 제안서 평가

1. 평가일정 및 방법	27

2. 제안서 평가 항목 및 기준	28

3. 계약체결	31

4. 기타 유의사항	32

[별첨1] 제안서 제출 관련 서식	33

Ⅰ. 사업개요

1		사업목적

ㅇ 백제역사유적지구 브랜드와 연계한 체험 전시콘텐츠를 구축하여

세계유산 브랜드 인지도를 제고하고 지역문화 활성화에 기여

ㅇ 어린이 대상 참여형 체험 콘텐츠를 제공하여 흥미 유발 및 능동적

학습 경험 확대

2		사업일반

ㅇ (사 업 명) 국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축

ㅇ (사업기간) 계약체결일로부터 2026. 12. 11.(금) 까지

※  12.1.~12.10. 시범운영 및 환경정화, 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

※ 하자 보수 보증기간은 검수일로부터 2년으로 함(단, S/W는 1년)

ㅇ (사업금액) 금200,000,000원(금이억원/부가세 포함)

※ 체험물 제작설치, 인테리어, 손해보험료, 제세공과금 등 기타 부대비용 일체 포함

ㅇ (장     소) 국립익산박물관 어린이박물관 제3공간(136.6㎡, 약 41평)

※ 면적 크기는 현장 측정 시 차이가 있을 수 있음

※ 천장, 벽체, 바닥, 조명, 유리벽면 등 개편 공사 / 철거공사 포함

ㅇ (사업추진 일정)

구분	일정
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
▸콘텐츠 및 시스템 등 설계
▸콘텐츠 제작 및 수정
▸콘텐츠 및 시스템 등 현장 설치
▸시범운영, 보완
▸개막 및 운영

※상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있고, 11월 내 모든 하드웨어 설치 및

테스트가 완료되어야 함

3		입찰방식

□ 입찰방식: 제한경쟁입찰

□ 사업자 선정 방식: 협상에 의한 계약

1. ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제43조

2. 제안요청서의 평가기준 및 기관 내부 처리지침 등에 따라 평가하되 어느 곳에도 명시되어 있지 않은 사항에 대해서는 수요기관 해석이 우선하며,

3. 필요한 경우 ｢협상에 의한 계약체결기준｣(재정경제부 계약예규 제40호, 2026.1.2.) 및 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」을 준용할 수 있음

4		입찰 참가자격

□  다음의 조건을 모두 충족하는 업체

1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 동법 시행규칙 제14조의 자격요건을 갖춘 자

2. 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의해 반드시 나라장터(G2B)에 입찰서 제출 마감일 전일까지 다음 분야의 입찰참가자격을 모두 등록한 자

가. 「소프트웨어진흥법」제58조에 의한 [소프트웨어사업자(디지털콘텐츠   개발서비스사업), 업종코드: 1469]로 등록한 업체

나. 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」제57조에 의한 [비디오물제작업,   업종코드: 3244]로 등록한 업체

다. 「산업디자인진흥법」제9조에 의한 [산업디자인전문회사(종합디자인분야), 업종코드: 4444] 로 등록한 업체

3. 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 입찰서 제출 마감일 전일까지 다음 분야의 직접생산확인증명서를 보유한 업체[세부품명: 동영상제작서비스(8213160301)]  [세부품명: 전시회기획 및 대행서비스(8014198801)]

4. 「중소기업기본법」제2조에 따른 중·소기업 및「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 <중·소기업·소상공인 확인서>를 소지한 자

5. 입찰 등록일 현재 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제76조에서 정한 부정당업체로 지정받은 사실이 있거나, 폐업신고 수리를 받은 업체는 단독입찰 또는 공동수급체의 구성원으로 참가할 수 없음

6. 본 과업은 효과적인 수행을 위해 하도급을 원칙적으로 불허함.

다만, 실내건축, 소방, 전기 등 법적 면허가 필요한 전문 시공 분야에 한하여, 과업수행자가 관련 자격을 갖춘 전문 업체와 협력하고자 할 경우 발주기관의 사전 승인을 득한 후 하도급을 수행할 수 있음

□  공동수급체 구성

1. 필요시 공동수급(공동이행방식)이 가능하며, 공동수급체는 5개 이하로 구성해야 하며, 구성원별 계약 참여 최소지분율은 10% 이상으로 해야 함

공동수급협정서 및 관련 서식(서식 제9호)을 제출

※ 공동수급 시 반드시 주계약자(대표사)를 명시해야 함.

2. 공동수급업체 구성원은 ｢독점규제 및 공정거래에 관한 법률｣에 의한 계열사가 아니어야 함

3. 낙찰자로 결정된 이후에는 공동수급업체 구성원을 변경할 수 없으며, 공동수급체의 구성원은 본 사업의 다른 공동수급체에 참가할 수 없음

4. 기타 사항은 반드시 공동계약운용요령(계약예규)을 숙지하여야 하며 숙지하지 못함에 따라 발생된 결과에 대한 책임은 입찰자에게 있음

□  입찰시 고려사항

1. 제안자는 현실적 조건을 고려하여 계획하고 제안서를 작성해야 함

2. 공고내용이나 제안요청서 등 제안서 요청과 관련하여 견해를 달리하는 경우가 있을 때는 발주기관의 의견에 따름

3. 제안요청서나 지침에 명시되지 않은 일반적인 사항은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」,「협상에 의한 계약체결기준」, ｢조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준｣ 등을 준용함

4. 제안서에 기재된 내용이 허위로 밝혀졌거나 지침을 준수하지 않은 제안서는 심사 제외 등 불이익을 당할 수 있으며 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

□  기타사항

ㅇ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 (  )개최 또는 (∨)미개최 한 사업임

5		입찰 추진일정

1. 현장설명회: 별도의 현장설명회 없음

※ 해당 장소인 어린이박물관 전시실은 성인과 어린이 동반 예약시 입장 가능, 휴무일 확인 필수

성인 단독 현장답사의 경우 국립익산박물관 누리집(iksan.museum.go.kr) 공지사항 내

관련 안내글을 반드시 확인하고, 정해진 절차에 따라 신청, 방문하여야 함

2. 질의접수

가. 질의는 공고일로부터 5일 이내 질의 서식(서식 제15호)으로 작성하여 이메일로 제출

(e-mail: ninninart@korea.kr)  ※ 입찰 공고 기간 내 업체별 1회에 한함 (전화 접수 확인 필수)

나. 질의서 작성은 문항 연번 붙이고 제안요청서 해당 페이지를 명확히 알아볼 수 있도록 함

3. 질의회신

가. 질의서상의 기재사항이 불확실한 경우에는 응답하지 않을 수 있음

나. 답변은 이메일로 회신

4. 제안서 제출 일정 및 방법: 입찰공고서 참조

5. 제안서 제출 시 유의사항

가. 제안서는 나라장터를 통하여 온라인으로 접수하며, 인편, 우편 또는 택배 등의 방법으로 제출할 수 없음

나. 제안서는 제안사 별로 1건에 한하며, 추가로 제출하거나 수정·변경·보완할 수 없음

다. 제출한 입찰서류 및 제안서는 일체 반환하지 않고, 제안서 작성 및 제출과 관련된 일체 비용은 제안사가 부담

라. 제출한 서류에 위·변조나 허위사실이 발견된 경우 낙찰자로 선정된 이후라도 낙찰 취소 가능

마. 제안 내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함

바. 제안사는 본 사업과 관련해 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설할 수 없으며, 이를 위반하여 발생한 문제는 제안사가 책임져야 함

사. 발주기관은 본 과업 수행에 필요하다고 판단하는 경우 협상을 통하여 과업내용, 참여인력, 추진일정, 기타 사항의 추가 또는 변경을 요구할 수 있으며 이에 필요한 비용은 제안사가 부담

6. 계약대상자 확정 및 계약체결: 제안서 평가회의 개최 후 조달청 공고

Ⅱ. 과업내용 및 지침

1		과업범위

□  공간적 범위

1.  위치: 국립익산박물관 어린이박물관 제3공간(136.6㎡, 약 41평)

체험 전시물 제작 부분	디지털(1,2), 아날로그(3,4) 체험 전시물

□  내용적 범위

1. 디지털 체험 전시물 제작(2종) 및 설치 디자인  * 철거 포함

가. 벽면·바닥 연동형 대형 실감 인터페이스 및 개별 디바이스를 유기적으로 구성하여, 최대 10인이 대기 없이 동시 참여 및 상호작용이 가능한 통합 체험 환경 구축

나. 인쇄가 가능한 포토 키오스크

2.  아날로그 체험물 및 공간 연출

가. 아날로그 촉각체험물 조성 및 체험테이블 개편 * 철거 포함

나. 일러스트 디자인 및 랩핑

3. 운영장비 및 시스템 구축

가. 디지털 체험물을 어린이박물관의 공간 디자인과 조화가 되도록

안정적이고 효과적인 설비 기기를 통해 계획 설치

나. 제작된 콘텐츠를 최상의 상태로 구현할 수 있도록 콘텐츠 및 하드

웨어설치, 관리, 유지보수 포함

다. 천장, 바닥, 전기, 통신, 소방, 기계, 음향, 조명 등 설치(기존 설비 이설 포함)

라. 어린이들이 체험할 수 있는 테이블, 의자 등 기타 제반장비 구축

마. 효과적인 유지·관리·운영방안 매뉴얼 작성 및 운영자 교육

4. 그 밖에 과업목표 달성에 필요하여 발주기관이 요구하는 사항

2		과업내용

□  기본방향

1. 국립익산박물관의 이미지와 정체성, 전체 분위기를 고려하고, 전시 주제에 맞는 콘텐츠 구축

2. ‘고도 익산’의 역사적 가치를 어린이의 눈높이에서 재해석한 융복합 에듀테인먼트 환경을 구축하고, 상설 익산백제실의 서사를 확장하여 세대별 맞춤형 체험이 가능한 능동적 전시 공간을 구현함

3. 최신 디지털 신기술(실감 인터랙티브 등)을 접목하여 어린이 오감체험을 위한 몰입형 콘텐츠를 구현하고, 무장애(Barrier-Free) 개념을 바탕으로 디지털과 아날로그가 유기적으로 결합된 보편적 체험(유니버설) 환경 조성

4. 만3세(유치원) ~ 만8세(초등 2학년) 어린이가 모두 이용할 수 있는 디지털과

아날로그 체험 콘텐츠 구성

5. 각 체험 주제별로 초등 어린이와 유아를 위한 체험을 동시에 제공하며 보호자와 어린이의 협업과 상호작용을 통해 가족 간 공감과 소통이 가능하며 안전한 관람환경 조성

6. 친환경자재 사용 및 어린이를 위한 디자인과 색상 활용

7. 내구성과 완성도 높은 체험물을 제작하고 이동과 설치가 용이한 형태로 설계

8. 과업의 수행기간 중 시범운영을 반드시 진행해야 하며, 수행 초기 단계부터

콘텐츠 제작 관련 협의 필수

※ 본 사업의 취지 및 기술적 카테고리, 사업 운영 원칙에 적합한 범위 내에서 자율 제안 가능

1. 디지털 체험물(2종)

가. 멀티 디바이스 및 모션 인식 통합 실감 체험(3분)

1) 고도익산(미륵사지, 왕궁리 유적, 제석사지, 쌍릉)을 주제로 한 체험물 제작

2) 코너별 미디어 테이블 콘텐츠 및 벽면과 바닥 연동되는 실감콘텐츠

3) 인터랙션 디자인을 가미하여 오감을 자극하고 모션을 인식하고

사용자의 참여에 의해 스토리가 전개되는 콘텐츠

나.  캐릭터 기반 스토리텔링형 포토 시스템

1) 어린이박물관 캐릭터와 함께 익산 문화유산의 과거와 현재를 여행하며

기념사진을 찍고 출력

다. 영상 서비스 시스템 구축

1) 콘텐츠를 효과적으로 구현할 수 있는 하드웨어 제작·구매·설치

2) 과업공간 컨디션에 부합하는 최적화된 하드웨어 및 콘텐츠 통합

제어 시스템 구축

3) 프로젝터, 미디어테이블, 고해상도 모니터, 음향기기, 네트워크, PC, 사인물, 서버,          배관, 배선 등 콘텐츠 구현과 감상에 필요한 인프라 구축

4) 손쉬운 사용자 인터페이스 제공을 통한 체험물에 대한 이해도 및

사용 편의성을 증가시킴으로써 빠른 정보 전달

5) 영상물이 체험 시간에 맞게 장시간 안정적으로 구동될 수 있도록 함

6) 영상 설치 후 구현 기술에 대해 지적재산권(특허/실용신안) 등에 문제가   발생하는 일이 없도록 함

7) 콘텐츠 감상을 위해 수반되는 공간 인테리어 계획 및 제작·설치

8) 효과적인 유지 관리를 위한 운영 매뉴얼 작성 및 교육

9) 콘텐츠 제작을 위한 영역별 전문가 참여

10) 그 외 과업달성에 필요한 발주기관이 요구하는 사항

2. 아날로그 체험물

가. 익산 문화유산을 주제로 직접 만지고 느끼며 문화유산의 질감을 익힐

수 있는 다양한 방식의 촉각 체험물

나. 체험 테이블 보완 및 개편(다양한 체험을 할 수 있는 테이블로 개편)

3. 공간연출 방향

가. 주제별 구획이 명확히 구분되어 나타나는 것이 아니라 자연스럽게    유기적으로 연결되는 동선 흐름 제안

나. 전문 색채/그래픽 디자인팀을 구성하여 자문 및 작업 협업 진행

다. 체험 공간구성 및 연출을 위한 전문 일러스트레이터 스텝 구성

4. 전시 구성(안)

구분	내용	콘텐츠 연출	비고
익산으로 함께 떠나요!	고도 익산의 첫인상 및 역사적 배경 안내	• 익산 고대 사원(미륵사, 제석사 등)의 상징성을 담은 시각 패널 연출 • 어린이 눈높이에 맞춘 친근한 인포그래픽 및 텍스트 구성
문화유산의 과거와 현재	디지털 실감 기술을 활용한 시공간 여행	• 디지털 인터랙티브 존: 미륵사, 제석사, 쌍릉, 왕궁리 유적의 과거 복원 모습과 현재를 비교 체험하는 대형 실감 영상(벽면·바닥 연동) • 베리어프리 키오스크: 영유아 및 장애 아동을 고려하여 다양한 높이로 배치된 터치 디스플레이를 통한 유물 스토리텔링 학습
손으로 느껴보는 익산	촉각 중심의 핸즈온(Hands-on) 체험	• 촉각 체험 시설: 자석 조립, 끼우기, 퍼즐과 손을 넣고 만져볼 수 있는 체험 등 • 체험테이블에서 할 수 있는 다양한 체험
시간여행 다시 떠올리기	관람 추억 공유	• 추억 저장소: 캐릭터 결합형 포토존 또는 디지털 사진 촬영을 통한 관람 경험의 개인화 및 소장화

※ 위 구성안은 참고사항이며 공간의 디자인 및 영상의 시나리오는 제안사가 자유롭게 제안할 수 있음

5. 제작규격(안) ※ 콘텐츠 시나리오 및 구성에 따라 구현방식은 자유롭게 제안 및 협의 후 조정 가능

구 분	내 용	비 고
사 양	Projector, 영상서버PC, 터치미디어테이블, 포토키오스크, 오디오 시스템 등	전시 공간에 따라 수량과 형식, 사양 조정, 유지보수 용이
체험시간	인터랙티브 체험 3~5분/ 포토체험 3분 내
해 상 도	Full HD급이상	콘텐츠별 조정 가능
제작방법	인터랙티브, 동작인식 등	콘텐츠별 조정 가능
음 향	2.1 채널 서라운드	콘텐츠별 조정 가능
기 타	- 미디어서버, 소프트웨어 함께 구성 및 제공 체험 안내를 위한 촉각·음향 보조 장치(히어링루프) * 단, 히어링루프는 콘텐츠 구현 상황에 따라 발주기관과 협의 후 더 적합한 음향 매개 제안 가능	미디어서버: 현장 상황에 따라 변동 가능

※ 공간 내 기존 목공과 조명을 고려한 연출 매체 및 방법 선정 필요, 공간 재배치 가능

3		과업지침

□  과업체계

1. 과업수행기관은 본 과업을 수행하기에 충분한 전문성을 보유한 관련 분야

전문가를 활용하여 과업수행조직을 구성하고 제시함

2. 과업수행의 책임자는 본 과업 업무를 총괄할 수 있는 인력으로서 관련

전문성을 보유한 자이어야 하고, 발주기관의 사전승인을 받은 경우를 제

외하고는 계약기간 중 교체할 수 없으며, 과업 완료 시까지 수행 전반에

관한 사항을 책임짐

□  사업보고

1.  과업수행기관은 계약체결 후 10일 이내에 총괄사업수행계획서, 과업책임자를 포함한 투입인력 전원의 이력서, 보안서약서, 사업비 산출내역서 등이 포함된 착수계를 제출함

2.  공정별 업무에 대해 발주기관은 과업수행기관에 진행사항 보고 및 회의

소집을 요구할 수 있으며, 이때 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 함

3.  본 사업의 성과 제고를 위해 발주기관은 필요 시 분야별 전문가가 참여하는 자문회의를 개최할 수 있으며, 수급인은 이 회의에 참여하여 협의 후 동의된 사항에 대한 조치를 취해야 함

□  일반지침

1. 제안자(계약체결 후 ‘사업자’)는 본 지침에 의거해 모든 사업을 수

행해야 하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종

기준과 연계 검토한 후 수행

2. 본 사업의 기본방향, 주제, 내용, 연출, 예산 등을 충분히 숙지한 후 제안서

내용 및 발주기관과 추가로 협의한 사항을 토대로 설계 및 제작․설치

3. 본 사업을 수행하기 위해 창의적이고 역량 있는 제작자 및 경험이 풍부한 전문인력을 충분히 확보해야 함

4. 설계(혹은 시나리오) 및 제작․설치․실물구매 등 각 단계별로 발주기관이 승인하는 관련 분야 전문가로부터 자문을 받고, 발주기관과 협의 완료 후 시행

5. 사업의 목적, 취지, 성격 등을 충분히 이해하고 발주기관이 의도하는 목적과 방향에 맞게 기획․구축되어야 하며, 각각의 성과물들을 통합하여 제어할 수 있는 프로그램을 제작 및 운용하여야 함

6. 유지관리의 용이성, 편이성, 경제성 등을 감안하여 체험물의 제작·설치 후 부품교체, 보수, 유지관리가 용이하도록 실행 프로그램 및 제어방식을 적용하여 통합제어시스템을 구축하여야 하며 기존 설비와 호환성에 문제가 없도록 시공

7. 반영될 재료 및 특수재료는 정부 및 공인기관에서 인정한 일정 기준 이상의 우수재료를 선택하여야 하며 마감재는 ESG를 바탕으로 플라스틱 소재 사용을 최소화하고 천연 소재 중심의 구조물을 제작하여야 함

※ 「어린이제품 안전 특별법」 제17조에 따른 안전인증 제품

8. 친환경 제품 사용으로 실내공기질 관련법에 저촉되지 않아야 하며, 화재예방을 고려하여 불연재, 난연재 사용을 원칙으로 하고 그렇지 않을 경우 방염처리 진행하며, 필히 소방서 방염성능검사 성적서 제출하여야 함

9. 건축과 관계되는 구조나 기타 안전성에 문제가 없도록 해야 하며, 설치 후에도 유지·보수·사후관리가 용이하도록 설계하여야 함(누수, 방수, 균열 등 방지)

10. 사업 추진 시 특허권과 저작권 및 건축․전기․통신․소방․기계․조명 등 관련분야의 법규(저작권법 등 건설산업기본법, 전기공사업법, 정보통신공사업법 등)를 면밀히 검토해 누락사항이 발생하지 않도록 하고, 기존 설비와의 호환성에 문제가 없도록 시공해야 하며, 내부에 설치하는 모든 시스템은 관계법령에 저촉되지 않는 자재 및 설비를 사용해야 함(소프트웨어 진흥법, 정보통신공사업법 및 같은 법 시행령, 시행규칙, 전기통신설비의 기준에 관한 규칙 및 관련 고시 등). 이와 관련하여 문제가 발생할 시에는 사업자 귀책사유로 인한 하자로 간주, 사업자가 보완․처리함은 물론 민형사상의 모든 책임을 부담함

11. 사업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유 발생 시 발주기관은 본 과업 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있으며 이에 따른 간접비의 지급은 없음

12. 발주기관은 천재지변 또는 용역수행자의 귀책사유가 아닌 실내 리모델링 공사 지연 등 부득이한 사유로 과업기간 연장이 불가피한 경우 관계법령이 정하는 범위 안에서 계약기간을 연장할 수 있음

13. 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 필수로 사전에 협의해 결정하며, 본 지침에 이의가 있는 경우에는 발주기관의 해석을 따름

□  세부지침

1. 모든 규격·사양·품질·성능·효율 등은 관련법이나 규정에서 제시한 기준 이상으로 설계하되, 기준이 명확하지 않거나 서로 상이한 경우에는 강화된 기준을 따르고 감독관 및 발주기관 승인을 얻은 후 설계하여야 함

2. 제작·설치단계에서 기술발전 등으로 인해 설계 시 제시한 기준 및 사양보다 고급사양이 출시될 경우에는 납품일을 기준으로 감독관 및 발주기관의 승인을 얻은 후 최신사양으로 대체하여야 함

3. 특수장비, 핵심부품, 국외생산 제품 등을 구입하고자 할 경우에는 절차·소요기간 및 관계서류 목록을 제출하여 발주기관과 도입여부를 협의하고, 향후 운영과정에서 부품조달 및 유지보수가 원활히 이루어질 수 있도록 조치하여야 함

4. 각종 작동이 필요한 설비의 경우, 사전에 세부 제작도를 작성하고 발주기관의 승인을 받아 제작하여야 함

5. 제안 및 시행 시 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련되었을 경우 사업자는 반드시 특허권, 저작권 등 배타적 권리의 확보증빙서류를 제출하여야 하며 분쟁 발생 시 사업자가 민형사상 모든 책임을 가짐

6. 모든 시설, 장비, 자재 등은 성능과 안전도가 검증된 KS 표시품과 형식승인품 및 그 이상인 제품을 우선 사용해야 하며, KS 표시품이 없을 경우 감독관 및 발주기관의 사전 승인을 받아 사용하여야 함

7. 품질관리 및 품질보증을 위하여 자재 시험성적표(시험결과보고서)가

필요할 시에는 설계도서 및 해당 시방서에 일치될 수 있도록 사전계획

(반입 전·후)을 수립하여 검토하여야 함

8. 제작·설치를 시행함에 있어 소요 재료의 품질기준에 관한 자료와

시행중 현장에서 시험테스트가 요구될 시에는 해당 종목에 맞는 시험

기구 및 장비 등을 비치하여야 함

9.  재료 또는 제작·설치의 특수성 등으로 국내에서 시험이 불가능할

경우와 수입자재일 경우 외국 시험전문기관에 시험을 의뢰할 수 있으며

사업자는 시험성적서를 제출해야 함

10. 모든 자재는 포름알데히드 및 휘발성 유기화합물(VOC)이 검출되지

않는 친환경자재를 사용해야 함

※ 환경측정 전문업체에서 측정한 결과서를 제출하여야 함

11. 추락, 파손, 안전사고 등 위험요소 존재하는 경우 종합적인 안전대책 및 운영관리 계획을 제시하여야 함

12. 테스트 및 보증, 시설운전, 관리안내서 작성, 운영요원 교육 등 준공 후

운영관리체계를 수립하고, 안전진단을 시행하여야 함

13. 사업자는 계약 결과물의 하자와 관련 검토 및 보수를 하자담보기간 내에 처리하여야 하며, 그 비용은 사업자가 부담하여야 함

14. 테스트 또는 운영 단계에서 고장 및 수리(하자이행 기간 중 동일한 부품 및 부위 2회 이상)가 발생하는 경우 즉시 해결방안을 제시하고, 발주기관 요구 시 부분 또는 전면 재제작·설치하여야 하며 그 비용은 사업자가 부담하여야 함

15. 설치 전 과정에서 발생하는 폐기물은 사업자가 전적으로 책임지고 반출하여야 하며 준공 시에는 개관 대비 준공청소를 하여야 함

16. 사업자는 제작·설치에 있어서 안전 관련 법규에 따라 철저한 안전관리를 시행하고 사고 및 재해방지에 노력하여야 하며, 사고 및 재해가 발생한 경우 즉시 발주기관과 감독관에게 보고하고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취해야 하고, 제작·설치 중 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 사업자 및 하수급자의 종업원 또는 고용원의 안전사고에 대한 모든 책임을 져야 함

17. 사업자는 안전관리 책임자를 임명하여 감독관을 경유하여 발주기관에 보고하고, 임명된 안전관리 책임자를 제작·설치현장에 상주시켜야 하며 안전관리 책임자 상주 및 안전관리가 소홀할 경우 감독관 또는 발주기관에서 제작·설치의 중지를 지시할 수 있음

18. 사업자는 계약에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 공간 및 시설을 설계하고 제작·설치하여야 하며, 감독관으로부터 필요한 조치에 대한 지시를 받았을 때는 특별한 사유가 없는 한 지체없이 이에 응하여야 함

19. 사업자는 계약조건에 위배하여 시공된 부분에 대하여는 재시공 또는 보완하여야 하며, 만약 감독관이 지적한 사항에 대하여 재시공 또는 보완하지 않을 경우 감독관은 다른 방법에 의해 제거 또는 보완하고 그 비용을 사업자에게 청구할 수 있음

20. 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항일지라도 당연히 수행 및 시공해야 될 사항이나 관계법령에 규정된 사항은 발주기관의 요구에 따라 사업자의 부담으로 제작·설치하여야 함

21. 작업 시 소음 및 분진은 최소화하여야 하며 발생이 우려되는 경우, 관람객 및 주변 환경 보호대책을 강구하고 안내 사인을 설치해야 함

22. 원활한 운영을 위하여 발주기관의 요청이 있을 경우는 하자보증기간이 경과한 이후라도 객관적 자료에 근거한 유상의 유지보수 계약을 이행하여야 함

□  분야별 세부사항

1. 시설

가. 시설 및 설비·구조물은 이동, 해체, 조립이 용이하도록 규격화하고, 각종

장비와 시설은 분리·제작·조립하여 기계·전자 장치만의 별도 유지관리가

이루어질 수 있도록 설계하여야 함

나.	시설 및 설비·구조물은 발생될 수 있는 소음, 진동 및 관람객의 안전사고에

대한 대비를 위해 내구성이 있는 소재로 구조체를 제작하고 관람객의

행동반경, 동선, 대기열 등을 고려하여 공간배치를 하여야 함

다. 이동 통로의 폭은 관람객의 이동이 원활히 이루어지도록 조성하여야 함

라. 어린이, 노약자, 장애인 등을 위한 시설은 관련 법규의 기준에 따라

설치하여 관람 편의성을 높여야 함

마. 내부시설 모든 자재는 소방법 관련 법규 기준에 따라 구축하여야 함

바. 피난동선 확보 및 진출입로의 접근이 용이하도록 하며, 소방 사인물을

적소에 설치 및 이설하여 진출입 및 피난이 용이하도록 하여야 함

사. 차폐, 차음, 차광 등을 효율적으로 하여 관람에 방해되지 않도록

하여야 함

아. 영상 및 음향장비, 컨트롤박스 등 제반 설비는 유지관리가 용이하도록

제작하여야 함

자. 기타 구축·운영에 따른 제반사항을 고려하여야 함

2. 전시물 및 작동 체험물

가. 모든 전시 ․ 체험물은 피교육자의 안전을 최우선으로 고려하여 설계 및

제작 ․ 설치(모서리 라운딩처리, 충격방지시설 등)하고, 장애 유아의

이용 시에도 불편함이 없도록 함

나. 작동 전시 ․ 체험물은 이동, 해체 또는 조립이 용이하도록 규격화 ․

모듈화하고, 전시물과 전시대를 분리 ․ 제작 ․ 조립하여 기계 ․ 전자

장치만의 별도 유지관리가 이루어질 수 있도록 설계하여야 함

다. 작동 전시 ․ 체험물은 발생될 수 있는 소음, 진동, 관람객 안전사고

대비를 위해 내구성이 있는 소재로 구조체를 제작하고 관람객의

행동반경, 동선, 대기열 등을 고려하여 공간배치를 하여야 함

라. 각 전시물은 유지 ․ 보관이 용이하도록 제작하되 점검구가 필요한

경우에는 눈에 띄지 않는 곳에 두도록 함

마. 작동부는 부품 교환 점검 등 보수작업이 용이하도록 구조를 단일화

하여야 하며, 나사류 및 잠금장치도 가능한 단일 규격을 사용하여야 함

바. 전선을 나사로 고정할 때, 그 부분이 진동 등으로 헐거워질 우려가

있는 경우에는 이중너트·스프링와셔 및 나사이완 방지기구가 있는

것 등을 사용하여야 함

사. 모든 전시물은 정밀성과 내구성이 강한 소재를 사용하여 제작하며, 발주

기관 승인을 받은 제작도면에 준하여 제작하여야 함

아. 각 전시물의 제작과정은 제작중간검수를 시행하여야 함

3. 조명계획

가. 조명은 기존의 건축조명을 면밀히 조사하여 기능유지에 적합하고

소모품 교체 및 관리가 용이한 제품을 사용하고 그에 상응하는 조도

계획을 하여야 하며, 경우에 따라 조도 조절 및 선택적 점멸이 가능

한 조명기구를 계획하고 설치하여야 함

나. 내부 조명은 콘텐츠의 운영에 지장이 없도록 하며 난반사나 눈부심을

최소화할 수 있도록 설치해야 함

다. 관련기준: 전기설비기준(산업통상자원부) / KCS 31 10 21(건축전기설

비공사 일반사항) / 배관 및 배선설비공사는 KCS 31 65 10에 따름 /

접지설비공사는 KCS 31 80 20에 따름

4. 시스템 설비(음향 포함)

가. 모든 디지털 콘텐츠는 제어가 용이하도록 시스템을 구축하고, 수시로

업그레이드가 가능하도록 컨트롤러를 도입함. 또한 필요에 따라 시연 중

인 콘텐츠를 부문별로 정지시킬 수 있도록 구성하여야 함

나. 기기의 모든 케이블은 신호 결손이 없도록 완벽히 결선이 가능한

상태로 제작되어야 함

1) 저압 배선은 절연전선 및 케이블을 사용하여야 함

2) 기기는 원칙적으로 제조자 제조번호 제조연월일 정격 및 성능을 명

기한 명판을 부착하여야 함

3) 전선은 전선을 보호하는 전선배관을 사용하여야 하며 상호 간은

직접 접속하지 않아야 함

4) 전선을 접속할 경우 전선의 절연강도보다 높아지는 방법으로 절연

을 확보하여야 하며 접속은 반드시 점검이 용이한 장소에 시행되어야 함

다. 콘텐츠 재생을 위한 외부 디스플레이와는 HDMI 단자를 통해 연결되어 영상과 음성의 동시 재생이 가능하여야 함.

라. 각종 장비는 파손·분실 방지 및 위생 관리 설비를 갖추어야 함.

마. 누구나 쉽게 조작할 수 있도록 간편화하여야 하며, 납품 후 장비별 세팅법, 유지보수법 등이 담긴 사용설명서를 제출함.

바. 장비는 모든 연령층이 이용할 수 있도록 유연성 있는 재료를 사용함.

사. 체험 중 제반사고를 예방할 수 있는 안전장치(설비)를 갖추어야 함

아. 이용자의 직접 체험 및 시연이 가능하고, 운영요원을 최소화할 수 있도록 설계하되, 이에 대한 종합적, 체계적 관리 운영 및 유지보수가 이루어질 수 있도록 함

자. 음향은 콘텐츠 체험에 최적화되도록 하고 주변 타 콘텐츠가 있는 경우

간섭이 없도록 설치장소, 지향각도, 음량을 고려하여 설계함

5. 안전 관리

가. 과업수행자는 본 과업을 수행함에 있어서 안전대책에 관한 계획을 수립,

시행하여야 함

나. 관련 시설물은 관람객(특히 어린이)의 안전을 고려하여 견고하게 제작․

설치하여야 함

다. 과업수행자는 과업수행으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우에는

과업수행자 책임 하에 해결하여야 하며, 이를 위하여 관련 보험가입 등

안전조치를 강구하여야 함

6. 사업관리 및 보안유지

가. 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리 등 사업의 효과적인 관리·

유지·운영을 위한 기술지원 및 운영방안을 제시해야 함

※ 각종 S/W, H/W 장비는 정품으로 구매 전 제품의 성능과 사양서를 사전에 발주기관에 제출하고 승인을 받은 후 구매해야 하며 장비 유지관리 매뉴얼을 별도로 작성하여 제출해야 함

나. 사용자 및 운영자 매뉴얼을 작성 및 제시해야 한다.

다. 계약상대자는 과업수행기간 중 모든 과업사항에 대한 보안책임이 있으며, 관련 제반 보안규정을 준수해야 한다.

라. 계약상대자는 모든 제반 사항에 관하여 보안사항을 충실히 이행하고

과업수행 관련자에 대한 보안서약서(서식 제16~17호)를 착수계와 함께 제출하여야 하며, 작업자를 교체할 경우에는 주관기관에 서면으로 보고하고, 작업자 이외의 자에게 부득이한 사정으로 관계 자료를 취급하게 해야 할 경우에는 보안서약서 제출과 함께 주관기관의 사전 승인을 얻은 후 취급하도록 해야 함

마. 계약상대자는 보안대책을 수립하여야 하며 대표자와 참여기술자의

보안각서를 착수계와 함께 제출해야 함

바. 본 과업과 관련된 모든 서류 및 자료는 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없으며, 사전승인 없이는 타인이나 타 기관에 제공하거나 대여할 수 없으며, 과업 수행자는 자료의 외부 유출로 인한 민·형사상의 모든 책임을 져야 함

7. 하자보수

가. 무상하자보수기간은 검수일로부터 2년으로 함.(단 S/W는 1년)

나. 하자보수 지원방안에 지원범위, 지원인력(비상연락체계), 지원방법, 지원내용

등 제시하여야 하며, 특히 하자보수 대상(H/W, S/W등)별 지원범위,

공급된 상용 제품에 대한 Version Upgrade에 관한사항, 장애발생 처리에 관한

사항, 기타 정상 운영을 위한 기술지원 등에 관한 사항을 제시해야 함

다. 시험운영 기간 동안 발견된 결함을 파악하여 공정기간 내 조치하여야 함

라. 과업수행자는 발주기관에 기술이전 및 유지관리와 시스템 운영 교육을 실시해야 함

마. 검수 완료 후 하자보수 기간 동안 시스템 이상 발생 시 장애 접수 후

유지보수 요원의 신속한 대응을 제공해야 함

바. 해당 하자보수 기간 내에 발생하는 유지관리의 범위는 개발 완료된 시스템의

유지관리에 따른 일반적인 유지관리 내용이 포함

사. 예상 장애별 조치사항 및 비상복구 방안을 제시하여 비상시 대비할 수

있도록 해야 함

아. 장애처리 절차, 하자보수 체제 등 하자보수를 위한 종합적인 방안을

제시해야 함.

자. 하자보수 기간 중 장애 발생 시 원인분석, 복구 등 즉각적인 조치가 가능

하도록 기술지원 부서, 전문인력 및 예비제품을 확보하여 항시 운영이

가능하도록 해야 함

차. 하자보수 기간 중 최종결과물 품질에 이상이 있을 경우 즉시 결과물을

보완해야 함

8. 저작권과 사용권 관련사항

가. 본 사업과 관련된 모든 소프트웨어에 대한 라이선스 조건 및 보증 조건 등

관련 사항을 해결해야 함

나. 업무수행 중의 취득물, 성과품, 산출물 등에 대한 소유권은 사업완   료와 동시에 발주기관에 자동귀속되며, 사업과 관련한 계약목적물의   지식재산권은 발주기관과 사업자가 공동소유함을 원칙으로 함

단, 발주기관이 최종산출물의 품질향상과 보급확대 혹은 변화된

기술표준에 조응하기위해 콘텐츠의 보완개발을 추진하고자 할 때,    사업자는 이를위한 협의에 적극적으로 임해야 하며, 발주기관과 문서로 협의함 없이 지식재산권의 복제‧배포‧개작‧전송 등 및 상업적인 사용‧수익의 도모를 독자적으로 수행할 수 없음(기타 세부사항은 협의하여 결정). 또한 발주기관의 승인 없이는 제3자에게 계약목적물, 취득물, 성과품, 산출물 등을 제공할 수 없음

다. 콘텐츠 제작에 사용되는 음악, 자료영상, 사진 등의 저작권료 등 제반비용은

과업수행자가 지불하나 발주기관에서 보유 중인 작품에 대하여는 최대한 협조할 수 있음

라. 본 과업을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하여 발주기관을

상대로 손해배상청구소송이 제기되면 과업수행자는 피해자 측과 합의하여

배상해야 함

마. 모든 콘텐츠(디자인, 그림, 사진, 음성, 동영상 등)는 저작권법에 위배되지

않아야 함

바. 모든 산출물은 지식재산권과 관련된 사항을 주의해서 제작해야 하며,

본 사업과 관련하여 제3자의 특허권 또는 지식재산권을 침해하여 문제발생 시

과업수행자가 모든 책임을 짐.

사. 저작권 침해 분쟁 발생 시 손해배상뿐만 아니라 민‧형사상 책임 등

일체의 책임은 과업수행자에게 있으며, 소요되는 모든 비용을 부담하여 조속히

분쟁을 해결해야 함.

아. 발주기관은 결과물의 수정‧보완 및 변경에 대한 일체 권한을 가짐

4		사업수행 조건

1. 사업수행에 필요한 장비일체는 사업자가 자체적으로 확보하여 수행하여야 함

2. 사업자가 제출한 설계도서상 하자로 인하여 손실 또는 피해, 기타 사업 진행상 지장을 초래하였을 경우에는 사업자가 이에 대한 책임을 져야 함

3. 과업수행 업무보고는 아래와 같이 수행하여야 함

가. 과업수행보고

1) 착수보고: 사업자는 계약체결 후 10일 이내에 본 과업에 착수하여야

하며, 착수 시 국립익산박물관에 착수계를 제출함

2) 중간보고: 기본설계의 완료시점

3) 수시보고: 발주자의 요청이 있거나 사업자가 주요결정사항에 있어

필요한 경우에 수시보고를 하여야 함

4) 최종보고:  사업자는 준공일 30일 전까지 과업수행결과에 대하여 발주기관에

최종보고 하여야 함

4. 총괄책임자 및 공정별 책임자는 제작·설치 전 과정을 전담하여 관리하여야 하며, 불가피한 사유가 있을 경우 발주기관과 협의하여 책임자를 변경할 수 있음

5. 본 사업에 필요한 관련 인·허가를 받거나 검사를 받아야 할 경우 이에 대한 처리 및 소요비용은 사업자가 부담하여야 함

6. 본 사업수행과 관련된 제안서 작성 및 설계비 등 제반 소요비용은 사업자가 부담하여야 함

7. 과업 수행 인원

가. 사업총괄 책임자 및 과업 수행 인원에 관련된 사항은 반드시 포함되어야 하고,

사업 종료일까지 구성인원의 변경이 없도록 함. 계약 성립 후 이 사항을 변경

하고자 할 때는 기존 과업 수행 인원과 동등하거나 그 이상의 자격 및 경력을

갖추어 사전에 발주기관의 허락을 받아야 함. 이를 위반할 시에는 계약 해지

등의 사유가 될 수 있음

나. 계약 성립 후, 발주기관이 판단하여 과업 수행에 지장을 초래하는 사업총괄

책임자 및 수행 인원에 대한 변경 요청이 있을 시 사업자는 이에 응해야 함

5		납품목록

구분	규격	수량	비고
산출물
착수계 (과업수행계획서)	A4	3부	계약체결 후 10일 이내
콘텐츠 기획 및 시나리오(안)	A4	3부	계약체결 후 1~2개월 이내
중간보고서	A4	3부	중간보고(평가) 후 7일 이내
작동 및 운영 매뉴얼	A4	10부	콘텐츠 설계 설명서 설계설명서(콘텐츠 세부기획안, 콘티 등) 사업 수행중 산출된 모든 자료 일체 발주기관이 요구하는 사항 작동, 운영, 유지보수 방법이 포함된 매뉴얼
콘텐츠 검수계획서	A4	3부	사업완료 후 7일 이내
검수 결과보고서	A4	3부	사업완료 후 3주 이내
관련 서류 제출	A4	3부	사업 수행 중 산출된 모든 자료 일체 등 발주기관이 필요 시 요구하는 사항
최종 성과품
기본·실시설계 및 성과품 도서	A4 (도면은 A3)	3부	도면(평면도, 최종 설계도면, 전기배선도 등), 내역서, 설계설명서, 시방서, 공정표, 단가산출서, 수량산출서, 각종 계산서 등 발주기관의 요구사항
운영 매뉴얼	A4	3부	작동·운영·유지보수 방법 등 포함
산출 데이터	USB	3식	납품과 관련한 영상, 그래픽, 실행파일 등 포함
복구용 USB	USB	3식
품목별 식별번호	A4	3부	물품목록정보의 관리 및 이용에 관한 법률에 따라 제출
개발한 체험물	HDD	3식	개발소스 및 실행파일 포함
사업기록물 (사진 등)	HDD	3식	사진: JPEG, TIFF 3000만 화소 이상
관련 서류 제출	A4	3부	조명, 색채, 영상물 제작, 그래픽 원본데이터, 안내문 원고, 각종 회의 및 감수 또는 자문록, 사업 수행 중 산출된 모든 자료 일체 등 발주기관이 요구하는 사항

※ 인쇄물 이외의 원본파일(HWP 등)은 이메일로 별도로 제출할 수 있고, 최종완료보고서      제출 시 사업수행 중 발생한 모든 산출물을 저장매체(HDD)에 담아 3식 제출함

(사정에 따라 발주기관과 협의 후 조정 가능)

Ⅲ. 제안서 작성 및 제출

1		제출도서의 종류 및 규격

□  모든 도서는 PDF 파일로 변환, 나라장터에서 온라인으로 제출

ㅇ 제안업체가 어디인지 알 수 있는 부분은 반드시 삭제

ㅇ 제출된 제안서 편집오류, 누락 등으로 인한 평가 불이익에 대한 책임은 제안업체에 있음

도서명	규격 및 양식
기술제안서	▪ A3규격(297㎜ × 420㎜) ‘가로’로 작성 ▪ 총 30매 이내 ▪ 제공된 표지(서식)와 용지서식을 사용 ※ 기준 매수 권장 / 표지, 배면지, 간지 제외 ▪ 제안요청서의 기술제안서 평가 항목 순으로 작성
사업수행능력 평가서	▪A4규격(210㎜ × 297㎜)규격 ‘세로’로 작성 ▪제공 서식(표지)과 용지 서식을 사용 ▪법인일 경우 등기사항전부증명서, 법인인감증명서 각 1부 ※ 개인사업자인 경우, 인감증명서 1부, 주민등록등본 1부 ▪사용인감계 1부 ▪사업자등록증 사본 1부(사실과 상이 없음 확인 필)

2		제안서 작성 요령

1. 제안서 평가항목 및 기준에 근거하여 작성해야 함

2. 제안요청서를 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 함

3. 제출 서류의 작성은 지정 서식을 따라야 함

4. 제안서는 제출 후에는 내용을 수정·보완·변경할 수 없음

5. 제안요청서에서 요구하는 사항에 대하여 관련규정 및 제반규정에 적합하게 설계·시공될 수 있도록 계획해야 함

6. 제안입찰 제출에 소요되는 모든 비용은 입찰 참여자가 부담

7. 제안사는 저작권법에 저촉되지 않는 순수 창작물로 제안하여야 함

8. 공고내용에 포함되지 않은 사항은 제안요청서에 질의하여 답변으로 회신 받은 내용에 따르며, 그 외에 명시되지 않은 사항은 발주기관의 결정에 따라야 함

9. 제안서에 기재된 내용이 허위로 밝혀지거나 지침을 준수하지 않은 제안서는 심사제외 등 불이익이 있을 수 있으며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

10. 본 지침서에 수록되지 아니한 사항은 타 일반 용역 관례에 따르고 구성과 관련한 기초 자료는 제안사가 조사 및 검토하여야 함

3		제출도서의 작성방법 및 목차(권장사항)

1. 공통사항

가. 제안서에는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항에 대한 해결 방안을

제시하여야 함

나. 발주기관은 필요시 입찰 참가자에 대하여 추가 제안이나 자료를 요청할

수 있으며, 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

다. 제안서 용지 규격, 페이지, 제본, 인쇄 등 형식적인 사항은 권고사항임

2. 사업수행능력 평가서

가. 사업수행능력 평가서는 제안요청서에 첨부한 서식을 사용하여 작성함

나. 쪽 번호는 하단 중앙에 표기하고 전체 쪽수는 표지와 목차를 포함하여

제작하되, 증빙서류는 쪽수에서 제외함

다. 사업수행능력 평가서에 기입된 일반현황 및 연혁, 조직 및 인력운용 계획,

경영상태 등에 관한 제반사항을 아래 제시한 목차에 따라 간략하게

정리해 기입함

목 차	세 부 내 용	비고
1. 자기평가표	▪ 사업수행능력 자기평가표	서식 제2호
2. 일반현황 및 연혁	▪ 제안업체의 일반현황 및 연혁을 명료하게 제시 ▪ 대표자 선임계	서식 제3호 서식 제4호
3. 조직 및 인력 운용 계획	▪ 사업수행조직 - 보유인력 현황(기술인력 표시 필수) - 투입인력 계획 - 공동계약 가능	서식 제5호~제8-1호
4. 사업수행실적	▪ 최근 3년간 해당사업과 관련이 있는 사업수행실적 (실적증명서 : 해당기관의 확인을 받아 제출)	서식 제10호 ~ 제 10-1호
5. 경영상태	▪ 기업 경영상태 평가 (기업신용평가 등급확인서 첨부)	서식 제11호 ~ 제 11-1호

3. 기술제안서

가. 제안서는 다음의 내용을 포함하는 목차로 구성함

1) 제안 개요

2) 사업수행

3) 사업관리

4) 지원부분

5) 기타사항

나. 제안서 내용의 세부 작성지침은 다음과 같음

1) 제안 개요 : 제안의 목적, 배경, 범위, 제안의 특징 및 전략, 기대효과 등에 대한 명확한 소개

2) 사업수행

(1) 추진전략 및 방법 : 본 과업에 대한 전반적인 추진전략 및 방법론 제시

(2) 공간-환경조성 기획안 및 제작내용

- 영상시스템 구축을 위한 인프라 및 효과적인 감상을 위한 공간

인테리어 컨셉, 기획의도, 구현방법 등

(3) 영상 기획안 및 제작내용

-콘텐츠별 기획의도, 컨셉, 시나리오, 스토리 전개의 차별성, 구현

(제작)기법, 인터랙션, 후반작업(자막, 음악 및 음향, 더빙) 등을 기술함

3) 사업관리

(1) 사업 추진체계

(2) 수행조직 및 업무분장

1) 사업관리자(PM)은 입찰공고일 전일부터 입찰참가업체에 재직 중인 자

이며 공동계약으로 참여할 경우 대표사 소속이어야 함

(관련분야 경력 10년 이상 권장)

2) 실무책임자(제작자, 관리자)는 필히 사업기간 동안 100% 투입

가능한 자이어야 함

3) 공동수급업체가 있는 경우 업무분장 내역에 업체별 참여비율을 명시

4) 이력사항은 성명, 소속, 해당분야 근무경력, 보유자격증 현황, 본 사업 참여시 임무, 근무경력 및 기술경력, 목표투입공수(M/M), 최근 3년간 주요 경력 등으로 구성

(3) 사업수행전략 및 일정

- 원활한 사업수행을 위한 조직별 전략을 기술하고 사업추진 예정   일정을 참조하여 추진일정을 상세히 제시함

(4) 산출물 관리

- 사업추진 과정에 생산된 산출물의 관리방안과 제반 작업 단위별    산출물의 종류, 주요 내용 및 제출시기, 제출부수 등 제시

(5) 콘텐츠 시범운영 및 품질보증계획

1) 콘텐츠 감리, 감수, 시범운영 등을 위한 전반적인 방안 제시

2) 품질보증 및 인허가 획득을 위한 조직, 방법, 절차, 내용 제시

(6) 통제계획 및 리스크 관리

1) 사업의 효율적인 추진을 위한 통제방안 제시

2) 사업이 계획대로 수행되지 못할 경우에 대비한 리스크 관리의

구체적인 방법 및 절차 제시

4) 지원부분

(1) 교육훈련 계획

- 관리자 등 이용대상자별 매뉴얼 상세 제시

(2) 하자보수 계획

- 본 사업의 검수완료 후 하자보수 방안 및 계획에 대해 제시

(3) 기타 지원사항

- 본 사업과 관련해 지원 가능한 사항에 대한 내용 기술

5) 기타사항

-상기 항목에 제시되지 않은 제안 및 제안서 평가 관련 내용이 있을 시는 제안서 작성 분량 한도 내에서 추가 가능

다. 제안서 규격은 A3(297㎜×420㎜) 크기를 가로로 30매 이내 작성.

라. 기술제안서는 기본적으로 표지, 목차를 포함하여 아래의 방법에 따라 작성되어야 하며, 쪽번호는 하단 중앙에 표기함.

1) 항목부호 순서는 「Ⅰ」, 「1」, 「가」,「1)」, 「(1)」, 「①」

구 분	항 목 부 호
첫째 항목 둘째 항목 셋째 항목 넷째 항목 다섯째 항목 여섯째 항목	Ⅰ., Ⅱ., Ⅲ., Ⅳ. ․․․ 1., 2., 3., 4., ․․․ 가., 나., 다., 라., ․․․ 1), 2), 3), 4), ․․․ (1), (2), (3), (4), ․․․ ①, ②, ③, ④, ․․․

2) 목차 항목 중 해당내용이 없으면 「해당사항 없음」으로 서술

3) 글자체는 제목이나 중간 목차 등은 헤드라인 M체, 본문은 휴먼명조체, 본문 중간에 참고내용을 넣거나 구체적인 수치 등을 표시하고자 할 때는 중고딕체로 작성

4) 글자크기는 문서제목 20포인트, 본문 15포인트, 중간참고내용 13포인트로 하되 필요에 따라 글자크기 변형 가능(용지여백: 위쪽 15, 아래쪽 10, 왼쪽 20, 오른쪽 20, 머리말 10, 꼬리말 10)

마. 주요 시설물 명칭 및 규모, 면적은 해당 시설물에 직접 기재함

바. 한글과 아라비아 숫자로 하며, 미터법(mm) 사용. 단, 부득이한 경우 영문이나 한문을 한글과 함께 표기할 수 있음

사. 콘텐츠 구현에 사용되는 장비는 사양을 명기함

4		효력 및 유의사항

1. 제안요청서의 성격

가. 본 제안요청서의 내용은 발주기관과 제안사(계약체결 이후에는

‘사업자’) 간의 적법한 협의 또는 발주기관의 내부사정에 따라 수정․변경될 수 있음

나. 본 제안요청서의 내용은 사업자 선정에 필요한 최소한의 요구사항을 기술한 것이며, 제안서 작성 및 사업추진에 따른 제반사항 모두를 상세히 기술한 것은 아님

다. 비록 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항일지라도 본 사업에 반드시 필요하다고 인정되는 사항은 사업범위에 포함된 것으로 봄

라. 제안요청서에 대한 질의 답변사항은 모든 제안자에게 동일한

효력을 가짐

2. 제안서의 효력

가. 제안서에 명시된 내용과 발주기관의 요구에 의하여 수정․보완․변경된 내용을 포함한 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며 본 제안요청서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우라도 제안사는 이의를 제기하지 못함

나. 발주기관은 필요시 입찰참가자에 대하여 추가 제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

다. 제출서류가 미비하거나, 심사에 필요한 내용항목의 누락 등 구비서류가 불충분한 경우에는 심사대상에서 제외될 수 있음

라. 제출된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 수정, 추가, 대체할 수 없으며 사실과 일치하여야 함

마. 제안서, 제안요청서, 계약서에 명시된 내용의 해석에 있어 그 뜻이 모호하여 의견을 달리할 경우, 발주기관의 해석에 따름

3. 작성 시 유의사항

가. 모든 제안사항은 현실적으로 제작․설치 및 실행 가능성이 있어야 함

나. 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하여야 하며, ‘~를 제공할 수도 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~를 고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주

다. 제안사는 제안내용에 대한 모든 책임을 지며, 발주기관은 제안내용에 대한 확인을 위해 추가자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있음. 이 경우 제안사는 이에 적극 응해야 함

라. 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용할 수 없음

마. 제안서 작성과 관련된 질의는 지정기일까지에 한하여 서면으로 가능하며, 답변도 서면으로 된 내용만 유효함(전화 문의 불가)

바. 모든 제안 서류 작성은 한글표기를 원칙으로 하며, 부득이 전문용어를 사용하는 경우 한글로 용어 해설을 표기

사. 제안서 기재사항을 입증할 수 없거나, 허위로 작성한 사실이 밝혀질 경우, 평가 대상에서 제외

아. 기술제안서등 제출자료는 모든 문서의 여백, 앞뒤, 표지 등 어느 곳이든 작성 또는 제안업체 등을 인지할 수 있는 어떠한 표기도 하지 않아야 하며, 인지할 수 있다고 객관적으로 판단되는 특정표기가 발견될 시 공정한 심사를 위해 임의로 삭제할 수 있으며, 심사 도중 발견된 경우 평가위원회 판단하여 감점 또는 실격처리 할 수 있음

Ⅳ. 제안서 평가

1		평가일정 및 방법

1. 평가일정 : 제안서 접수 후 참여업체 서면 평가 실시 ※현장발표 없음

2. 평가방법 및 기관: 정량적 평가 및 정성적 평가/국립익산박물관

3. 평가위원회 구성

가. 제안서의 공정한 평가를 위하여 각계 관련분야 전문가로 구성된 평가위원회를 구성․운영함

나. 평가위원회는 제출된 제안서를 심사하여 평가

다. 평가위원의 명단은 공정한 심사를 위해 사전에 공개되지 않음

4. 평가방법

가.  제안서의 평가는 기술능력평가와 입찰가격평가로 구분하며, 기술능력평가는

사업수행능력평가(객관적 평가)과 기술제안서평가(주관적 평가)로

구분하여 실시함

나. 제안서의 평가는 100점 만점 기준으로 하되, 기술능력평가 90점(사업수행능력평가 10점, 기술제안서평가 80점), 입찰가격평가 10점의 배점으로 평가함

다. 사업수행능력평가는 객관적 지표에 의한 평가로서 정해진 기준에 따라 제출된 자료에 대해 평가점수를 산정함

라. 협상적격자 선정은 기술능력평가와 입찰가격평가를 종합평가한 결과 고득점자순으로 함. 다만, 기술능력평가점수가 기술능력평가 배점한도의 85% 미만인 자는 협상대상에서 제외함

마. 합산점수가 동일한 경우에는 기술능력평가 점수가 높은 제안사를 우선으로 하며, 기술능력평가 점수도 동일한 경우에는 기술제안서 평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 함

바. 협상적격자와 협상순위가 결정되면 협상적격자에게 협상순위와 협상일정을 개별 통보함

2		제안서 평가 항목 및 기준

구 분		평가항목	세부 평가항목	배점	비고
기술 능력 평가 (90)	사업수행 능력평가 (10)	사업수행실적	○입찰공고일 기준 최근 3년간 실적누계	4	10
		기술능력	○관련기술인력 확보	3
		경영상태	○기업신용도 평가등급	3
	기술 제안서 평가 (80)	사업의 이해	○ 사업목적과 내용의 이해도	5	15
			○ 유사사례 분석 및 적용의 타당성	5
			○ 제안요청서의 부합성 및 실현가능성	5
		전시 및 콘텐츠 기획·개발	○ 공간 조성, 콘텐츠 및 디자인 계획의 적정성과 독창성 ○ 동선 계획 및 공간 효율성	10	30
			○ 콘텐츠 제작을 위한 사업계획 및 기술력의 전문성, 구체성, 우수성, 적절성	10
			○ 조직 및 인력(자문인력 포함)의 전문성, 우수성, 적정성	5
			○ S/W와 H/W 상호호환성 확보 계획의 적정성	5
		콘텐츠 연출 및 기술	○ 체험요소 적정성, 표현방식의 창의성, 우수성	10	25
			○ 기술적용 방안의 구체성 및 적절성 ○ 시스템(콘텐츠 구현장비)의 기술적 우수성, 내구성 신뢰도	10
			○ 콘텐츠 운용시스템 구축 및 관련 환경 조성의 구체성 및 적절성	5
		제작·설치 및 관리·운영 계획	○ 세부추진일정 및 관리계획의 타당성 ○ 사업수행 조직 및 업무분장 계획의 적정성	5	10
			○ 시범운영계획의 적정성 ○ 관리‧유지‧운영‧하자보수 방안의 적정성 및 실행가능성	5
입찰가격평가 (10)		입찰가격	○ 제안가격평가	10	10
합 계		100			100

1. 기술능력평가 : 90점

가. 사업수행능력평가 : 정량적 평가(10점)

※ 공동수급체를 구성한 경우, 각 구성원별(공동이행, 분담이행) 해당 점수에 출자비율을 곱하여 그 점수를 합산하여 최종 평가함. 평가결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

1) 사업수행실적평가(4점)

평가 항목	평 가 요 소	배점	평 가 방 법		비 고
			기 준	평점
수행 실적	해당 사업규모대비 입찰공고일 기준최근 3년간 사업수행(금액기준)실적 합산	4.0	A. 100%이상 B. 70%이상~100%미만 C. 40%이상~70%미만 D. 40%미만	4.0 3.6 3.2 2.8	○사업비 기준(부가세 포함)

※ 실적은 준공 또는 납품 완료된 것만 인정하며, 준공(납품) 금액이 기재된 발주기관 발행 실적 증명서 사본(사실과 상이 없음 확인 날인 필) 제출

※ 실적 인정 범위 : 국가, 지방자치단체, 공공기관, 민간 등(박물관, 미술관, 과학관, 기념관,

전시관 등) 에서 발주한 디지털콘텐츠 또는 영상 제작이 포함된 전시 연출 실적

※ 준공(납품)금액이 기재된 발주기관의 발행 실적 증명서 사본(사본에는 사실과 상이 없음 확인 날인 필)을 제출하여야 함(민간 실적의 경우에는 실적증명서, 계약서, 세금계산서를 제출해야 함)

2) 기술능력평가(3점)

항목평가	배점	평가방법
전문인력	3.0	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
		각 0.5점	각 0.4점	각 0.3점	각 0.2점
		* 평점 = 인원 x 기술자별 점수 => 평점의 합이 최종점수(최고 3점)

※ 입찰 공고일 기준 6개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자(학위자)만 해당되며 기술자와 학위자 중복적용 불가[재직증명서, 공인기관 인증 자격증(해당자), 최종학교 졸업증명서, 국민연금관리공단 가입 확인서 첨부(필요한 경우 경력증명서 포함)]

※ 기술인력 등급기준은 「엔지니어링산업진흥법 시행령」 별표2 준용(전문분야에 대한 제한은 없음.)

3) 경영상태(3점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	3.0
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	2.85
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	2.7
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	2.1

※ 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림 함

[주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액(조달청협상에의한계약 제안서평가 세부기준) 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.(이하 창업기업에 대한 기간계산은 같다)

5. 공동 이행의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

나. 기술제안서평가: 정성적 평가(80점)

2. 입찰가격평가 : 10점

- 「협상에 의한 계약체결기준」(재정경제부 계약예규)에 따름

3		계약체결

1.  계약의 진행

가. 계약 당사자가 결정되면 계약 당사자에게 계약 일정을 개별 통보

나. 아래 사항 중 하나에 해당하는 경우에는 실격으로 처리

1) 제안업체가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 입찰한 사실이 발견되었을 때

2) 제안서 및 기타 제출된 제반 서류에 허위사실을 기재한 경우

3) 익명성 유지의 원칙 위배 등 제안자가 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우(제안서에 업체명 또는 작성자명, 이를 인지할 수 있는 표기 등)

2. 사업자 결정 및 계약

가. 낙찰자가 선정되면 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 계약을 체결함

나. 계약의 체결 및 이행에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 동법 시행령 및 시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따름

다. 계약 대상자는 통보를 받은 즉시 발주기관 및 조달청 계약담당자와 계약에 응하여야 하며, 10일 이내 계약에 응하지 않을 경우 포기한 것으로 간주함

3. 기타사항

가. 상기 기술한 내용 외에 평가진행 사항은 공개하지 아니함

나. 발주기관은 평가결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 제안업체는 국가계약법 제28조(이의신청) 및 국가계약법 시행령 제110조(이의신청을 할 수 있는 정보조달 계약의 최소 금액 기준 등)에 따라 심사결과에 대해 이의신청이 가능함

다. 실적증명은 발급 후 1년 이내 것만 유효함(입찰공고일 기준)

라. 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 함

마. 본 지침의 해석상 이견이 있을 때에는 발주기관의 해석에 따름

※ 준수사항 안내

1. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제정·시행에 따른 준수사항 안내

- 계약자는 계약체결 이후 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조 및 제5조에 규정된 안전·보건에 관한 의무를 준수하여야 하며, 입찰자는 현장여건, 과업내용 등을 미리 확인하여 이와 관련된 제반비용을 입찰가격에 반영하여야 합니다.

- 수요기관은 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 제4조 제9호에 따라 계약자가 동 법 제4조 및 제5조에 규정된 안전·보건에 관한 의무를 준수하는지 평가·점검할 수 있으며, 계약자는 수요기관이 평가·점검을 실시하는 경우 이에 협조하여야 합니다.

- 계약상대자가 안전·보건 확보에 필요한 조치를 소홀히 하거나, 이행여부에 대한 점검 결과 보완 및 조치 등이 필요한 경우 수요기관은 계약상대자에게 이에 대한 시정을 요구할 수 있습니다.

2. 국민건강보험료 등 사후정산 안내

- 본 입찰 공고 건은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제73조와 「(계약예규) 정부입찰ㆍ계약집행기준」제19장에 따라 국민건강보험료 등을 사후정산하게 되며, 따라서 입찰참가자는 입찰금액 산정 시 국민건강보험료 등의 금액을 반영하여야 함. 차후 계약상대자는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제73조와 「(계약예규) 정부입찰ㆍ계약집행기준」제19장에 따라 국민건강보험료 등을 사후 정산함 (계약자는 보험료 등의 정산증빙자료를 수요기관으로 제출하여야 하며, 수요기관은 정산 서류를 제출받은 후 감액 처리)

4		기타 유의사항

1. 협상대상자의 저작권, 지식재산권 및 기타 법적 소유권은 「저작권과 사용권 관련사항」에 따르며, 타인의 지적재산권 침해 등으로 분쟁이 발생할 경우 제안자가 모든 법적 책임을 짐

2. 협상이 성립되었으나 계약을 포기할 경우 제안서의 내용에 대하여 연고권 등 일체의 권리를 주장할 수 없음

3. 협상대상자는 발주기관과 협의하여 수정, 보완 또는 추가 조정하며 필요한 경우 발주기관의 의견을 반영하여야 함

별첨1 : 제안서 제출 관련 서식

*제안서 제출 관련 각종 서식 목록

서식번호	서식명
서식 제1호	사업수행능력평가서 표지
서식 제2호	사업수행능력 자기평가표
서식 제3호	제안업체 일반현황 및 연혁
서식 제4호	대표자 선임계
서식 제5호	인력 보유 현황(기술인력 표시 필수)
서식 제6호	사업수행 조직 및 인원 구성
서식 제7호	투입인력요약
서식 제8호	참여인력(대표, 총괄책임자, 제작자, 관리자) 이력사항
서식 제8-1호	참여인력 이력사항
서식 제9호	공동수급협정 현황
서식 제9-1호	공동수급표준협정서(공동이행방식)
서식 제9-2호	공동수급 합의 각서
서식 제10호	관련분야 최근 3년간 사업수행실적
서식 제10-1호	사업이행실적 증명서
서식 제11호	제안업체 경영 상태
서식 제11-1호	신용평가등급 확인서
서식 제11-2호	행정처분 확인서
서식 제12호	제안서 표지
서식 제13호	확약서
서식 제14호	위임장
서식 제15호	서면질의서
서식 제16호	보안서약서(개인)
서식 제16-1호	보안서약서(업체대표)
서식 제17호	정보 비공개 동의서
서식 제18호	개인정보 수집‧이용‧제공 동의서

※ 제출된 문서가 사실과 다를 경우, 사업자 선정이 무효화됨을 알려드립니다.

【서식 제1호】

	-

『국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축 용역』

사 업 수 행 능 력 평 가 서

업 체 명 :

대 표 자 :

주    소 :

전화번호 :            (FAX :              )

작 성 자 :            (연락처 : 휴대폰 / 이메일 기재)

【서식 제2호】

사업수행능력 자기평가표

▣ 기술능력 객관적 지표 평가 자체 평점

항 목	세 부 항 목				배 점	평 점	비 고
사업수행실적	누계실적	100% 이상			4.0점
		70% 이상∼100% 미만			3.6점
		40% 이상∼70% 미만			3.2점
		40% 미만			2.8점
		상 한 점 수			4점
기술능력	특급기술자				각 0.5점
	고급기술자				각 0.4점
	중급기술자				각 0.3점
	초급기술자				각 0.2점
	상 한 점 수				3점
경영상태	회사채		기업어음	기업신용 평가등급	-	-	-
	AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0		A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	3.0점
	BBB-, BB+, BB0, BB-		A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	2.85점
	B+, B0, B-		B-	B+, B0, B-	2.7점
	CCC+ 이하		C 이하	CCC+ 이하	2.1점
	상 한 점 수				3점
합 계					10점

【서식 제3호】

제안사의 일반현황 및 연혁

1. 기본사항

업 체 명		대표자
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
총종업원수		매출액 (최근년도)

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

주) 1. 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부

2. 제작공장 보유시에는 공장등록증 사본 첨부

3. 특허보유현황은 관련 특허 개수를 면허증, 허가증, 등록증 보유현황에 표시하고 특허증 사본 첨부

【서식 제4호】

대 표 자 선 임 계

사업명: 국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축

본인은 국립익산박물관에서 주관하는 『국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축』 사업을 위한 제안에 관한 모든 권한을 공동제안대표자에게 위임합니다.

2026.     .

○ 공동제안 대표자

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

○ 공동제안자

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

국립익산박물관장 귀하

【서식 제5호】

인력 보유 현황

(기술인력 표시 필수)

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고

※ 기술자의 구분은 엔지니어링산업진흥법 시행령 [별표2] 기준에 따르며, 공고일 기준 6개월 이전 입사한 자 명기

※ 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 등급순위별로 기재

※ 재직증명서, 자격증, 최종학교 졸업증명서, 경력증명서, 국민연금관리공단 가입 확인서 등 필요한 증명서류 첨부

※ 증명사본 첨부(입찰공고일 이전에 등록된 기술만 인정함)

【서식 제6호】

사업 수행조직 및 인원 구성

1. 제안사의 조직 및 인원 현황

2. 사업수행 조직 및 인원 현황

			사업관리자(PM)
			소속, 직위, 성명
○○부문			○○부문				○○부문			○○부문
소속, 직위, 성명, 담당업무			소속, 직위, 성명, 담당업무				소속, 직위, 성명, 담당업무			소속, 직위, 성명, 담당업무

※ 분야별 책임자를 명시하고, 직위 순으로 기재한다.

※ 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고 될 수 있도록 직위별로 기재한다.

※ 본 수행조직에 등록된 자는 반드시 사업에 투입되어야 한다.

※ 사업관리자(PM)는 용역 전 부문을 총괄할 수 있는 자로 한다.

【서식 제7호】

투 입 인 력 요 약

(제출일 기준)

구분	성명	직위	담당 업무	투입기간	해당분야 업무경력	주요활동 내용 (최종학력, 해당분야 자격증 등)	비고
							총괄 책임자

※ 본 용역에 투입할 전체 인력(채용 예정인력 포함)에 대하여 기재하시기 바랍니다.

※ 구분란에는 팀장, 팀원(해당업체 조직구성에 따라 표기) 등으로 구분 기재하며, 사업관리자    (PM) 1명과 콘텐츠별 책임자(제작자, 관리자) 각 1명을 포함하여 작성하시기 바랍니다.

※ 본 사업에 직접 참여하는 종사자를 대상으로 작성(주민등록번호 미기재)하되, 이를 증빙할 수 있는 서류(경력증명서, 재직증명서, 국민연금, 건강보험증 사본) 첨부

※ 참여인력은 반드시 본 사업에 투입가능한 인력으로 구성하여야 하며, 개인별 보유자격 및 경력사항의 허위 작성이 판명될 경우, 평가 후일 지라도 계약업체 선정을 무효화할 수 있음

【서식 제8호】

참여인력(대표, 사업관리자, 제작자, 관리자) 이력사항

가. 인적사항

소 속							부서 및 직위
성 명	국 문				(한문)			국 적
	영 문							생년월일
주 소	자 택							전 화		- -
								휴대폰		- -
	직 장							FAX		- -
								E-Mail
본 용역 참여임무				사업 참여기간					참여율

나. 학 력

기 간		학 력			학 위
부터	까지	대학교	전공	지도교수
년 월	년 월			▢▢▢
년 월	년 월
최종학위논문제목

다. 경 력

기 간		근무기관	직위(직명)	비 고
부터	까지
년 월	년 월	▢▢▢대학교	교수
년 월	년 월

라. 주요과제수행업적(최근 5년간 본 과제와 관련 있는 업적만 기재)

과제명	주요 실적	참여기간	과제수행 당시 소속기관	역 할	발주처	비 고

※ 본 과제와 직접 관련된 수행업적에 한하여 표기하며, 주요실적에는 특허출원․등록, 사업화 성공 등을 기재

※ 정부지원사업은 전부 기재하고 누락될 시 탈락 조치될 수 있음

※ 역할란에는 총괄책임자, 수행자 중 택일하여 기재함

마. 논문 발표 실적(최근 3년간 본 과제와 직접적으로 관련된 논문만 기재)

논문명	주 요 내 용	발표연도	학회명 / 학술지명	비 고

바. 타 과제(수행중, 수행예정, 신청중) 내용

사업기간	과 제 명	주관연구기관	지원기관	사업비(백만원)	역할	참여율	구분

※ 구분란에는 수행중, 수행예정, 신청중을 기재함

※ 역할란에는 총괄책임자, 수행자 중 택일하여 기재함

【서식 제8-1호】

참여인력 이력사항

※ 제안사 대표, 사업관리자(PM), 제작자, 관리자를 제외한 인력 작성

※ 사업별로 참여율 기재

※ 경력란에 사업별로 수행 중인 사업 기재

※ 허위 작성 시 국가계약법 시행령 76조 및 시행규칙 별표 2 [부정당업자

의 입찰참가자격 제한기준]에 의거 입찰참가자격 제한 조치

성 명			업 체		직 책		연 령	세
학 력	대학교 전공				해당분야 근무경력		년 개월
	대학원 전공				학위 및 자격증
본용역참여임무				용역참여기간			참여율	%

경 력 사 항 (자격취득이후 사항 기재)
용 역 명	참 여 기 간 (년.월～년.월)	담 당 업 무 (본 사업과 관련분야)	발주처	비고

※ 경력사항은 본 사업과 밀접한 경력 순으로 기재

※ ‘담당업무’는 본 사업과 관련된 분야 위주로 작성

※ ‘비고’란은 해당 사업 참여시 담당한 역할 기재

【서식 제9호】 (해당 시 제출)

공동수급협정 현황

구 분	업체명	주 소	대표자	전화	출자비율(%)	비고
공동이행
계

※ 공동수급 참여사의 대표자 모두 날인

※ 공동수급협정서 사본 첨부

2026년  월  일

(인)

(인)

(인)

국립익산박물관장 귀하

【서식 제9-1호】  (해당 시 제출)

공동수급표준협정서 (공동이행방식)

(계약예규) 공동계약운용요령[시행 2026. 1. 2.]

[재정경제부계약예규 제29호, 2026. 1. 2., 일부개정]

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 : 금액은 기재하지 않음

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리․의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ :    %

2. ㅇㅇㅇ :    %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

[본조신설 2012.4.2.]

제11조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 <신설 2012.4.2.>

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제2항제2호가목에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우 <개정 2023.6.30.>

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 남은 계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년  월  일

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)

국립익산박물관장 귀하

【서식 제9-2호】  (해당 시 제출)

공동수급 합의 각서

입찰공고번호	제 호	입 찰 일 자	2026년 월 일
입 찰 건 명

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참가하고자 귀 기관에서 정한 각종조건, 제안요청서 및 입찰공고사항 등을 전적으로 승낙하며 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 결의하였기에 본 합의각서를 제출합니다.

2026년  월   일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지 :

상           호 :

성           명 :              (인)

사업자 등록번호 :

주민 등록  번호 :

공동수급체 구성원

주사무소 소재지 :

상           호 :

성           명 :               (인)

사업자 등록번호 :

주민 등록  번호 :

국립익산박물관장 귀하

【서식 제10호】

관련 분야 최근 3년간 사업수행실적

[주요 사업 내용]

업 체 명 :

연번	① 용역 (공사)명	용 역 (공사) 기 간	②계약금액 (단위 : 백만원)		발주기관			③구체적업무수행 내용 (주요콘텐츠)	④타사와 공동프로젝트수행여부	비 고
					상호명, 관공서명	주 소	전화 번호
1										최대실적
계			소계
			누계

① 용역(공사)명(연도순으로 기재하며 본 업무와 유관한 것만 기재) : 해당 건수별로 정확하게

② 계약금액 : 공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 비용만을 괄호 안에 기재

③ 구체적인 업무수행 내용 : 수행작업내용을 단계별(현황분석 및 진단, 기본계획 및 실행계획수립, 업무개발, 장비구입 등)로 작성

④ 공동 프로젝트 수행여부 : 타사와 공동으로 프로젝트를 수행한 경우 타사의 상호명을 기재

⑤ 소계는 최대실적을 제외한 합계를, 누계는 최대실적을 합한 합계를 기재

※ 실적증명원(사실과 상이없음)사본 1부. 단, 수행(수주포함)중인 사업에 한하여 계약서 사본1부 첨부

※ 단 확인결과 기재된 내용 중 허위사실이 발견된 경우 무효처리함

【서식 제10-1호】

사업 이행실적 증명서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처		국립익산박물관
	증명서용도		｢국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축｣ 실 적 증 명 용
	사 업 규 모
사업이행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦				100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적		비 고
					비율(%)	실적(원)
			∼
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2026년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

주 1) 이행실적은 입찰공고 시 제시한 사업범위 및 기준(금액) 등의 참가자격 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하고 단독참여의 경우 실적금액 기재

2)  타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

【서식 제11호】

제안업체 경영 상태

구 분	신용평가등급	비고
회사채에 대한 신용평가등급
기업어음에 대한 신용평가 등급

<유의사항>

※ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채․기업어음에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급 중 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.

※ 회사채, 기업어음에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급은 유효기간 내에 있는 것이어야 한다(유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우도 인정).

※ 합병한 업체는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급을 적용한다.

※ 신용등급확인서 제출

【서식 제11-1호】

신용평가등급확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등기부등본 (주민등록번호)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이 통보합니다.

교부일  2026.   .   .

신용평가기관 :                     인

주) 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

【서식 제11-2호】

행정처분 확인서

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
지체상금 부과 또는 부정당업체 제재처분

※ 회사(제안사)가 관계법령에 의해 지체상금 부과 또는 부정당업체 제재 처분된 사실을 기재 - 최저임금 위반, 임금체불, 고용 개선 조치 미이행 등 포함

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

【서식 제12호】

제안서 표지양식 (참고용)

<편집용지> 위쪽 여백: 80 아래 여백: 60 머리말: 0 꼬리말: 0 왼쪽 여백: 85 오른쪽 여백: 85																						80
		국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축																								30p, 장평 90%
		제 안 서																								72p, 장평 95%
85			중앙정렬
										2026년 월 일										20
155										110
							인식명칭					--											16
130							60					20		20		20		20			20
							60

주) 1. 표지크기: A3

2. 단위: ㎜

3. 문자: 굴림체, 흑색

4. 글자크기 : 제목 30, 72호, 날짜. 22호, 식별번호 22호

5. 좌우간격: 중앙 정렬

6. 사업제안서의 여백, 앞뒤, 표지 등 어느 곳이든 작성 또는 제안업체 등을 인지할 수 있는 어떠한 표기도 하지 않아야 함

【서식 제13호】

확   약   서

사업명 : 국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축

위 사업 입찰에 참여한 당 업체는 귀 박물관의 사업자 선정방식 및 제안요청서 내용과 본 입찰에 관련된 귀 박물관의 방침에 이의가 없음을 확약하며, 공정한 심사와 객관적인 내부절차에 의한 입찰 진행상의 제반 결정에 어떠한 이의를 제기하지 않겠습니다.

그리고 귀 박물관이 평가를 위해 구성한 평가위원과 평가방법 및 평가기준에 따른 결과에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않겠으며, 사업자 선정전까지도 귀 박물관의 추가요청 내용과 계약체결에 따른 증빙 서류 제출 등 제반 유의사항을 준수할 것을 서약합니다.

2026년    월     일

주      소 :

업  체  명 :

대  표  자 :                   (인)

국립익산박물관장 귀하

【서식 제14호】

위   임   장

본인은 ○○○업체의 대표로서 국립익산박물관에서 시행하는 <국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축 용역> 사업의 업체선정 입찰에 관한 모든 업무 권한을 아래 사람에게 위임합니다.

소       속 :

직       위 :

성       명 :

주민등록번호 :

2026.    .     .

업 체 명 :

대 표 자 :              (인)

국립익산박물관장 귀하

【서식 제15호】

서 면 질 의 서

접수번호 :

발송일시
업 체 명	대표자 : (인)
담 당 자	소 속 : 직 위 : 성 명 : (인)
연 락 처	전 화 : ( ) - FAX : ( ) -
제안요청서 page
질의내용	※ 이메일로 전송할 경우 전송 후 반드시 전화(063-830-0926)로 접수여부를 확인하시기 바랍니다. ※ 제안지침서를 다시 한번 숙지하시어 질문하여 주시기 바랍니다. ※ 명료하게 작성요망바랍니다.
국립익산박물관장 귀하

【서식 제16호】

보안 서약서(개인용)

본인은     년   월   일부로 <국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축> 관련한 업무(연구개발, 제작, 입찰, 기타)를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 <국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축>  관련된 소관업무가 기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 나는 이 기밀을 누설함이 국가이익을 침해할 수도 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일체 타인에게 누설하지 아니한다.

3. 나는 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 전자정부법 제35조(금지행위) 및 제76조(벌칙)

년      월      일

서약자    업체명       부서        생년월일

직위        성    명         (서명)

서  약    소속

집행자                 직위        성    명         (서명)

【서식 제16-1호】

보안 서약서 (업체대표용)

본인은     년   월   일부로 <국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축>  관련 사업(업무)을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 <국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축> 관련 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

년      월      일

서  약  자        업   체   명 :

(업체 대표)       직        위 :

성        명 :                        (서명)

생 년  월 일 :

서약집행자        소        속 :

(담 당 자)        직        위 :

성        명 :                        (서명)

생 년  월 일 :

【서식 제17호】

정보  비공개  동의서

본인은 귀 관의 『국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축』과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 일체 누설하지 않겠으며 귀 관이 정한 보안사항을 철저히 준수할 것을 동의합니다.

2026.    .     .

상 호(법인명)  :

주        소 :

대   표   자 :                       (인)

사업자등록번호 :

국립익산박물관 귀하

【서식 제18호】

개인정보 수집･이용･제공 동의서 (양식)
소속기관	성명	직위	동의여부	서명
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
※ 본 과업에 참여하는 인력은 전원 다 서명해 주시기 바랍니다. 본인은 국립익산박물관(이하 ‘박물관’)의 “국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축”사업의 입찰과 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - 박물관이 수행하는“국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축”사업 입찰 참여에 따른 입찰서류확인을 위해 최소정보를 수집하는데 활용. 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목 - 제안사 대표자의 성명, 전자우편, 전화번호, 직장주소, 학력, 경력, 은행/계좌번호, 휴대폰번호 등. - 공동수급체 구성원의 직장주소, 상호, 성명, 사업자번호, 은행/계좌번호 등. - 참여인력의 성명, 소속/직책, 연령, 학력, 경력 등. - 입찰참가 신청 제출자의 성명, 직위, 전화번호, 전자우편 등. 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 원 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간까지(10년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음. - 거부에 따른 불이익 : 계약체결 대상에서 제외. 2026년 월 일 국립익산박물관 귀하

<참조 1>

부정당업자의 입찰참가자격 제한기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조(부정당업자의 입찰참가자격제한) 제2항 제3호 및 동법 시행규칙 [별표2] 2. 개별기준을 따라 국립익산박물관 브랜드 체험전시 콘텐츠 구축에 부정당업자의 입찰참가자격을 제한함