『초록우산 2026년 업사이클링 활용 실외놀이터 설계 및 시공 & 환경교육∙캠페인 용역』 제안요청서

2026. 5.

					목 차
Ⅰ. 사업개요 1 Ⅱ. 사업 범위 4 Ⅲ. 제안요청 내용 10 Ⅳ. 사업 수행 지침 12 Ⅴ. 제안 안내사항 15 Ⅵ. 제안서 작성요령 16 Ⅶ. 제안서 평가 및 선정 18 [별지1 서식] 용역사업 제안서 [별지2 서식] 일반현황 및 주요 연혁 [별지3 서식] 사업 실적 [별지4 서식] 사업수행 조직도 [별지5 서식] 참여인력 현황 [참고-1]기술인력 등급 구분기준

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명: 초록우산 2026년 업사이클링 활용 실외놀이터 설계 및 시공

& 환경교육∙캠페인 용역

□ 사업기간: 계약체결일 ~ 2026. 12.

□ 사업금액: 금270,000,000원(금이억칠천만원,VAT포함)

□ 계약방법: 일반(총액)협상에의한계약

사업목적

가. 아동의 기본권(놀 권리·건강권) 보장 및 전인적 발달 도모

아동이 흥미롭게 야외 탐색 활동을 할 수 있는 전용 실외 놀이공간을 조성함.

나. 자원순환(업사이클링) 놀이터 구축을 통한 환경 문제 해결

매년 무분별하게 버려지는 수백만 개의 폐카드(공카드, 휴면카드)를 놀이공간의 건축 소재로 재활용하여 방치되는 플라스틱 폐기물 문제를 해결하고, 자원 순환을 실천하는 혁신적인 아동 친환경 공간 조성 모델을 제시함.

다. 업사이클링 공간 기반의 실천형 환경 교육 및 친환경 인식 개선

아동과 지역주민이 플라스틱 폐기물 문제와 자원순환 과정을 실제적으로 체감할 수 있도록, 업사이클링 소재를 활용한 체험형 교육을 구체적으로 기획·운영함.

주요 사업내용

구분	업사이클링 놀이공간 구축 및 관리	환경, 놀이터 안전 교육	환경보호 캠페인 진행	완공식 및 환경캠페인 행사
내용	공간 구성 및 기획, 철거공사, 기초공사, 디자인, 설계, 놀이시설 구성, 놀이터 관리공간 구성, 모니터링을 통한 유지보수 및 하자보수, 놀이터 관련 설치검사 및 안전검사 등	아동 대상 환경교육 진행(업사이클링 DIY 체험 및 환경교육, 놀이터 안전교육 교육 등) *학교, 시설 등 기관 방문 대면 형태 진행	환경 보호 캠페인을 위한 제물(굿즈 등) 제작 및 배포	완공식, 놀이공간 투어 및 체험, 기념 촬영 등
예산범위	180,000,000원 * 1개소	3,000,000원 * 20회기	20,000,000원* 1회	10,000,000원 * 1회
소계	180,000,000원 내	60,000,000원 내	20,000,000원 내	10,000,000원 내
※ 과목기준 예산범위 내로 구분하여 가격산출내역서 작성

사업의 기대효과

가. 폐카드를 활용한 친환경 업사이클링 놀이공간을 조성하여 아동에게 유해물질 없는 안전한 놀이 및 학습 환경을 제공하고, 아동의 놀 권리 보장을 강화함.

나. 맞춤형 교육(환경·안전) 및 캠페인을 전개하여, 지역사회의 환경 보호에 대한 관심과 인식을 증대시킴.

다. 수백만 개의 버려지는 폐카드를 건축 자원으로 재활용하여 자원순환 실천을 통한 선도적이고 친환경적인 이미지를 제공함.

추진 일정

구 분		2026년
		6	7	8	9	10	11	12
사전 조사	1.1 사업 추진 계약	●
	1.2 사업 세부내용 논의	●
	1.3 놀이터 조사 (아동의견 조사 및 기획)	●
공간 구축	2.1 공간 구성 및 기획	●	●
	2.2 공사 착수 및 진행	●	●	●	●	●	●
	2.3 모니터링/중간보고	●	●	●	●	●	●
	2.4 준공						●
교육 및 행사	3.1 교육 진행		●	●	●	●
	3.2 놀이터 안전 및 환경캠페인 진행	●	●	●	●	●	●
	3.3 완공식 (개소식) 및 캠페인						●
	3.4 교육 모니터링/중간보고	●	●	●	●	●	●
사업 종료	4.1 이용자 설문조사							●
	4.2 평가 및 최종결과보고							●

※ 협의 후 업무일정 조정 가능

※ 놀이터 준공 전 놀이터 안전검사 및 설치검사 등 놀이터이용안전에 필요한 검사 완료 후 서류 제출 필수

Ⅱ		사업 범위

1. 업사이클링 놀이공간 구축 및 관리 놀이공간 구성(Upcycled Playground)

가. 대상지 개요

부지 정보		주소	경기도 부천시 원미구 중동 1030-2 (계남공원)
		전체 면적	15143.6㎡ / 4,580평				조성부지			계남공원 안의 놀이터 부지 약 1,128㎡ 추정 ※ 제안서 설계시 해당 면적으로 진행하며 업체선정 후 실측 후 재설계 필요
		시설물 관리주체	경기도 부천시 공원녹지국 공원관리과				준공 일자			2012-04-05
시설물 현황		구 분	시 설 물							비 고
		놀이 시설	탄성포장, 조합놀이대							조성 이후 리모델링 진행 없음.
		편의 시설	남/여 화장실, 벤치 등							-
		기타	초등학교 인근 공원으로 주거 및 상업 밀집 지역 내 위치함							-
위치도
주 변 현 황	보육 및 교육시설	구분		유치원(반석)		초등학교(부흥,부광초)					아동복지기관
		학생 수		174		645
	놀이시설	구분		실내놀이터		키즈카페					놀이 공간
		시설 수		-		3					-
	인구 및 취약계층	구분		세대수	인구	0~만9세 아동 수			취약 계층 수		다문화 아동 수	장애 아동 수	비고
		부천시		342,945	756,701	38,075			203,047		2,976	913	-
시설물 현황
어린이 놀이터 현판								어린이 놀이터 현황
어린이 놀이터 현황								어린이 놀이터 전체적인 사진
어린이 놀이터 현황								어린이 놀이터 현황

*조성계획 도면 필요시, 사업담당자에게 별도 문의

나. 기획 및 설계 부문

구 분	내 용
디자인 기획	① 폐카드(공카드, 휴면카드) 활용 한 업사이클 요소 반영 : 환경 친화 요소를 반영하여 디자인 기획 (ex.숲놀이터 등) : 카드사 협조 예정이며 제공된 공카드를 낙찰된 업체가 플라스틱 원료화 후, 놀이공간 기구와 소품 또는 안내판 등 공간에 다양하게 활용 (필수) ② 신용카드사회공헌재단 및 초록우산 브랜딩 요소 반영 : 신용카드사회공헌재단 및 초록우산 로고를 현판 등 활용 요청 : 초록우산 브랜드 캐릭터(초뭉이) 디자인 활용 가능 : 사업의 취지를 드러낼 수 있는 디자인 구성 및 기획 (친환경 및 재활용,업사이클링)
공간 설계	① 아동 권리 보장 공간 설계 : 아동 놀 권리 보장을 위한 공간이므로 놀이기구, 출입구, 휴게공간 등은 아동 발달 기준에 의거하여 설계 및 디자인 기획 (벤치 높이, 미끄럼방지, 기구 라운딩처리, 손끼임방지 등) ② 아동의 의견을 반영하여 놀이공간 설계 : 놀이공간 설계 전 업체에서 주변 초등학교에 아동의 의견을 반영(혹은 디자인선호조사) 한 디자인 설계를 진행하고 시공

다. 공사 부문

구 분	내 용
개요	1)공사기간 : 착공일로부터~ 3개월 착공일: 2026. 7월 내 * 준공일: 2026. 11월 내 (준공일 기한 준수 필수) 2) 장소 : 경기도 부천시 원미구 중동 1030-2 (계남공원) (송내대로 262) 3) 면적 : 약 1,128㎡ (추정, 실제공사 진행 시 실측 진행 필요) * 면적오류에 따른 금액 조정 불가 ④ 협력체계 : 신용카드사회공헌재단, 초록우산, 부천시
주요내용	1) 철거공사(기존 놀이시설 철거, 폐기물 처리 등) 2) 기초공사(바닥공사, 출입구 공사, 보도공사 등) 3) 안전 인증 대상 놀이기구 설치, 안전시설 설치 및 안전검사 실시 (합격 결과 증빙 및 제출 필수) 4) 놀이시설 안내판 및 현판 등 설치

라. 시공 시 준수사항

1) 시설물 설치 안전 준수

- 모든 시설물은 이용자들의 안전을 최우선시하여 설치하고 관련 법규에서 정하고 있는 시설로 설치하고, 충격 및 미끄럼 방지를 고려하여야 함

- 제작 시설품의 모든 규격, 사양, 품질, 성능, 효율 등은 관련법과 규정에서 제시한 기준 이상으로
설계함. 다만, 기준이 명확하지 않거나 서로 상이한 경우에는 강화된 기준을 따르고 발주기관의 승인 득하여 설계·제작

- 모든 시설, 장비, 자재 등은 성능과 안전도가 검증된 KS 표시품과 형식승인품 및 그 이상인 제품을 우선 사용해야 하며, KS표시품이 없을 경우 감독관 및 발주기관의 사전 승인 후 사용

- 바닥재는 오염에 강하고 충격 흡수가 가능한 탄력성 있는 재질로 설치

- 필요시 놀이시설물과 관련된 바닥, 벽을 설치하고 내구성 있는 마감재 및 방염 자재 사용

- 주요 구조부를 내화구조로 하고, 불연재료·준불연재료 또는 난연재료로 해야 함

- 시설물 제작, 공간연출 및 각종 체험의 경우 추락, 파손, 안전사고 등 위험 요소가 존재하지 않도록 구조, 구동 및 안전에 대한 사항을 해당 전문가의 검사를 필한 후 설계·제작함

2) 시설물 운영 및 사후관리에 관한 사항

- 기존 시설물 설치·해체 등으로 발생하는 폐기물은 사업자가 정당한 절차에 의거하여 반출하고 청소를 완료하여야 함

- 「놀이시설 안내서」를 작성하여 안정적인 작동과 효율적인 관리·운영을 하고 긴급사항 발생 시 응급조치가 가능하도록 함

- 하자보수 이행 계획수립 및 제출

- 하자담보기간 내에 보수비용은 설치 업체가 부담함

- 놀이시설물(관련시설 모두 포함)의 하자담보 책임 기간은 2년으로 함

* 법적 근거: 「건설산업기본법 시행령」 별표4 (조경공사 중 조경시설물 설치공사)

-  하자담보책임 기간 이후에는 시설물 수리 등에 적극 협조해야 함.

-  인수인계: 시공사는 준공 검사 완료 후 14일 이내(또는 유지보수관리주체와 합의한 날)에 목적물 일체를 유지보수관리주체에 인수인계하여야 한다.

-  인수인계 대상: 본 공사로 조성된 계남공원 내 시설물 일체, 공사 관련 준공도서(설계도면, 시방서, 사진첩 등), 유지관리보수 매뉴얼 및 자재 목록.

3) 기타사항

- 사업자는 계약에 따라 신의 성실의 원칙에 입각하여 놀이시설품을 설계 명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받았을 때는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함

- 설계도서 및 과업 지시서에 명기되지 않은 것일지라도 당연히 시공해야 할 사항이나 관계 법령에 규정된 사항 등은 발주기관의 요구에 따라 사업자의 부담으로 시공하여야 함

- 제작과정 중 발생한 주요 부적합 사항에 대하여는 사전에 발주기관 승인을 받은 후 수정 조치하여야 하며, 수정 사항 발생 시 발주기관의 요구에 따라 사업자의 부담으로 시공하여야 함

- 시설물에 필요한 모든 자료는 계약업체에서 준비하고 시설물은 수리, 보수, 청소 등이 용이하도록 제작함

- 모든 시설의 자료 확보 및 제안내용 등이 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련 분쟁 발생 시 사업자가 책임짐

- 공사설계서에는 발주 기간 및 설계자의 설계 의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성

- 시공의 범위와 구분, 사용 재료의 규격 품질, 색상, 질감 등과 내용을 충분히 파악되도록 작성

- 디자인 및 설계계획서에는 전문용어를 사용하되, 쉽고 정확하고 간단명료하게 작성하여야 함

- 관련 법규에 규정한 내용에 대한 충족 여부를 명확하게 제시

- 해당 과업은 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」의 안전 및 보건 확보 의무사항에 따라 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음과 같이 조치사항을 이행하여야 한다

	≪ 계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항(법 제4조, 제9조)≫
① 재해예방에 필요한 인력･예산･점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행 ② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행 ③ 중앙행정기관･지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항 이행 ④ 안전･보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

<참고법령>

1) 「어린이놀이시설 안전관리법」, 「품질경영 및 공산품안전관리법」, 「환경보건법」, 「실내공기질 관리법」

2) 「건축법시행령」 및 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」, 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」, 「환경보건법」

2. 환경, 놀이터 안전 교육

구분	내용
개요	1) 환경 및 놀이터안전 교육 ① 일정 : 2026. 7. 1. ~ 10. 31. ② 회기당 시간 : 1회기 당 약 40분, 1회 교육 시 2회기 교육 진행 요청 ③ 대상 : 만 7세 ~ 만 12세 아동 (초등학생) ④ 인원 : 총 200명 이상 (1회기당 20명 이상, 20회기 (1회기 40분*2회*10학급 이상 ) ⑤ 장소 : 놀이공간 설치 구역 주변 초등학교 교실 ⑥ 주제 : 놀이터 안전 교육 및 환경 관련 교육 (자원 순환, 환경 보호, 미래의 환경, 폐자원 활용 등) ⑦ 예산 : 60,000,000원 내 ⑧ 회기당 예산 : 1회기당 3,000,000원 내 ※ 단, 프로그램 계획 및 기획 내용에 따라 회기당 예산을 하향 조정하고 참여 인원을 확대하여 운영할 수 있음. ⑨ 요청사항 : 주제 및 대상에 맞는 활동 및 교육 기획, 대상자 참여 독려방안 모색 포함 요청

3. 환경 캠페인

구분	내용
개요	1) 환경 캠페인 ① 일정 : 2026. 7. 1. ~ 11. 30. ② 대상 : 만 7세 ~ 만 12세 아동 (초등학생) , 지역주민 ③ 규모 : 캠페인 참여 및 배포 2,000명 이상 ④ 장소 : 놀이공간 설치 구역 주변 초등학교 및 기관 ⑤ 주제 : 환경과 관련된 캠페인 진행 (체험형 캠페인 및 굿즈 및 팜플렛 제작 및 배포) ⑥ 예산 : 20,000,000원 내 ⑦ 과업 : 1인당 캠페인 참여 굿즈 및 팜플렛 제작 단가 10,000원 폐자원 활용한 캠페인 굿즈 및 팜플렛 제작 (수량: 2,000개 )

4. 완공식 및 당일 캠페인

구분	내용
개요	1) 완공식 ① 일정 : 2026. 11. (공사 준공 후 진행) ② 장소 : 경기도 부천시 원미구 중동 1030-2 (계남공원) (송내대로 262) ③ 참석자 : 신용카드사회공헌재단, 초록우산, 지자체 혹은 학교 관계자, 아동 등 (참석 인원 50명 이내 ) ④ 완공식 : 완공 놀이터 대상 완공식 기획 및 진행, 공간에 대한 라운딩 및 퍼포먼스 2개 이상 기획 필요하며, 참석자 대상 환경 관련 굿즈 (50개 이상)제작 및 배포 등 기획, 전체 행사를 위한 물품 디자인 기획 등 필요 (ex. 행사 계획안, 리워드 디자인 드래프트) ⑤ 예산 : 5,000,000원 내 2) 당일 캠페인 ① 일정 : 2026. 11. (공사 완공식과 함께 진행) ② 장소 : 경기도 부천시 원미구 중동 1030-2 (계남공원) (송내대로 262) ③ 참석자 : 지역주민 및 아동 약 100명 ④ 요청사항 : 놀이공간 내 캠페인 부스 설치 및 당일 지역주민을 대상으로 한 캠페인 필수 진행 요청 (직접 설치 필요_완공식 당일 진행 / 캠페인 2~3가지 종류 이상 구성, 행사사진 촬영 요청) ⑤ 예산 : 5,000,000원 내

5. 사업보고 및 결과보고

1) 사전 보고 : 사업계획서 작성(자유 양식, KPI 성과도출 필수 포함 ex. 프로그램 총 수혜인원, 캠페인 및 교육 만족도, 지역사회 기여효과 등)

2) 진행 보고 : 월/중간보고/최종 결과 보고 (한글 양식, 30장 이내, KPI현황 포함)

3) 사전-사후 비교 : KPI측정 및 사전-사후 놀이터 이용 대상자 및 지역주민 대상 만족도 설문조사 필수 진행

Ⅲ		제안요청 내용

1. 제안서 내용과 순서

가. 제안사업의 과업 범위 전체를 포괄하는 제안내용으로 양식에 구애 없이 기술함. 단, 아래 내용을 반드시 포함해야 함. (제안서 구성 순서 무관)

구분	내용
Ⅰ. 업체소개	1. 일반현황 및 주요 연혁 [별지2 서식] 2. 강점 및 주요 성과 작성 (각 3개 이내로 작성) 3. 사업 실적 [별지3 서식] * 최근 3년이내( 2023. 5. ~ 입찰공고일 기준 종료건)으로 유사실적(실외놀이터 조성 공사) 단일건 기준 1억원 실적 4. 사업수행 조직도 [별지4 서식] 5. 참여인력 현황 [별지5 서식] * 기술 인력 보유-투입 현황 별도 표기할 것
Ⅱ. 제안내용	제안사업 배경 제안사업 방향성 제안사업 목적 * 놀이터 디자인이 아닌 순수 제안 개요만 작성
	4. 제안서 4-1. 업사이클링 놀이공간 구축 및 관리 - 디자인 및 설계안 * 디자인 스토리텔링(환경 관련) 필수, 공카드 활용 업사이클 요소 반영 필수 - 입면도, 평면도 - 놀이시설 및 기타 시설물 설치안 - 제안 사업의 특장점 및 차별점 - 유사과업 포트폴리오 * 해당 시 4-2. 환경, 놀이터 안전 교육 - 놀이터 안전 및 환경교육 컨텐츠 기획안 - 교육 운영안 * 교육운영 일정, 운영인력, 대상자 참여 독려 방안 등 4-3 캠페인 - 아동(초등학교)을 대상으로 한 캠페인 기획 및 운영계획 - 완공식 당일 지역주민을 대상으로 한 캠페인 기획 및 운영계획 - 환경과 관련된 굿즈 및 팜플렛 제작 시안 (폐플라스틱 및 자원순환 관련) - 굿즈 구성안 및 시안 (2,000명 이상 규모) 4-4. 완공식 및 당일 캠페인 행사 - 완공식 컨셉안 및 행사 계획 - 행사 참석자 대상 리워드 - 행사 필요물품 디자인 등 5. 추진 일정(안) 제시 6. 하자보수 및 유지보수 방안 제안 7. 업무보고 및 산출물 관리 방안 * 월별 진행 현황 보고서 작성 필수
Ⅲ. 기타	1. 효과/효율적 프로젝트 추진을 위한 별도 제안사항 2. [Ⅱ.제안내용] 내 포함하지 못한 사항

Ⅳ		사업 수행 지침

1. 일반지침

가. 본 제안요청서에 규정되지 않은 사항은 관계 법령 및 지침 등에 의하고 관계 법령 및 지침 등에도 규정되지 않은 사항은 상호 협의 처리하되, 상호 이견이 있는 경우 재단의 결정에 따라야 한다.

나. 과업 수행자는 계약체결 후 10일 이내에 과업에 착수하여야 하며 착수 전에 착수계, 과업 수행계획서 등 과업 수행에 필요한 제반 서류를 제출하여야 한다.

다. 과업 수행자는 과업 지시서와 제안서에 명기된 절차에 따라 사업을 수행해야 하며, 본 제안요청서와 관련하여 문구, 용어의 해석 및 과업의 범위 등에 대하여 재단과 과업 수행자 간에 이견이 있을 때는 재단의 해석 및 지시에 따라야 한다.

라. 과업 수행자는 본 과업을 수행하기 불가능하다고 인정되거나 재단의 지시에 불응하여 과업이 진행될 시 또는 기타 계약조건을 위배한 때에는 계약 내용의 전부 또는 일부를 해지할 수 있으며 이에 따라 불이익을 끼쳤을 경우 과업 수행자는 이에 대하여 손해를 배상하여야 한다.

마. 과업 수행 중 방침 변경‧천재지변‧추가 과업과 과업 내용의 현저한 증가 등의 경우에는 용역 기간을 변경할 수 있다.

바. 본 과업 및 제안요청서에 명시되지 않은 사항은 상호 협의하여 결정하도록 한다.

사. 과업의 전문적 수행을 위해 일부 과업(교육, 캠페인, 행사)의 하도급 업체 활용을 허용한다. 단 전체 사업금액의 50%를 초과하여 하도급을 줄수 없으며, 제안서 제출 시 하도급 업체 전문성(실적 등)과 투입인력, 참여업체를 반드시 명기해야 한다. 과업 수행에 대한 최종적인 법적, 행정적 책임은 계약을 체결한 주관사업 과업 수행자에게 있다.

2. 조직 및 인력 투입 관리

가.  참여인력의 경우, 입찰공고일 기준으로 그 이전에 고용되어 현재 재직 중인 자만 인정하며, 계약 완료일까지 재직하여야 한다.

나. 제안서에 제시한 투입 인력이 과업에 투입되지 않을 경우 계약을 해지하며, 투입인력 변경이 있을 경우 발주처에 즉시 보고 후 승인받아야 한다.

다. 제안사는 당해 용역을 수행하기 위한 조직체계 및 운영방안 기술지원체계 등 제시해야 한다.

3. 승인 및 보고 절차

가. 용역의 착수 보고, 중간 보고, 최종 보고 및 의견수렴 등 전반적인 진행은 용역수행자가 주관하되, 과업 수행에 따른 일정 및 방법 등에 대하여 발주부서와 사전협의를 하여야 한다.

나. 과업 수행기간 동안 과업 추진 방향과 내용점검을 위해 정기적으로 회의를 개최함을 원칙으로 하며, 필요에 의해 수시회의를 가질 수 있다.

다. 과업에 대해 구두 보고 또는 제출을 통해 단계별로 승인을 받고, 개선 및 보완 요청 사항은 신속히 수정하여 재단의 승인을 받아야 한다.

4. 보안사항

가. 과업 수행자는 과업 수행에 따른 개인정보, 자료 등이 타 용도로 사용되거나 외부로 유출되지 않도록 보안대책을 마련해야 한다.

나. 사업 수행과정에서 취득, 작성하는 정보 등에 대하여는 무단으로 유출 및 제 3자에게 누설하지 않도록 보안대책 수립 후 발주처의 승인을 얻어야 한다.

다. 재단의 사전 승인 없이 관련 자료가 외부로 유출되지 않도록 보안을 유지하여야 하며, 고의 또는 과실로 재단에 손해를 입힌 경우 과업 수행자는 이에 대하여 손해를 배상하여야 한다.

라. 과업 수행자는 발주처의 정보보안 정책 및 규정을 준수하고, 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보를 유출 또는 누설하여서는 안 되며, 위반 시 민·형사상의 모든 책임을 진다.

마. 과업 수행자는 본 과업을 수행함에 있어 사전에 반드시 대상자에게 초상권 및 개인정보보호에 대해 안내해야 하며, “개인정보수집 및 이용동의서”를 받아야 한다. 과업 수행자는 개인의 초상권이 침해되거나 개인정보가 유출되지 않도록 개인정보보호에 특별히 유의하여 문제가 발생하지 않도록 하여야 하며, 불이행으로 인해 발생하는 문제에 대해서는 전적으로 민.형사상의 모든 법적 책임을 져야 한다.

5. 소유권 및 지식재산권 귀속 등

가. 용역수행 결과 생산된 이미지, 사진 자료 등 모든 성과품은 재단에 귀속되며, 이에 대한 사항을 계약에 포함하여 진행한다.

나. 과업 수행자는 사업자는 계약을 수행하는데 제3자의 지식재산권, 산업재산권, 저작권, 특허권 또는 재산 및 기타 모든 피해가 발생 되지 않도록 유의하여야 하며, 해당 사항 위반으로 사업 기간 또는 사업 종료 이후라도 문제가 발생 되는 경우 모든 책임을 지며, 발주처를 상대로 손해배상청구 소송이 제기될 때는 피해자 측에 합의 배상하여야 한다.

6. 이견조정

가. 본 제안요청서 및 계약사항에 관하여 이견이 발생하였을 경우 또는 계약 상정하지 아니한 사항에 대하여는 발주처와 사업자의 협의로 결정한다.

나. 계약서 등에 명시되지 않은 사항일지라도 본 사업 진행상 불가피하거나 마땅히 시행하여야 할 경미한 사항에 대하여는 계약에 포함된 것으로 본다.

Ⅴ		제안 안내 사항

1. 입찰 참가 자격

가. 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 의한 경쟁입찰 참가 자격을 갖추고, 제안서 접수 마감일까지 조달청 나라장터(G2B)에 입찰 참가 자격 조경식재·시설물공사업(업종코드:4993) 또는 건축공사업(업종코드:0002) 등록을 마친 업체

나. 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제31조 및 같은 법 시행령 제92조 및 시행규칙 제76조의 규정에 의거 부정당 업자로 입찰 참가 자격 제한 중이지 아니한 업체

다. 하도급 및 공동수급 불가. (단, 환경교육, 캠페인, 완공식등 행사 영역은 파트너사를 통해 진행 가능)

2. 입찰 참가 등록 및 제안서 제출

가. 제출서류: 입찰공고문에 의함

나. 제출기한: 입찰공고문에 의함

다. 제안내용 문의

○ 초록우산어린이재단 운영지원실 입찰 담당

(02-398-0155 / shj408@chorogusan.or.kr)

○ 초록우산어린이재단 사회공헌협력본부 과업 담당

(02-799-0477 / sean@chorogusan.or.kr)

Ⅵ		제안서 작성 요령

1. 제안서 작성 및 제출

가. 제출부수: 제안서 3부, 동 내용이 수록된 USB 1개 별도 제출

나. 분    량: 양면 인쇄, 50장(100페이지)이내로 작성(표지 포함)

다. 규    격: A4(210 x 297mm). 파일은 PDF 또는 PPT 파일로 제출

* 제안서 발표자료는 별도 제출하지 않으며 제출된 파일로 발표 진행하므로 참고하여 제안서 작성

* 제안서 PPT 작성 유의사항: 영상 및 특수글꼴 사용하는 경우 파일에 심어서 제출

2. 제안서의 효력

가. 제안서에 제시된 내용과 발주기관 요구에 따라 수정, 보완, 변경된 제안 내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 같은 효력을 가진다. 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서를 우선으로 한다.

나. 발주기관은 필요시 제안사에 대하여 추가 제안 또는 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 같은 효력을 가진다.

다. 재단과 과업 수행자 간에 본 제안요청서의 해석이 다를 경우는 재단의 해석에 따른다.

라. 제안서에 기재된 사업자의 기술 및 경력 사항 등 중요한 내용이 허위로 밝혀졌을 때 재단은 계약 파기, 손해배상청구 등 필요한 조치를 할 수 있다.

마. 본 제안과 관련되어 제출한 자료 일체는 반환하지 않으며 본 제안에 따른 모든 비용은 제안 업체가 부담한다.

3. 제안서 작성 유의 사항

가. 제시된 제안서 목차 및 세부 작성 지침을 준용하여 제안서를 작성하여야 한다.

나. 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 장별로 번호를 부여하여야 한다.

다. 제안서는 국문 작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 제공하여야 한다.

라. 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.

마. 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 한다. 예를 들어, 사용 가능하다, 할 수 있다, 고려하고 있다 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 한다.

바. 제안서 내에 개인정보의 고유식별정보* 등 누출금지 대상 정보는 포함하면 안 된다.

* 고유식별정보 : 주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허번호 등

사. 계약 후에도 제안서 내용을 허위 작성한 사실이 발견되거나 제안내용을 제대로 이행하지 못할 때 계약을 해지할 수 있으며, 아울러 과업 수행자는 모든 손해배상책임을 져야 한다.

아. 제안서의 내용과 순서, 항목은 반드시 아래 제시한 표에 따라야 하며 각 항목 외에 추가적인 항목을 삽입할 수 있으나 필수항목은 삭제할 수 없다.

Ⅶ		제안서 평가 및 선정

선정방법

가. 입찰종류: 일반경쟁(총액)

나. 낙찰자 결정방법: 협상에 의한 계약

다. 제안서 심사: 제안서평가위원회 구성하여 평가

※ 제안서 심사위원평가 점수 및 평가내용은 공개하지 않음.

2. 제안서 평가

부문		평가항목	평 가 요 소	배점	비고
기술 능력 평가 (90점)	정성적 평가 분야 (65점)	사업의 이해 (10점)	◦프로젝트의 사회적·환경적 가치 이해 - 본 사업의 핵심 취지인 '업사이클링(친환경)'과 '사회공헌' 목적을 명확히 인식하고 있는가? ◦제안요청서와 방향성 일치 - 해당 사업이 추구하는 가치(아동의 놀권리와 환경보호, 자원순환 등)와 제안서의 방향성이 일치하는가	5	평가 위원 평가
			◦제안요청서와의 부합성 - 제안요청서에서 명시한 필수조건 및 예산범위, 제약사항을 누락없이 제안에 녹여냈는가? - 목표달성을 위한 전략과 계획이 현실적이고 구체적인가? ◦복합 과업 간의 유기적인 연계 - 공사, 캠페인, 교육 이라는 3가지 과업하나의 테마로 유기적으로 연결되어 시너지를 낼 수 있는가?	5
		공사 설계, 디자인 구성 및 수행 능력 (20점)	◦ 아동 친화적 설계 - 아동의 신체적 발달단계와 행동 특성을 고려한 동선 및 놀이요소가 배치되었는가?	5
			◦ 업사이클 실외 놀이터 구성 및 활용 창의성 - 기존 놀이터에서 보기 힘든 참신하고 획기적인 업사이클링 아이디어가 적용되었는가? - 단순 재활용을 넘어, 주변 경관과 어우러지며 예술적·시각적 완성도가 높은 디자인인가?	5
			◦ 안전성 및 실현 가능성 - 관련 법규 및 어린이 놀이시설 안전기준을 완벽히 충족하는 설계인가? - 제안된 예산과 기간 내에 실제 시공 및 구현이 가능한 현실적인 계획인가? - 사용되는 업사이클링 소재 및 마감재가 아동의 피부 접촉이나 호흡기에 무해한가?	5
			◦ 지역사회 및 캠페인과의 연계성 - 놀이터의 스토리가 지역사회의 특성이나 행사 당일 진행될 캠페인 주제와 자연스럽게 이어지는가? - 놀이 과정에서 자연스럽게 환경 보호의 가치를 체득할 수 있도록 스토리가 짜여 있는가?	5
		공사 지원 기술· 사후관리 (10점)	◦관리의 편리성 및 운영 지원계획 - 완공 후 발생할 수 있는 파손, 노후화에 대한 구체적인 하자보수 보증 기간과 대응 매뉴얼이 있는가? - 야외 환경(비, 바람, 자외선 등)에 견딜 수 있는 내구성을 갖춘 자재를 선정했는가?	5
			◦유지보수 계획 - 완공 후 발생할 수 있는 파손, 노후화에 대한 구체적인 하자보수 보증 기간과 대응 매뉴얼이 있는가? - 주최 측이나 시설 관리자가 쉽게 유지 관리할 수 있도록 인수인계 및 정기 점검 계획이 체계적인가?	5
		교육 및 캠페인 (25점)	◦캠페인 메시지 독창성 - '업사이클링'과 '환경보호'라는 핵심 메시지가 직관적이고 효과적으로 전달되는가? - 타 행사와 차별화되는 새롭고 독창적인 캠페인 컨셉인가?	5
			◦굿즈/ 리플렛 친환경성 및 완성도 - 제공되는 기념품과 홍보물이 실제 친환경 소재로 제작되며, 디자인적 완성도가 높은가?	5
			◦교육 참여자의 흥미 유발 및 대상자 맞춤형 교보재 사용 - 일방적인 정보 전달이 아닌, 참여자가 즐겁게 직접 체험하고 경험할 수 있도록 유도하는가? - 아동 등 대상자의 집중력을 유지할 수 있는 흥미로운 교보재(키트 등)를 활용하는가?	5
			◦교육 적절성 및 전문도 - 교육 내용이 환경 및 업사이클링에 대한 올바른 지식을 전달하며, 전문성이 확보되었는가? - 교육 내용이 목적과 대상을 고려하여 제작되었는가?	5
			◦행사 및 교육 운영 환경 - 쾌적한 행사/교육 환경을 조성하며, 종료 후 만족도 조사 등 효과성 측정 방안이 있는가? 검증된 강사진 및 운영 인력이 투입되며, 다수 인원 밀집에 대비한 현장 안전 매뉴얼이 철저한가? 준비부터 결과 보고까지 타임라인이 명확하며, 주최 측의 실무 관리 부담을 최소화하는가?	5
	정량적 평가 분야 (25점)	기술능력 (10점)	◦공사 관련 기술 인력 확보 및 경력	5	사업 담당자 평가 *하기평가기준 참조
			◦행사 및 교육 운영 인력의 전문성	5
		사업수행 경험 (5점)	◦최근 3년 내(2023. 5. ~ 입찰공고일기준 종료 건) ]유사과업(실외 놀이터 공사)건 수	5
		경영상태 (10점)	◦ 경영상태 기업신용평가 등급 확인서 제출	10
가격평가 (10점)		입찰가격	ㅇ 제안 가격 평가 행정안전부 [지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준] 협상에 의한 계약산식	10	평점 산식

가. 평가기준 및 배점

* 기술능력 점검 및 수행경험을 반영하기 위한 배점표 수정

나. 정량적 평가 분야 배점 기준

1) 기술능력(10점)

(1) 공사관련 기술 인력 확보 및 경력(5점)

- 평가 자료: 기술 인력 보유 현황 및 투입계획서

- 대상 분야: 사업 관련 분야

- 각 기술 인력 등급별 인원수와 그 등급에 배정된 점수를 곱한 값을 단순 합산하여 산출함(최고점수는 배점 5점을 초과할 수 없음)

- 공고일 기준 이전 3개월 이상 해당 업체에 근무하고 있는 기술자에 한하며 기술인력 등급 확인을 위한 증빙서류(재직증명서, 공인기관 인증 자격증, 학위증명서사본, 국민연금관리공단 확인서 등)에 하여 확인된 기술자에 대하여만 인정 평가함

- 등급기준 : [참고 1] 기술인력 등급 구분기준 참조

구 분	특급인력	고급인력	중급인력	초급인력
점 수	각 1점	각 0.9점	각 0.8점	각 0.7점

(2) 환경교육 운영 인력의 전문성 (5점)

- 평가 자료: 참여 인력 현황 및 증빙서류

- 대상 분야: 교육 운영 투입 인력

강사진 구성 및 교육기획, 운영인력 구성, 경력

* 환경교육 전공관련 학위증명서 또는 자격증 제출, 경력산정관련 참여인력현황 [1-2참여인력 개인별 이력사항] 사업명, 참여기간 구체적으로 작성

평가항목	기준	평점
환경교육 전문성	자원순환, 환경교육 관련 경력 5년이상 혹은 관련 전공 보유 강사 8명이상을 보유	5
	자원순환, 환경교육 관련 경력 5년이상 혹은 관련 전공 보유 강사 5명이상을 보유	3
	자원순환, 환경교육 관련 경력 5년이상 혹은 관련 전공 보유 강사 3명이상을 보유	1

- 등급기준

2) 수행 경험(5점)

- 최근 3년 내 (2023. 5. ~입찰공고일 기준 과업종료) 본 과업과 유사한 과업(실외놀이터 조성공사) 중 단일 계약건 1억 원 이상의 실적

* 반드시 발주처의 확인을 받은 실적증명서를 기준으로 작성하며 실적증명서 미제출 시 사업 실적으로 인정하지 않음

* 실적증명서 발급이 어려운 경우(발주처 폐업 등) 해당 계약서사본과 세금계산서의 제출

건도 인정하며, 편의에 의한 계약서 사본 제출 건은 인정하지 않음

평가항목	구분	점수
유사 사업 수행실적 (최근 3년간)	10건 이상	5
	7~9건	4
	3~6건	3
	1~2건	2

3) 경영상태 평가(10점)

회사채	기업어음	기업신용평가	평점
AAA, AA+, AA0, AA A+, A0, A-, BBB+, BBB°,BBB-	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A3°,A3-	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB°,BBB-	10
BB+, BB°	B+	BB+, BB°	9.9
BB-	B°	BB-	9.7
B+, B°, B-	B-	B+, B°, B-	9.5
CCC+ 이하	C 이하	CCC+	7.5
없음	없음	없음	5

① 신용평가등급은 신용정보의이용및보호에관한법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 동 세부기준 제5조의 적용기준일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간 내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가 등급(위의 신용정보 업자가 신용평가등급, 등급 평가일 및 등급 유효기간 등을 명시하여 작성한 “신용평가등급 확인서”(이하 “등급확인서”라 한다.)을 기준으로 평가한다.

② 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급은 입찰공고일 전일 이전에 평가한 것으로서 유효기간 내에 있는 것이어야 한다. (유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우도 인정)

③ 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가 등급 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, “등급확인서”를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가한다.

3. 평가 및 선정방법

가. 제안서 및 설명(프리젠테이션)을 통하여 평가 실시

1) Ⅶ 제안서평가 ‘2-가. 평가기준 및 배점‘ 중 ’기술능력평가‘기준에 따라 사업담당부서 내부심사위원구성 후 서면심사(입찰가격 평가제외), 이를 통해 상위 4순위까지 선정하여 PT 심사 진행

* 제안서 제출 업체가 2개일 경우 서류심사는 생략하고 모두 프리젠테이션 평가 참여자격 부여

3) 제안서 설명(PT) 방법

제안서 설명 시간은 30분 내외(제안설명발표 20분, 질의응답 10분)

4) 제안서 설명 발표순서

입찰 마감일 제안서 등록 제출 역순으로 자동 순서 배정

5) 유의사항

① 제안발표회는 제안사의 발표자를 포함하여 3인 이내로 제한하며, 제안설명은 제안사의 사업총괄 책임자(PM)가 직접 발표해야 한다.

② 발표내용이 제안서와 상이한 사항이 있는 경우 이를 별도로 명기하여야 한다.

③ 제안서 평가는 재단의 평가 기준에 의하여 평가하며, 제안사는 제안서 평가

결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없다.

④ 제안발표회에 참가하지 않은 업체는 협상적격자 대상에서 제외한다.

나. 우선협상 대상자 선정

1) 제안서 평가 결과, 입찰가격이 해당 사업예산 이하인 자로서, 제안서 2차 평가

(기술능력평가+가격평가) 점수가 70점 이상이면 협상적격자로 선정한다.

2) 협상순서는 기술 능력 평가점수의 고득점순에 따라 협상 순위를 결정한다.

3) 다만, 합산 점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 정성적 평가 분야

항목의 세부 평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선순위로 한다.

다. 협상 절차

1) 협상은 당사가 정하는 절차와 일정에 따라 진행하며, 기술조건 합의 및 당사가 요구하는 사항에 근거하여 진행한다.

2) 결정된 협상 순위에 따라 협상대상자와 협상을 실시하며, 협상이 성립된 경우 최종낙찰자로 선정하고 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니한다.

3) 협상대상자와 협상이 성립되지 않으면 같은 기준과 절차에 따라 순차적으로 차 순위 협상자와 협상을 시행하며, 모든 협상자와 협상이 결렬되면 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

4) 협상기간은 협상대상자 통보일로부터 15일 이내로 하고, 상호협의 하에 협상기간을 조정할 수 있다. 정한 기한 내에 협상이 이루어지지 않을 경우에는 10일의 범위내에서 연장할 수 있다. 그러나 협상대상자가 협상에 불성실하게 임하거나, 협상을 지연시키는 경우 당사는 협상이 결렬된 것으로 간주한다.

[별지1 서식]

용역사업 제안서
사업명
용역 업체	업체명
	주 소
총괄 책임자	성 명			직위/전공
	주 소			전화
	소 속		e-mail
사업 기간					참여 인력	명
「2026년 업사이클링 활용 실외놀이터 설계 및 시공 & 환경교육∙캠페인 용역」에 대한 제안서를 제출합니다. 상기 사업과제가 귀 재단의 용역사업비에 의하여 수행될 경우 이에 따른 모든 편의를 제공할 것이며 소정의 기관책무를 이행하겠습니다. 2026년 월 일 용역사업 기관 대표 : (직인)
어린이재단 사회공헌협력본부 귀중
구비서류 : 증빙자료

[별지2 서식]

일반현황 및 주요 연혁

1. 기본사항

회사명		대표자명
주소		회사설립년월	년 월
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가 등록증보유현황	* 보유 사항이 있는 경우 작성
종업원수		자본금 (단위:천원)
매출액 (단위: 천원)	2023년	2024년	2025년

2. 주요 연혁

일자	내용	비고

* 제안서 내에 해당 내용을 포함할 경우 별도제출 불필요

[별지3 서식]

최근 3년간 용역실적

(단위 : 백만원, 부가가치세 포함)

사업명	사업기간1)	계약 금액2)	발주처3)	용역수행 범위4)	비고5)

주 1)  입찰공고일 기준 최근 3년간 수행한 프로젝트를 연도순으로 기재

2)  하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 (  )내에 원도급회사를 기재

3) 본 용역사업의 사업 총괄책임자(예정)의 참여 여부 및 용역 우수사례(3건)

해당 여부를 별도 표시

<작성 시 참고사항>

※ 공고일 전 최근 3년간 실적은 1억원 이상만(과업종료 분에 한함)을 대상으로 건별로 모두 작성

※ 용역이행실적은 입찰 공고 시 제시한 용역 범위에 부합되는 조건에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 이행실적의 비율과 실적(금액)을 기재하여야 하며, 실적(금액) 1억원 이상만 작성

※ 1개 기관에 2건 이상의 실적이 있을 때에는 각각 실적증명원을 발급 첨부하여야 함

※ 반드시 발주처의 확인을 받은 실적증명서를 기준으로 작성하며 실적증명서

미제출 시 사업실적으로 인정하지 않음 * 단 실적증명서 발급이 어려운 경우 해당 용역 계약서 사본과 세금계산서 제출로 대체함.  ( ex 발주처 사업폐업 등으로 발급이 어려운 경우)

[별지4 서식]

사업수행 조직도

총괄책임자

담당자 :

분야별책임자		분야별책임자		분야별책임자		․․․․․․․
팀장 : 담당분야 : 역 할 : 팀 원 : (자체투입인력) (협력업체인력)		팀장 : 담당분야 : 역 할 : 팀 원 : (자체투입인력) (협력업체인력)		팀장 : 담당분야 : 역 할 : 팀 원 : (자체투입인력) (협력업체인력)

※ 지원조직이 있을 경우에는 추가하여 작성

※ 분야별 책임자는 분야별 팀장을 말함

※ 제안사 자체양식 제출 가능

[별지5 서식]

참여 인력 현황

1) 참여인력 명단

분야 ¹⁾	성명	연령	근무경력 ²⁾	직위	주요담당업무	보유기술 (자격증)

주 1) 업무구분

2) 해당 분야 경력기간만 기재

<작성 시 참고사항>

• 투입 인력은 반드시 본 사업에 투입 가능한 인력으로 구성하여야 함. (협력 업체 인력 제외)

• 개인별 보유 자격 및 경력 사항의 허위 작성이 판명되면 계약업체 선정을 무효화 함.

1-1) 참여인력 개인별 이력사항

성 명			소 속			직 책			연 령	세
학 력	대학교 전공					해당분야근무경력
	대학원 전공					자 격 증
본사업참여임무					사업참여기간				참여율	%

주 요 경 력
사 업 명	참 여 기 간 (년.월 ～ 년.월)	담당업무	발주처	비 고

주 1) 사업 참여자 명단에 기재된 참여자에 대해 한 명씩 작성

2) 해당 분야 경력기간 기재

3) 본 제안업체 재직기간 중 경력사항이 아닐 경우, 전 소속업체의 재직증명서 첨부

4) 발주기관 사업담당자 및 전화번호 표기

<작성 시 참고사항>

• 투입인력은 반드시 본 사업에 투입가능한 인력으로 구성하여야 함.(협력 업체 인력 제외)

• 개인별 보유 자격 및 경력 사항의 허위 작성이 판명되면 계약업체 선정을 무효화 함.

• 투입 인력 경력확인을 위해 4대 사회보험가입자 명부를 제출하며 명부에서 확인이 어려울 경우 개인별 건강보험 자격득실 확인서 및 경력증명서 제출

(투입 인력 경력이 4대 사회보험가입자 명부로 확인이 어려울 경우, 개인별 견강보험 자격 득실 확인서 및 경력증명서 제출)

•  공사관련 기술 인력 확보 및 경력 평가 조건

공고일 기준 이전 3개월 이상 해당 업체에 근무하고 있는 기술자에 한하며 기술인력 등급 확인을 위한 증빙서류제출 (재직증명서, 공인기관 인증 자격증, 학위증명서사본, 국민연금관리공단 확인서 등)에 한하여 확인된 기술자에 대하여만 인정 평가함 (공사 참여 인력)

•  환경교육 운영인력 평가 조건

전문성 관련 학위증명서 또는 자격증 제출, 경력산정이 가능한 이력사항 제출

[참고-1]

기술인력 등급 구분기준

구 분	국가기술자격자	학력자
특 급 기술자	1) 해당 전문분야와 관련된 기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 10년 이상 수행한 사람 2) 해당 전문분야와 관련된 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 13년 이상 수행한 사람	1) 해당 전문분야와 관련된 박사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 4년 이상 수행한 사람 2) 해당 전문분야와 관련된 석사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 9년 이상 수행한 사람 3) 해당 전문분야와 관련된 학사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 12년 이상 수행한 사람 4) 해당 전문분야와 관련된 전문대학을 졸업한 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 15년 이상 수행한 사람
고 급 기술자	1) 해당 전문분야와 관련된 기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 7년 이상 수행한 사람 2) 해당 전문분야와 관련된 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 10년 이상 수행한 사람	1) 해당 전문분야와 관련된 박사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 1년 이상 수행한 사람 2) 해당 전문분야와 관련된 석사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 6년 이상 수행한 사람 3) 해당 전문분야와 관련된 학사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 9년 이상 수행한 사람 4) 해당 전문분야와 관련된 전문대학을 졸업한 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 12년 이상 수행한 사람
중 급 기술자	1) 해당 전문분야와 관련된 기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 4년 이상 수행한 사람 2) 해당 전문분야와 관련된 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 7년 이상 수행한 사람	1) 해당 전문분야와 관련된 박사학위를 가진 사람 2) 해당 전문분야와 관련된 석사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 3년 이상 수행한 사람 3) 해당 전문분야와 관련된 학사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 6년 이상 수행한 사람 4) 해당 전문분야와 관련된 전문대학을 졸업한 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 9년 이상 수행한 사람
초 급 기술자	1) 해당 전문분야와 관련된 기사자격을 가진 사람 2) 해당 전문분야와 관련된 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 2년 이상 수행한 사람	1) 해당 전문분야와 관련된 석사학위를 가진 사람 2) 해당 전문분야와 관련된 학사학위를 가진 사람 3) 해당 전문분야와 관련된 전문대학을 졸업한 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 3년 이상 수행한 사람

* 엔지니어링산업 진흥법 시행령 제4조 관련 [별표 2]에 따름