2026 서울 세계보치아선수권대회
행사 운영 용역 과업지시서

2026. 6. 30.

담당	부 서	직 급	성 명	전화번호	FAX
	2026 서울 세계보치아 선수권대회 조직위원회	사무총장	임광택	070-5038-5544,5545	02-930-8280
		매니저	황성민

목    차

Ⅰ. 사업 개요	1

Ⅱ. 과업 내용	3

Ⅲ. 참가자격 및 제안서 제출	11

Ⅳ. 제안서 작성 지침	14

Ⅴ. 관련 양식	20

Ⅰ		사업 개요

◦ (사업명) 2026 서울 세계보치아선수권대회 행사 운영 용역

◦ (대상) 40개국 선수, 지도자, 심판, 경기운영 등 550여명

◦ (일시/장소) ’26. 8. 24.(월) ~ 9. 4.(금), 12일간 / 올림픽공원 체조 경기장

◦ (방법/유형) 집합대회(11박12일, 합숙형) / 세계선수권대회(레벨 1)

◦ (주최/주관) 세계보치아연맹 / 대한장애인보치아연맹

◦ (과업 내용)

구분	내 용
개회식	◦ 보치아 종목 특성 반영 기획 및 전문 사회자(한국어, 영어) 섭외 ◦ 축하공연 1팀 * 개회식 전체 시간 30분 예정 ◦ 중증장애인 응대 사전 교육을 이수한 전담 도우미 및 요원 배치
시상식	◦ 개인전 8개종목 시상식 진행(8월 31일, 18시) ◦ 팀, 페어 3개종목 시상식 진행(9월 3일, 18시) ◦ 시상식 진행에 필요한 도우미 및 진행요원 운영 ◦ 시상식 진행에 필요한 물품(메달/시상대/국기 등) 및 음향(국가)지원
폐회식	◦ 올림픽 파크텔(올림피아 홀, 아리랑) 만찬장 내 폐회식 및 환송 만찬 진행 ◦ 폐회식 진행에 필요한 도우미 및 진행요원 운영 ◦ 축하공연 1팀 * 폐회식 전체 시간 30분 예정
장내 아나운서	◦ 경기 상황 실시간 안내(선수단 입장 포함) ◦ 관중과의 이벤트 진행 ◦ K-POP과 함께하는 현장 축제 분위기 조성
제작	◦ 메달(금·은·동), 트로피, 감사패 등 소요되는 제반물품 제작 ◦ 휠체어 하중을 견디는 메인 무대, 좌·우 경사로 및 콘솔 목공 마감 제작
설치	◦음향	15kw급 메인 음향 시스템 세팅(리깅 구조물)
	◦조명	메인 경기장 1,500LUX 조도 확보용 및 워밍업존 조명 세팅(리깅 구조물)
	◦전광판	대형 LED 전광판(5m×3m 이상) 2식 세팅 및 추락 방지용 안전 고정 철저
	◦ 무대와 워밍업 존 사이 분리(펜스, 가림막 등) ※배치도 ★ 참조
	◦무대 및 바닥	무대(14m×4m×0.5m 이상) 구조물 사전 안전 검토서 제출 필수, 체조경기장 바닥 훼손 보양 및 국제 규격에 부합하는 바닥 평탄화(수평)
	◦선수대기실	휠체어 진출입 단차를 완벽히 제거하고 회전 반경을 확보한 선수대기실 설치(6m×27m 이상)
	◦용기구 창고	휠체어 진출입이 가능한 국가별 용기구 창고(55동 규모)설치(3m×2m)
	◦전력	150kw 발전차 세팅 및 전력 케이블 포설 시 휠체어 방지턱(덮개) 마감 및 바닥 고정 필수
	◦방송 구역	중계 방송 전용 구역(카메라 존) 단상 및 비인가자 통제용 안전 펜스 조성(선수 시야 방해 금지)
기타 및 공통사항	◦ 행사 진행을 위한 전담 지원 인력 배치 및 상시 음향(마이크, 진행 음악 등) 지원 ◦ 대회 중 사용되는 모든 진행 음악 저작권료 전액 부담 및 영업배상책임 보험 필수 가입 ◦ 휠체어 사용자 특화 비상 대피 시나리오 수립 및 응급 후송 동선 상시 확보 ◦ 제작, 설치 등 물품 일체 소방 방염 처리 의무화 및 관련 허가 제출 ◦ 리허설 3회 이상 ◦ 8월 22일까지 모든 시설물 설치 완료 및 관련 게획서 제출

◦ (과업 기간) 계약체결일 ~ 2026. 9. 30.(화)

◦ (입찰방법) 일반경쟁, 협상에 의한 계약

◦ (입찰방식) 나라장터 전자입찰

◦ (추진 일정) 입찰공고 및 접수기간: 조달청, 대한장애인보치아연맹 입찰공고 참조

Ⅱ		과업 내용

공모개요

◦ (공모명) 2026 서울 세계보치아선수권대회 행사 운영 용역

◦ (공모방법) 나라장터 및 대한장애인보치아연맹 홈페이지 공고

◦ (공모예산) 300,000,000원

대회일정(예정)

날짜	내 용	비 고
8월 18일(화)~21일(금)	○ 설치 기간
8월 22일(토）~23일(일)	○ 시범 운영
8월 24일(월)	○ 선수단 호텔 도착/등록
8월 25일(화)	○ 공식훈련 ○ 경기용기구 검사
8월 26일(수)	○ 공식훈련 ○ 경기용기구 검사 ○ 감독자회의 ○ 개회식
8월 27일(목)	○ 개인전 경기(남/여)
8월 28일(금)	○ 개인전 경기(남/여)
8월 29일(토)	○ 개인전 경기(남/여)
8월 30일(일)	○ 개인전 경기(남/여)
8월 31일(월)	○ 개인전 경기(남/여) ○ 개회전 시상식
9월 1일(화)	○ 단체전, 2인조 경기
9월 2일(수)	○ 단체전, 2인조 경기
9월 3일(목)	○ 단체전, 2인조 경기 ○ 단체전, 2인조 경기 시상식 ○ 폐회식(환송만찬)
9월 4일(금)	○ 출국

과업 세부내용 및 특수조건

◦ 개회식

- 프로그램 기획: 중증 장애인 전문 스포츠(보치아)의 특성과 대한민국의 정체성을 표방하는 개회식 프로그램 기획 및 세부 연출 시나리오 구성

- 관람환경 및 특수효과: 중증 장애 선수의 특성상 박수 호응이 어려우므로 음향 및 시각 효과로 분위기를 대체하되, 전체 음향 데시벨(db)은 선수의 안정을 저해하지 않는 한계치를 설정하고 리허설 시 주최 측의 사전 승인을 득해야함.

- 출연진 섭외 및 통제: 전문 사회자(한국어, 영어) 및 축하공연팀(공연팀 단일 1개팀) 섭외. 전체 행사 지연을 방지하기 위해 축하공연은 5분~7분 이내 완료해야 함.

- 전담 인력 운영: 개회식 현장 안내 및 밀집도 통제를 위한 전문 도우미 및 운영 요원 배치(전원 현장 투입 전 ‘중증 장애인 응대 및 휠체어 안전 지원’ 사전 교육 필수 이수)

- 사전 리허설 3회 이상

- 개회식 사진 참조

◦ 시상식

- 운영일정: ①개인전 8개종목 시상식 운영(8월 31일, 18시 예정)
②팀, 페어 3개종목 시상식 운영(9월 3일, 18시 예정)
* 단, 세부 시간은 주최 측 일정에 따라 변동 가능

- 물품 및 무대 검수: 시상식에 필요한 물품(메달, 시상대, 국기(전광판 이용), 국가 음원 등)은 이전에 완벽히 준비하고 데이터 및 수량 오류에 대한 교차 검수를 철저히 이행해야 함.

- 무대 접근성: 시상대 제작 및 설치 시 휠체어 등판 각도 및 회전 반경을 고려하여 경사로를 필수적으로 설치하고, 선수 이동 동선 내의 모든 단차 및 장애물을 원천 배제해야 함.

- 인력 운영: 시상식 행사진행에 특화된 도우미 및 진행요원 배치하여 원활한
시상을 지원함

- 시상식 사진 참조

◦ 폐회식(환송만찬)

- 행사 운영: 호텔 내 지정된 만찬 장소(올림픽 파크텔 올림피아 홀, 2층 아리랑)에서 폐회식 및 환송 만찬을 2시간 소요 기준으로 기획 및 진행

- 안전 동선 확보: 만찬장 내부의 테이블 간격 및 주요 이동 동선은 다수의 전동 휠체어가 동시에 원활하게 교행할 수 있도록 충분한 폭을 사전에 반드시 확보하고 통제해야 함.

- 프로그램 분할: 만찬 전 (폐회 통고, 내빈소개, 축하공연 등)과 만찬 후(경품추첨, 폐회사 등)로 프로그램을 체계적으로 분할하여 행사 집중도를 유지함.

- 출연진 섭외: 전문 사회자 및 축하공연팀(장애인 공연팀 단일 1개 팀)섭외.
축하공연은 5분 ~ 7분 이내에 완료해야 함.

- 인력 운영: 폐회식 진행 및 만찬장 안전 관리를 위한 도우미 및 운영요원 배치

- 폐회식 참고 사진

◦ 제작

- 공식 시상 물품 및 기념품 제작: 대회 공식 메달(금·은·동), 트로피, 감사패 등 시상식 및 폐회식에 소요되는 제반 물품을 제작함. 대회의 상징성(로고, 엠블럼 등)을 반영한 디자인을 기획하여 제안하며, 최종 제작 전 반드시 발주처의 승인을 득해야 함.

- 하드웨어 제작: 메인 무대 공간, 바닥 좌·우 슬로프(경사로) 제작 및 기본 콘솔 테스크 LED 목공 마감 처리 시, 다수의 휠체어 하중을 안전하게 견딜 수 있는 견고한 자재를 사용해야 함.

- 소방 및 구조 안전: 행사장 내 설치되는 무대 제작물 일체에 대한 소방 방염 처리 의무화 및 관련 허가(시험성적서)제출 필수

- 제작 관련 참고사진

◦ 설치

- 리깅 및 구조 안전: 조명 및 음향장비 설치를 위한 리깅 구조물 시스템(트러스 40M 총 160M, 약 4줄 예상) 구축. 리깅 구조물 및 무대 전체 구조에 대한 사전 구조 안전 검토서 필수 제출 및 안전 지시 이행.

- 무대 및 바닥: 무대(14m×4m×0.5m) 설치 및 사전 안전 검토서 제출 및 경기장 바닥 보양 작업 필수 이행. 코트 매트 설치를 위한 사전 기초 작업으로서, 국제 규격에 부합하는 정밀 평탄화(수평) 시공 및 휠체어 진출입용 단차 제거(경사로 마감)를 완벽히 이행함.

- 음향: 15kw 내외 메인 음향 시스템 및 콘솔 구축(메인 스피커 6개, 우퍼 2개, 마이크, 리깅 모니터 스피커 13개)시 스피커 지향각 및 최대 출력을 엄격히 통제함.

-  조명: 메인 경기장 조도 1,500LUX 기준 충족용 조명(약 100개) 및 워밍업존 화이트 조명 설치.

- 전광판: 무대 좌우 16:9 비율 약 150인치 대형 LED전광판 2식 설치 및 추락 방지 안전 고정, 관람석 시청에 문제가 없도록 설치해야 함.

- 전력: 150kw 듀얼 발전차 가동 및 현장 전기 간선 작업 시, 전력 케이블 포설 구간은 휠체어 이동 시 걸림돌이나 전도 사고가 발생하지 않도록 전 구간 완만한 방지턱(덮개) 마감 및 바닥 고정 필수

- 중계방송 전용구역(카메라 존) 조성: 중계 카메라 장비 및 운영 인력의 하중을 안전하게 견딜 수 있는 전용 단상(라이저) 제작 및 설치. 장비 추락 방지 및 비인가자 접근 통제를 위해 단상 주변에 안전 펜스 설치. 선수의 경기 시야 및 휠체어 이동 동선을 침해하지 않아야 하며, 모든 방송용 케이블은 케이블 덮개로 완벽히 마감 및 고정할 것.

- 대회 부대시설: 선수 대기실(6m × 27m) 및 국가별 용기구 창고(3m×2m, 55동)는 전동 휠체어 진출입 및 회전이 원활하도록 출입구 규격 및 바닥 평탄화를 완벽히 확보하여 대회 전 설치 완료.

- 대회 부대시설 참고 사진

- 경기장 배치도

◦ (기타운영)

- 장내 아나운서 운영(한국어, 영어): 국제대회 격에 맞는 한국어 및 영어 진행이 능통한 전문 장내 아나운서를 섭외·배치해야 함. 선수 출·입장을 포함한 관중 참여 이벤트를 적극적으로 주도하고, K-POP을 비롯한 현장 음향 연출과 연계하여 관람객의 호응을 유도함으로써 경기장 내 축제 분위기를 조성해야 함.

- 전담 인력 및 운영 지원: 용역 수행기관은 개·폐회식 및 시상식 진행에 필요한 전담 지원 인력을 상시 배치하며, 주최 측 업무 담당자의 지시에 따라 원활한 대회 진행을 위한 지원 서비스(시설, 장비 등)를 즉각 제공해야 함.

- 시설 유지보수 및 관리: 시설 렌탈, 선수 대기실, 용기구 창고 등 모든 설치물은 대회 시작 전 설치기간을 엄수하여 완료하고, 대회 종료 시까지 전담 인력을 통해 안정적으로 유지 및 운영해야 함.

- 상시 음향 지원: 대회 기간 중 현장 진행에 필요한 음향장치, 마이크 3대, 경기 진행 음악 등을 차질 없이 지원함.

- 저작권료 책임: 개·폐회식, 시상식 및 대회 기간동안 사용되는 모든 저작물(음원, 영상, 이미지, 서체 등)의 사용료는 제안사가 전액 부담 및 해결함.

- 배상책임보험 의무 가입: 개·폐회식, 시상식 관람객, 선수단, 연출 및 운영 요원 전원을 대상으로 한 대인·대물 영업배상책임보험에 필수적으로 가입해야 하며, 계약 시 가입증명서를 제출해야 함.

비상시 대비책

◦ 안전사고에 대비하여 출입구 및 행사장 내부에 안전요원을 충분히 배치하여야 함.

◦ 각종 장비 및 특수효과 등 사용 시 안전사고가 발생하지 않도록 안전조치와 화재대비 소방시설을 행사장에 설치하여야 함.

◦ 비상사태 발생 시 중증장애 선수들이 쉽게 빠져 나올 수 있도록 비상 탈출 안내표지, 도구(망치, 완강기 등)를 배치하여야 함.

◦ 긴급 의료 처방이 필요한 경우 인근 119 구조대 및 병원으로 이동하여 응급조치가 가능하도록 함.

◦ 계약기간 중 발생한 사고로 인하여 정상적인 업무수행을 할 수 없다고 우리 연맹에서 판단하여 시정을 요구할 시 용역 수행 기관은 즉각 우리 연맹이 요구하는 조건에 따라 대체 장소 등을 대체 제공하여야 함.

◦ 용역 수행 기관은 화재 등 비상사태 발생 시 대피계획을 수립하여 우리 연맹 운영요원에게 교육을 실시하여야 함.

◦ 비상시 대비책의 모든 항과 관련, 발생한 용역 수행 기관 측의 모든 손해 및 관련 비용은 용역 수행 기관이 전액 부담하여야 함.

Ⅲ		참가자격 및 제안서 제출

참가자격

◦ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 의거 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 자

◦ 입찰등록마감일 현재「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제 27조 및 「같은 법 시행령」제76조의 규정에 의거 부정당업자로 입찰 참가자격 제한 중에 있지 아니한 업체

※ 미자격자가 고의로 입찰에 참가하였을 경우 관계 규정에 따라

부정당업자로 제재할 수 있음

◦ 단독 형태 참가(하도급 허용)

제안서 제출

◦ 접수기간

- 2026. 07. 10.(금) 09:00 ~ 18:00 (점심시간 12:00~13:00제외)

- 2026. 07. 13.(월) 09:00 ~ 12:00

◦ 접수처 : 서울 송파구 방이동 39-2, 403호(신동아타워) 대한장애인보치아연맹

제출 서류

◦ 입찰참가신청서(서식 1호) 1부

◦ 개인정보보호 수집 및 활용 동의서 외 각종 서류(서식2∼9)

◦ 제안서 5부(서식 10)

◦ 사업자등록증 사본 1부

◦ 사업실적 확인서 1부

◦ 국세 및 지방세 완납 증명서 각 1부

◦ 영업배상책임보험 가입증명서 1부

◦ 인감증명서 1부(사용인감이 다를 경우 사용인감계 제출)

◦ 법인등기부등본 1부(법인에 한함) 또는 주민등록등본 1부(개인)

◦ 기타 제안서 작성에 필요한 서류

용역비 지급 및 정산 등에 관한 사항

◦ 용역비 집행 관련 정산 내역 및 객관적 증빙자료 의무 제출(미제출 시 정산 불가)

◦ 방송 광고 및 콘텐츠 유료화를 통한 수익 창출 금지

◦ 과업 수행에 필수적으로 수반되는 제반 비용은 제안사 부담이며, 사후 추가 예산 청구 불가

제안서의 효력

◦ 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선한다.

◦ 제안서 및 계약서에 대하여 해석상의 이견이 발생할 경우에는 상호 협의를 원칙으로 하되, 관련 법령 및 일반 상관례에 어긋나지 않는 범위 내에서 대한장애인보치아연맹의 견해가 우선한다.

◦ 제안서의 내용이 향후 사업 추진 시 반드시 필요하다고 인정될 경우에는 대한장애인보치아연맹의 요청에 의해 수정될 수 있다.

◦ 대한장애인보치아연맹에서 필요한 경우 제안 업체에 대하여 추가 제안이나 보충 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 지닌 것으로 간주함.

사업자 선정

◦ 기본 방침

- 공모를 통하여 다수의 사업자에게 참여 기회 부여

- 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 제안(총액)서 종합평가(제안 및 가격) 상위 업체 선정(평가 방법은 공고서에 의함)

☞ 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제43조

◦ 선정 기준

- 중중장애인 전문스포츠 ‘보치아’ 종목의 이해

- 국제대회 및 대규모 종합 행사의 기획 및 운영 실무 능력

- 경기장 환경을 고려한 무대 구조물의 구조적 안전성 및 공간 활용 계획의 우수성

- 과업 세부 지침에 대한 이해도 및 실행 방안의 적정성

- 하드웨어 시스템 구축 및 연출 계획의 전문성

- 공식 행사 퍼포먼스 및 시각/청각적 연출 제안 내용의 차별성과 독창성

- 대회 참여 타 용역사 및 대한장애인보치아연맹과의 유기적인 업무 협조 방안 구비 여부

- 각종 안전사고 및 돌발상황에 대한 체계적인 대응 매뉴얼 수립 여부

◦ 사업자 선정 방식

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제43조에 따른“협상에 의한 계약” 방식으로 추진

우선협상대상자 선정

◦ 협상은 제안서 기술평가(80%)와 가격평가(20%)를 종합한 결과 고득점자 순으로 함

◦ 개찰결과 협상적격자가 없거나 또는 협상결과 모든 협상적격자와 협상이 결렬된 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있음(단, 국가계약법 시행령 한시적 특례에 따라 수의계약 가능)

◦ 협상순서는 협상적격자 중에서 종합평가점수의 고득점순에 의하여 결정하되, 합산점수가 동일한 제안자가 2 이상일 경우에는 다음의 순서에 따라 우선 협상대상자를 선정하고, 모든 평가가 동일한 경우에는 추첨에 의하여 낙찰자를 선정

- 기술평가점수가 높은 자

- 기술평가점수가 동일한 경우 기술평가의 배점이 가장 높은 항목의 점수 (동일 배점 항목이 2 이상인 경우는 합산한 점수)가 높은 자

- 위 점수가 동일한 경우 그 다음으로 배점이 높은 항목의 점수(동일 배점 항목이 2 이상인 경우는 합산한 점수)가 높은 자

◦ 협상완료 후 계약체결은『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』의 규정에 따르며, 제안서의 기술능력평가를 위한 평가위원, 기술능력 평가관련 자료 및 그 결과의 내용과 협상 결과 등은 공개하지 않으며 제안업체는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없음

Ⅳ		제안서 작성 지침

제안서 작성 유의사항

- 제안서 원본(1부)에만 업체명, 로고 등 작성, 제안서 사본(5부), 제안설명요약서(PT용)에는 업체를 인식할 수 있는 표기를 사용할 수 없음(일반현황 등은 제안서 원본에만 포함 가능)

- 제출된 제안서는 계약 체결 시 계약서의 일부로 간주한다.

- 제안서는 반드시 본 지침서의 양식에 의거 작성하여야 하며, 본 제안요청서에서 요구하지 않은 내용은 참고사항으로 첨부할 수 있다.

- 제출 기한 내에 접수되지 않은 것은 인정하지 아니하며, 제출된 제안서의 내용은 변경할 수 없다.

- 제안서에 기재된 내용이 허위, 과장된 사실임이 발견 될 경우에는 입찰 무효와 동시에 “국가를당사자로하는계약에관한법률”에 따라 부정당업자로 제재된다(입찰참가 제한).

- 제안서의 모든 내용은 실현 가능한 범위 내에서 명료하게 작성되어야 하며 근거자료 및 보충자료 요구 시 제출해야 함

※ 제안서 내용 중 ‘~를 할 수도 있다’, ‘~을 고려하고 있다’, ‘~이 가능하다’ 등과 같이 불명확한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.

- 사용언어 : 모든 제안서 작성 시 사용언어는 한글 표기를 원칙으로 하며, 필요시 외래어(한자포함)의 사용은 괄호 내에 표기한다.

- 증빙자료 : 증빙자료 요구 항목에 대하여는 증빙자료를 첨부하여야 하며, 증빙자료가 첨부되지 않은 것은 무효 처리하고 추가 증빙자료의 제출은 인정치 않음을 원칙으로 한다.

- 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 서류작성에 소요된 비용은 지급하지 않는다.

제안서 평가

◦ 제안서 평가

- 추진 방법 : 참가업체로부터 제안서를 제출받아 공고 및 제안요청서에서 정한 기준에 의거 심사

- 심사 평가위원회 구성 : 평가의 공정성을 기하기 위하여 심사위원회(5인이내)를 구성하여 평가하며, 심사위원회 구성에 관한 사항은 비공개로 함

- 제안서의 평가는 기술능력 평가(80%), 가격평가(20%)로 구분하며 기술능력 평가는 객관적 지표에 의한 평가와 주관적 평가로 구분된다.

- 기술능력 평가, 가격평가 중 객관적 지표에 의한 평가는 계약담당자가 심사기준에 따라 평가한다.

- 주관적 평가는 평가위원들이 평가한다.

- 제안서 평가결과는 공개하지 않으며, 이에 대하여 제안업체는 이의를 제기할 수 없음.

◦ 평가방법

- 평가방법 : 업체당 20분 이내(제안설명 15분, 질의응답 10분), PPT 발표 후 평가

* 제안설명은 제안사(주 사업자)의 총괄책임자(PM)가 직접 발표,

제안설명회에 참여하지 않은 업체는 평가대상에서 제외함.

기타 유의사항

◦ 제출된 서류는 일체 반환하지 아니하고, 사업계획서 작성에 따른 소요경비는 지급하지 아니함

◦ 제안서는 작성지침에 의거 사실대로 작성 하여야 하며, 허위사실이 발견되면, 입찰 참가 제한, 낙찰 취소, 계약 해지 등의 제재조치를 취할 수 있음

사업 수행 조건

◦ 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 세부과업의 담당자 명단 및 과업추진 일정 계획, 사업수행계획서를 대한장애인보치아연맹에 제출하여 승인받아야 하며, 승인 즉시 과업에 착수하여 전체과업의 수행에 차질이 없도록 과업을 수행하여야 한다.

◦ 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항 및 과업내용에 누락되었거나 당연히 수반되어야 할 사항은 추가로 과업을 지시할 수 있으며 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

◦ 제안요청서상의 용어는 일반적인 통념에 따라 해석하며, 대한장애인보치아연맹과 계약상대자간에 과업지시, 문맥해석 등에 대하여 해석상에 차이가 있을 때에는 대한장애인보치아연맹의 의견이 우선한다.

◦ 본 과업의 수행을 위하여 관계기관과의 협조가 필요한 경우에는 대한장애인보치아연맹에 협조를 요청할 수 있다.

◦ 계약상대자는 착수와 동시에 보안각서를 제출하여야 하고, 본 과업을 수행하면서 지득한 자료 및 내용을 대한장애인보치아연맹의 승인 없이 외부에 누설하지 않아야 하며, 이를 위반할 경우에는 법적인 책임을 포함하여 모든 책임을 진다.

◦ 계약상대자는 대한장애인보치아연맹 제안요청서 및 계약상대자 제안서 내용을 계약서의 일부로 간주하고, 동 내용 및 기타 계약조건과 대한장애인보치아연맹의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행한 때에는 계약조건 위반으로 계약을 해지할 수 있다.

사업 추진 일정(예정)

구 분		일 정	비 고
나라 장터	입 찰 공 고	2026. 06. 30.(화)~ 07. 13(금)
	접 수 마 감	2026. 07. 13.(월), 12:00
심사 평가위원회		2026. 07. 14(화). 15:00	예정
협상 및 계약체결		2026. 07. 31(금)	예정
사업 완료 보고		- 사업종료 시 까지(~2026. 9. 30.)	추후 조정 가능

평가기준

평가영역		세부항목 및 평가요소	배점	비고
기술평가 (80)	수행기관 현황 (15)	o 업체신용평가등급<주1>	5	정량 평가
		o 대행사 보유인력 평가	5
		o 유사 용역사업 경험<주2>	5
	과업의 이해도 (45)	o 제안 요청사항에 대한 제안내용 충족도 및 적합성	15	정성 평가
		o 중증장애인 선수의 이동 편의성	15
		o 개·폐회식 및 시상식 운영의 전문성	15
	행사수행 능력 (20)	o 제안 내용의 차별성 및 독창성	10
		o 행사 운영인력 관리	5
		o 안전 및 리스크 관리 방안의 적절성	5
가격평가 (20)	입찰가격 (20)	o 배점에 의한 평가	20
합계	100점

◦ 신용평가등급에 의한 경영상태 평가기준

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가 등급	평점
AAA	-	AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급)	5
AA+, AA0, AA-	A1	AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA- 에 준하는 등급)
A+	A2+	A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급)
A0	A20	A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급)
A-	A2-	A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)
BBB+	A3+	BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급)	4
BBB0	A30	BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)
BBB-	A3-	BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)
BB+, BB0	B+	BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급)
BB-	B0	BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)	3
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급)

<주1> ① 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 심사기준일 이전에 평가한 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급을 기준으로 평가

② ‘신용평가등급 확인서’가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가

③ 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병 대상 업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가 등급으로 심사

◦ 대행사 보유인력 평가

평가기준	10인 이상~	7인 이상~10인 미만	4인 이상~7인 미만	4인 미만
점 수	5점	4점	3점	2점

ㅇ 수행실적 평가기준

평가등급	평점
3년 내 유사 용역사업 실적 5억 이상	5점
3년 내 유사 용역사업 실적3.5억 이상~5억 미만	4점
3년 내 유사 용역사업 실적 2억 이상~3.5억 미만	3점
3년 내 유사 용역사업 실적 2억 미만	2점

<주2> 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용.

문의처

◦ (담당) 황성민 매니저(☏070-5038-5544, 5545)

2026.  6.  30.

대한장애인보치아연맹

Ⅴ		관련 양식

[서식 제1호]

입찰참가 신청서
신 청 인	상호 또는 법인명칭		사업자등록번호 (법인등록번호)
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
입찰건명
입 찰 보증금	“입찰보증금 지급확약서”제출로 갈음(서식 제6호)
대 리 인 ㆍ 사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. ㆍ성 명 : ㆍ주민등록번호 :			본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 : (인)
본인은 귀 회에서 공고한 입찰에 참가하고자 귀 부에서 정한 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 2. 3. 4. 20 년 월 일 신청인 (인감증명서상 인감날인) 대한장애인보치아연맹 귀하

[서식 제2호]

개인정보보호 수집 및 활용 동의서

1. 대한장애인보치아연맹의 개인정보 수집 및 이용 (동의 필수)

[수집하는 개인정보의 항목]

가. 대한장애인보치아연맹은 아래와 같은 내용으로 개인정보를 수집하고자 합니다.

- 항목 : 성명, 소속, 직위, 주민등록번호, 성별, 연락처, 주소, 학력 및 경력사항 등

[개인정보 수집 목적]

대한장애인보치아연맹은 다음과 같은 이유로 개인정보를 수집합니다.

- 입찰참가에 따른 본인확인 및 대리인 확인 용도

[개인정보 보유기간]

가. 입찰참가에 관한 정보제공의 필요 종결시까지 보유

[개인정보 수집 동의 거부의 권리]

가. 입찰참가 시 개인정보를 제공하고자 하는 자는 개인정보 활용 동의를 거부할 권리가

있으며, 거부할 경우 입찰참가가 제한될 수 있음을 알려 드립니다.

개인정보의 수집 및 이용목적에 동의하십니까?	□ 동의함	□ 동의하지 않음

2. 대한장애인보치아연맹의 고유식별정보 수집 동의 (동의 필수)

대한장애인보치아연맹은 아래의 내용으로 고유식별정보를 수집합니다.

1. 목적: 입찰참가에 따른 본인 및 대리인 확인 자료 활용

2. 항목: 인사기록카드, 4대보험 가입, 각종 증명서 발급, 정보보안 서약서 징구 등

3. 기간 : 입찰참가에 관한 정보제공의 필요 종결시까지 보유

4. 고유식별정보 수집에 동의하지 않을 권리가 있으며, 미동의시 입찰참가 및 이에 관한

자격이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

고유식별정보 제공에 동의하십니까?	□ 동의함	□ 동의하지 않음

20  년    월    일

소속 :            직위 :           성명 :           (인)

[서식 제3호]

사 용 인 감 계

당사(기관)는 대한장애인보치아연맹 ㅇㅇㅇ 계약서 작성에 사용할 인감을 아래와 같이 확인합니다.

사용인감	법인인감

20    년    월     일

주 소 :

상 호 :

성 명 :

[서식 제4호]

서   약   서

업 체 명  :

주    소  :

대한장애인보치아연맹에서 수행하는  (○○○○○○ 과업(물품))과 관련하여 다음과 같이 제반사항을 준수할 것을 확약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위기재사항 등이 확인될 경우와 신청자격에 해당되지 않을 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 귀 회가 평가를 위해 구성한 평가위원과 평가방법 및 평가기준에 따른 결과에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않겠습니다.

20    년   월   일

대표자	성명               (서명) 또는 (인)

[서식 제5호]

보   안   각   서

본인(본 기관ㆍ업체)은 귀 연맹이 발주한 용역 건 제안참여와 관련하여 다음사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 제안참여에 있어 제안요청서상의 제반 보안사항을 철저히 이행하겠으며,

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

20    년    월    일

소   속 :

직   위 :

성   명 :               (인)

[서식 제6호]

확      인      서

(입찰참가자격제한 및 징계사항)

본 기관은 최근 3년간 관계법령에 의거 입찰참가제한 등 관계기관으로부터 징계 받은 사실이 없음을 확약하며, 계약체결 후라도 만약 위 사실에 대한 위배내용이 확인될 시 계약해지 및 이에 따른 불이익 사항에 대한 책임은 본 기관에 있음을 확인합니다.

20     년    월     일

기 관 명 :

주    소 :

대 표 자 :                 (인)

[서식 제7호]

입찰보증금 지급각서

1. 사 업 명 :

2. 입찰보증금액 : 일금           원정(₩          )

※ 입찰금의 5% 이상

상기와 같이 입찰에 참가함에 있어 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제37조의 규정에 의거 면제하며, 세입조치사유가 발생하였을 시에는 입찰보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.

20     년    월    일

주  소 :

상  호 :

성  명 :                      (인)

[서식 제8호]

청렴계약이행서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 귀연맹에서 시행하는  ○○○○○ 에 참여함에 있어 당사 임직원은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 귀연맹에서 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 2년동안 입찰에 참가하지 않겠으며 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한

사실이 드러날 경우 귀연맹에서 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년동안 참여하지 않고 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직ㆍ간접적으로 금품ㆍ향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공중 편의를 받아 부실하게 시공한 사실이 드러날 경우에는 귀연맹에서 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 귀연맹에서 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년동안 참가하지 않고 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 귀연맹에서 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 착공(수)전에는 계약취소, 착공(수)이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임ㆍ직원이 관계 직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 귀연맹 등에서 시행하는 청렴계약 옴부즈만이

요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 귀연맹의 조치와 관련하여 당사가 귀연맹을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20   .    .    .

서약자

주  소 :

상  호 :

대표자 :            (인)

.

[서식 제9호]

성희롱‧성폭력 방지 등에 관한 서약서

20○○년도 대한장애인보치아연맹 (과업명)에 참여하는 본 (법인명)는 사업에 참여하는 모든 자(프리랜서 등 포함)에 대한 성희롱‧성폭력 방지 의무가 당해 사업의 운영에 있어 중요한 사항임을 충분히 인지하며 아래와 같이 서약합니다.

1. 사업에 참여하는 모든 자(프리랜서 등 포함)에 대하여 성희롱‧성폭력 예방교육을 실시하겠습니다.

2. 사업에 참여하는 모든 자(프리랜서 등 포함)를 대상으로 사업수행 중 성희롱‧성폭력 사건이 발생하여 신고를 받거나 발생 사실을 알게 된 경우 사실 확인을 위한 조사를 실시하겠습니다.

3. 조사기간에는 피해자의 요청에 따라 근무장소 변경, 배치전환 등 피해자보호조치를 하고, 피해자의 신변 및 사건 내용 등에 대한 비밀을 유지하며, 신고로 인한 불이익조치가 없도록 하겠습니다.

4. 성희롱‧성폭력 발생 사실이 확인된 경우에는 해당 행위를 한 사람에 대해 징계, 사업 배제, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 하겠습니다.

*「남녀고용평등과 일ㆍ가정 양립 지원에 관한 법률」 제13조, 제13조의2, 제14조 및 제14조의2, 「양성평등기본법」 제31조 및 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조에 따른 조치를 준용

위 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 성희롱‧성폭력 사건을 은폐하는 등 본 서약의 내용이 충실히 지켜지지 않은 경우에는 향후 대한장애인보치아연맹 사업에의 참여 제한 등 처분을 감수할 것임을 확인합니다.

년     월     일

단 체 명 :

대 표 자 :

대한장애인보치아연맹회장 귀하

〔서식 10〕

2026년 서울 세계보치아선수권대회 행사 운영 용역 제안서

1. 일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
연 락 처	전화 : FAX :
회사설립년도	년 월
직 원 현 황
해당부문 사업기간	년 월 ∼ 년 월 ( 년 개월)
＜주요연혁＞

2. 경영상태

(금액단위 : 천원)

구 분	자기자본비율(%) (자기자본/총자산)	유동비율(%) (유동자산/유동부채)	계
비 율

주) 1. 최근연도 경영상태 증빙자료 첨부(최근 정기결산서에 대한 공인회계사의 검토보고서

또는 법인세 및 소득세 신고시 관할 세무서에 제출하는 세무사 확인 재무제표

3. 실행계획(자유양식으로 기재)

※ 자유양식

본인(사)은 위 사항이 사실과 틀림없음을 확인하오며, 귀 연맹의 업체 선정에 참가하고자 연맹에서 정한 공고 사항 일체를 숙지하여 승낙하고, 본 공고에 의한 붙임서류 첨부하여 신청합니다.

2026.   .

신청인  :   업체명                         대표자                (사용인감)

붙임 : 관련 증빙서류 각 1부.

대한장애인보치아연맹회장 귀하