「2026년 하이원리조트 데코레이션 디자인, 제작 및 설치 용역」

과 업 내 용 서

2026. 6.

주식회사 강원랜드

Ⅰ. 과업개요

1. 과 업 명

◦ 2026년도 하이원리조트 데코레이션 디자인, 제작 및 설치 용역

2. 과업의 목적

◦ 하이원에서만 경험할 수 있는 차별화된 공간조성 추진으로 리조트 방문고객에게 긍정적 브랜드이미지 제고와 리조트 홍보효과

◦ 외부공사환경에서 벗어나 고객동선위주 환경개선으로 비일상적경험 제공

3. 과업기간

◦ 계약일로부터 12개월

4. 과업의 범위

◦ 디자인

- 리조트 내․외부 설치물 디자인, 설계도면, 설치감리 총괄

※ 2026년 데코레이션 장소별 세부계획 설명자료 참고

◦ 제작 및 설치

- 설치물 제작, 설치, 고정 관련 부대공사 및 전기공사 전체

◦ 철거 및 폐기

- 노후 데코레이션 설치물 철거. 크리스마스 데코 철거 및 폐기, 보관

◦ 설치물 점검 및 보수

- 데코레이션 설치물에 대한 설치물 점검 및 보수

◦ 보고서 제출

- 크리스마스 설치, 철거 완료후 7일이내 보고서(설치전후 사진포함) 제출

- 전체 과업 완료 후 최종용역완료보고서 제출

Ⅱ. 과업의 세부내용

1. 과업 세부 일정

◦ 1차: 2개소 (②, ④) 설치 2026년 9월까지 완료

◦ 2차: 3개소 (③, ⑩, ⑪)크리스마스 데코와 야외 대형트리 설치

2026년 10월 말일까지 설치 완료

◦ 3차: 3개소 (①, ⑤, ⑥, ⑧, ⑫) 크리스마스 데코와 포토존, 대형트리 설치

2026년 11월 첫째주까지 설치 완료

◦ 4차: 1개소 카지노입구 포토존 (⑨) 2027년 2월 말까지 설치 완료

◦ 5차: 2027년 2월말 크리스마스 포토존, 실내용 트리 철거, 폐기 및 보관

◦ 점검 및 보수: 계약시작일부터 계약완료일까지 설치물 점검 및 보수

※  세부일정은 당사 내부 방침 및 계약 상황에 따라 조정될 수 있음

2. 디자인 부문

◦ 컨셉을 효과적으로 표현한 내구성, 완성도있는 내・외부 데코레이션 디자인

◦ 웰니스라운지, 크리스마스 장식 설치시 반드시 플로리스트 참여

(경력내용 제안서에 반영)

◦ 사전협의가 완료된 전문인력 및 외부전문가에 한해서 제안서에 제시한다

◦ 하이원리조트만의 독창적, 감각적인 디자인 제안하며, 콘셉트에 부합하는 모티브 및 칼라사용

◦ 전반적인 디자인은 조화성, 심미성, 안정성, 관리 등의 사항을 충분히 고려하여야 함

◦ 주·야간을 아우를 수 있는 디자인 및 조명을 계획하며, 형태, 색상, 경관고려

◦ 디자인 시안은 현실감 있는 2D, 3D그래픽 시안으로 표현되어야 함

◦ 제안서에 포함되는 시안 이외에 나머지 과업범위에 대한 모든 디자인시안은 계약완료 후 한달이내 완료하여 컨펌 후 진행.

◦ 디자인 확정 후 제작 및 시공을 위한 연출물의 설계도면, 사양서 제작

◦ 디자인제작물의 원본데이터(AI, CAD, PSD 등)는 요청시 제공해야함.

3. 제작 부문

◦ 설치물은 협의 완료한 디자인 시안, 도면, 사양서(재료, 크기, 색상, 사양)에 따라 제작한다. 단, 제작물의 더 나은 효과를 위해 사양이 변경될 경우 ㈜강원랜드의 승인을 얻어 시행한다.

◦ 조형물의 재질은 주변 환경과 조화되며 부식되지 않고, 견고한 재료를 사용해야하며, 구조물의 안전성을 확보해야 함

◦ 유지관리 등이 용이하고 경제성과 친환경성을 고려하여 하여야 함

◦ 포토존 제작시 고객의 안전을 위해 반드시 안전바 설치를 포함한다

4. 설치 부문

◦ 트렌드에 맞는 최신소재를 적용하며, 설치되는 조명제품은 LED소재 기준

◦ 조명작업의 경우 방수 및 누전을 최소할 수 있고 안정성 확인된 제품 사용  (사용되는 자재 및 기기는 KC 인증을 필한제품으로 규격에 맞게 사용)

◦ 전기공사는 반드시 전기 면허를 가진 전문 업체가 실시하여야 함

◦ 조명장치를 위한 일체의 전기배선작업을 포함.(전력인입구는 당사에서지정)

◦ 설치물에 수반되는 분전반, 케이블배선, 조명 제어시스템 등 설치 및 사후 관리에 필요한 모든 사항을 포함함

◦ 필요 전력량과 안정적인 전력공급 방안과 함께 낙뢰, 우천, 세척 등에 의한 조명 오작동, 파손 및 감전 사고에 대한 대비 방안 마련해야함

◦ 설치공간의 기존 바닥, 벽 마감재 등이 최대한 손상되지 않도록 해야 함

◦ 내・외부 전선의 노출이 없이 깔끔한 마감이 되야함

◦ 설치되는 모든 조명컬라는 웜화이트 컬러를 기본으로 한다.

◦ 조형물 설치 시 충돌 등 안전사고가 발생하지 않도록 차단봉, 안전펜스 설치 후 고객동선 안전 확인하여 작업

◦ 본 건을 위한 일체의 설치, 철거 작업 시 반드시 안전장비 착용 후 작업하며, 당사의 안전관리작업지침 준수하여야 하고, 이를 위반하여 발생하는 일체의 불이익은 계약상대자가 부담

5. 철거 및 폐기

◦ 노후 데코레이션 설치물 교체시 철거 및 폐기

◦ 크리스마스데코 철거 및 폐기, 재활용 품목은 포장 후 지정 장소에 보관

※ 이 과업의 모든 제작물은 발주처에 귀속되며, 제작물에 대한 철거,

폐기 및 보관품목은 발주처가 작성한 리스트를 기준으로 한다.

◦ 철거 및 폐기, 보관리스트에 대한 보고서 작성

6. 설치물 점검 및 보수

◦ 계약시작일로부터 계약만료일까지 설치물 점검 및 오작동 보수

◦ 설치물 설치, 검수 완료 후 문제점(수정사항, 소등, 파손 등) 발생 시 해결

◦ 점멸기 등 전기 오작동 및 파손보수는 요청 24시간 내 보수를 원칙으로 함.

7. 보고서 제출

◦ 최종 디자인 시안, 제작 및 시공을 위한 설계도면, 사양서

◦ 크리스마스 설치, 철거 후 완료보고서와 최종용역 완료보고서를 제출.

구분	제출시기	비고
착수보고	계약후 7일 이내	착수계, 과업수행계획서
장소별 디자인시안	계약후 한달이내 완료	시안 컨펌후 도면진행
설계도서 및 사양서	제작물 작업진행전 완료	컨펌 후 제작진행
완료보고서	3차 설치완료후 7일이내	완료 전후사진 포함
	4,5차 설치, 철거완료후 7일이내
최종용역완료보고서	계약완료 2주전	기제출된 완료보고서 취합 보수작업 내용추가

8. 기타사항

◦ 발주자가 데코레이션 제작 및 설치, 연출 등에 관한 감독, 관리, 검사, 하자관리를 감리 전문 업체에 위임할 시 계약상대자는 감리업체에 적극 협조하여야 한다.

◦ 발주자의 리조트환경 또는 영업환경의 변화로 과업범위가 축소되거나 추가될 수 있으며 이 경우 상호합의하에 계약변경하여 진행한다.

◦ 계약상대자는 공사 또는 작업 착수전 산업안전보건법 제 36조에서 정하는 위험성평가를 시행하고(위험성평가 지원시스템 http://kosha,or.kr) 그 결과 및 작업허가신청서(해당작업시)를 발주부서에 제출하여야 하며, 발주부서(안전보건관리자 포함)의 보완조치 요구에 즉시 응하여야 한다.

◦ 발주자는 다음의 경우에 따라 계약상대자가 해당 대가를 지급 요청하는 경우에는 검사에 합격한 때에 한하여 이를 지급한다.

- 3차 크리스마스 설치까지 완료한 경우 계약금액 80% 이내 중도금 지급

- 본 계약에 따른 나머지 역무를 모두 완료한 경우 계약금액 중 잔액 지급

Ⅲ. 과업 수행지침

◦ 계약상대자는 본 과업을 성실히 추진하며 ㈜강원랜드는 계약상대자가 전문성을 발휘할 수 있도록 적극 지원한다.

◦ 계약상대자는 용역계약 후 7일 이내에 과업에 착수하며 착수계, 과업수행계획서(장소별 세부 설치일정 포함), 조직도, 인력투입 계획, 연출물 디자인 및 산출내역서 등을 ㈜강원랜드에 제출한다.

◦ 과업수행자는 본 과업수행을 위해 충분한 경험을 가진 전문 인력을 충분히 참여시켜야하며, 동 전문 인력은 자기가 가진 지식과 경험을 최대한 활용하여 본 과업의 목적을 달성하도록 하여야 한다.

◦ 발주자는 참여 인력이 과업수행 상 부적합하다고 판단될 경우, 교체를 요구하거나 적합한 자를 추천하며, 특별한 사유가 없는 한 과업수행기관은 이에 따라야 한다.

◦ 과업 수행에 따라 조사과정에서 취득한 ㈜강원랜드 및 관련 기관․업체의 운영상태, 산업정보 등은 타인에게 누설하지 않으며, 상기 보안 유지를 위해 보안각서를 제출하고 보안 관리에 만전을 기한다.

◦ ㈜강원랜드는 본 과업과 관련하여 내부 관련부서 등의 제안이 있을 경우 그 내용을 검토하여 계약상대자에 사전 통보하고 계약상대자는 이를 반영한다.

◦ 계약상대자는 과업일정에 맞춰 설치 완료하여야 하고, 용역완료보고서는 연출물과 용역 수행과정을 기록한 사진, 수행과정을 일시와 내용을 적시하여 제출하여야 한다.

◦ 과업기간을 준수하는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 사정이 발생될 경우, ㈜강원랜드와 사전 협의하여 납품 및 발행 시기를 조정할 수 있다.

◦ 본 과업 추진 상 규정되지 아니한 사항은 ㈜강원랜드와 계약상대자가 상호 신뢰의 원칙하에 사전 합의하여 수행한다.

<첨 부1>

2026년 하이원리조트 데코레이션 세부 설치장소 리스트

-	지역 구분	장소		내용	설치
①	그랜드 호텔	메인 출입구	5F 컨벤션 로비 입구	내부 입구프레임 크리스마스 장식	11월첫주
			4F 광장주차장 입구	출입구방향 LED조명, 사인 연출	9월
②
			3F 프리미엄스토어 입구	입구 크리스마스 랩핑, 조경 연출	10월말
③
		실내	5F 웰니스라운지 조화교체	노후된 조화&조명교체, 로고조형물	9월
④
			5F 프론트, 로비라운지	프론트상단, 로비라운지 난간 장식	11월첫주
⑤
			4F 크리스마스 포토존	5m 대형트리, 크리스마스 포토존	11월첫주
⑥
			4F 여름 포토존	대형 샤스타데이지 플라워 포토존	2027년 2월말
⑦
			4F 카지노영업장 포토존	6m 대형트리 (레드)	11월첫주
⑧
			4F 카지노입구 포토존	카지노상징 설치미술 포토존(키네틱)	2027년 2월말
⑨
⑩	마운틴 콘도	실내	스키하우스 카페테리아	입구 게이트 크리스마스 장식	10월말
⑪	밸리콘도	실외	야외 크리스마스 트리	6m 대형트리 포토존	10월말
⑫	영업장 트리	실내	영업장 크리스마스 트리 10개 (3m 8개/ 2.4m 2개) : 5층 로비, 로비라운지, 그랜드테이블, 하이원프리미엄스토어, 운암정, 라비스타, 워터월드, 하이랜드, 팰리스호텔 로비, 아테나키친		10월말