제 안 요 청 서

⌜2026년 하이원리조트 데코레이션

디자인, 제작 및 설치 용역⌟

2026. 6.

주식회사 강원랜드

담당	소속 부서	성명 직위	TEL	FAX
	호텔콘도관리팀	김경 과장	033-590-6315	033-590-6840

목       차

Ⅰ. 사업개요	1

Ⅱ. 요구사항	2~4

Ⅲ. 계약조건	4~5

Ⅳ. 평가요소 및 평가방법	5~6

Ⅴ. 제안서 작성 및 제출	6~10

【붙임1】 기술평가 항목 및 배점	11

【붙임2】 등급별 배점기준표	12

【붙임3】 신용등급에 의한 경영상태 평가기준	13

【서식 제1호】 제안서 표지 양식	14

【서식 제2호】 제안사 일반현황	15

【서식 제3호】 용역이행 실적증명원	16

【서식 제4호】 서약서	17

【서식 제5호】 개인정보 수집･이용･제공 동의서	18

Ⅰ. 사업개요

1. 사 업 명 : 2026년 하이원리조트 데코레이션 디자인, 제작 및 설치 용역

2. 사업목적 : 하이원에서만 경험할 수 있는 차별화된 공간조성 추진으로

리조트 방문고객에게 긍정적 브랜드이미지 제고와 리조트 홍보효과

3. 사업범위 : 하이원리조트 내 지정장소

※ [과업내용서], [2026년 데코레이션 세부계획] 문서 참조

4. 사업기간 : 계약일로부터 365일

5. 사업예산 : 615,180,000 (부가세 포함)

6. 사업내용

∘ 디자인 : 제시된 콘셉트에 따른 데코 연출물 기획, 연출물 디자인

∘ 제작 및 설치: 디자인결과물 기준 내, 외부 설치물 제작, 설치,

관련 부대공사 및 전기공사 전체

∘ 철거 및 폐기: 노후 설치물 철거, 크리스마스 철거 및 폐기, 보관

∘ 설치물 점검 및 보수

∘ 보고서 제출 : 디자인 시안, 설계도서, 용역수행 완료보고서

7. 세부일정

∘ 1차 : 2개소 ( ②, ④ ) 설치 2026년 9월까지 완료

∘ 2차 : 3개소 ( ③, ⑩, ⑪ ) 크리스마스 데코와 야외 대형트리 설치

2026년 10월 말일까지 완료

∘ 3차 : 3개소 ( ①,⑤,⑥,⑧,⑫ ) 크리스마스데코와 포토존, 대형트리 설치

2026년 11월 첫째주까지 완료

∘ 4차 : 1개소 카지노입구 포토존 (⑨) 2027년 2월말까지 설치완료

∘ 5차 : 2027년 2월 크리스마스 포토존, 실내트리 철거, 폐기 및 보관

∘ 점검 및 보수 : 계약시작일부터 완료일까지 설치물 점검 및 보수

※ 세부일정은 당사 내부 방침 및 계약 상황에 따라 조정될 수 있음

8. 계약방법 : 제한경쟁입찰 (협상에 의한 계약)

Ⅱ. 요구사항

1. 과업 세부내용

가. 디자인 부문

∘ 컨셉을 효과적으로 표현한 내구성, 완성도있는  데코레이션 디자인

∘ 웰니스라운지, 크리스마스 장식 설치시 반드시 플로리스트 참여

(경력내용 제안서에 반영)

∘ 하이원의 독창적, 감각적 디자인 제안, 콘셉트에 부합하는 모티브, 칼라

∘ 전반적인 디자인은 조화성, 심미성, 안정성, 관리 등의 사항 고려

∘ 주·야간을 아우를 수 있는 디자인, 조명 계획하며, 형태, 색상, 경관고려

∘ 제안서에 포함되는 시안 이외에 나머지 과업범위에 대한 모든

디자인시안은 계약완료후 한달이내 완료, 컨펌 후 진행.

∘ 디자인 시안은 현실감있는 2D, 3D 그래픽 시안으로 표현되어야함.

∘ 디자인 확정 후 제작 및 시공을 위한 연출물의 설계도면, 사양서 제작

∘ 디자인제작물은 원본데이터(AI, CAD, PSD 등) 파일을 제공해야함.

나. 제작 부문

∘ 설치물은 협의 완료한 디자인 시안, 도면, 사양서(재료, 크기, 색상, 사양)

에 따라 제작한다. 단, 제작물의 더 나은 효과를 위해 사양이 변경될 경우

㈜강원랜드의 승인을 얻어 시행한다.

∘ 조형물의 재질은 주변 환경과 조화되며 부식되지 않고, 견고한 재료를

사용해야하며, 구조물의 안전성을 확보해야 함

∘ 유지관리 등이 용이하고 경제성과 친환경성을 고려하여 하여야 함

다. 설치 부문

∘ 트렌드에 맞는 최신소재를 적용하며, 설치되는 조명제품은 LED사용

∘ 조명작업의 경우 방수 및 누전을 최소할수 있고 안정성 확인된 제품사용

(사용되는 자재 및 기기는 KC인증을 필한 제품으로 규격에 맞게 사용)

∘ 전기공사는 반드시 전기 면허를 가진 전문 업체가 실시하여야 함.

∘ 조명장치를 위한 일체의 전기배선작업을 포함.

(전력인입은 당사에서지정)

∘ 설치물에 수반되는 분전반, 케이블배선, 조명 제어시스템 등 설치 및

사후관리에 필요한 모든 사항을 포함함

∘ 필요 전력량과 안정적인 전력공급 방안과 함께 낙뢰, 우천, 세척 등에

의한 조명 오작동, 파손 및 감전 사고에 대한 대비 방안 마련해야함

∘ 설치공간의 기존 바닥, 벽 마감재 등이 최대한 손상되지 않도록 해야 함

∘ 내・외부 전선의 노출이 없이 깔끔한 마감이 되야함

∘ 설치되는 모든 조명컬라는 웜화이트 컬러를 기본으로 한다.

∘ 조형물 설치 시 충돌 등 안전사고가 발생하지 않도록 차단봉, 안전펜스

설치 후 고객동선 안전 확인하여 작업

라. 철거 및 폐기

∘ 노후 데코레이션 설치물 교체시 철거 및 폐기

∘ 크리스마스데코 철거 및 폐기, 재활용 품목은 포장 후 지정 장소에 보관

∘ 철거 및 폐기, 보관리스트에 대한 보고서 작성

마. 설치물 점검 및 보수

∘ 계약시작일로부터 계약만료일까지 설치물 점검 및 오작동 보수

∘ 설치물 설치, 검수완료 후 문제점(수정사항,소등,파손 등)발생시 해결

∘ 점멸기, 전기오작동 및 파손보수는 요청 24시간 내 보수를 원칙으로 함.

바. 보고서 제출

∘ 최종 디자인 시안, 제작 및 시공을 위한 설계도면, 사양서

∘ 크리스마스 설치, 철거 후 완료보고서와 최종용역 완료보고서를 제출.

구분	제출시기	비고
착수보고	계약후 7일 이내	착수계, 과업수행계획서
장소별 디자인시안	계약후 한달이내 완료	시안 컨펌후 도면진행
설계도서 및 사양서	제작물 작업진행전 완료	컨펌 후 제작진행
완료보고서	3차 설치완료후 7일이내	완료 전후사진 포함
	4,5차 철거완료후 7일이내
최종용역완료보고서	계약완료 2주전	기제출된 완료보고서 취합 보수작업 내용추가

Ⅲ. 계약조건

1. 입찰 및 방법 : 제한(실적)경쟁 입찰 및 협상에 의한 계약

※ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조

2. 입찰 참가자격

가. 입찰참가등록 마감일 기준 아래 자격을 갖춘 업체로서 「국가종합전

자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 따라 나라장터(G2B)에 입찰참

가 등록한 자

∘ 「국가계약법 시행령」 제12조에 의한 자격을 갖춘 업체

∘ 입찰참가등록 마감일 기준 최근 5년 이내 단일계약 건으로 2억(부          가세 포함)이상의 아래 동종 또는 유사실적(계약이행완료 건) 보유업체

※ 유사실적 : 백화점 또는 쇼핑몰 또는 호텔 또는 리조트에 설치한

데코레이션 실적 (데코레이션 실적은 조형물 또는 설치미술 또는

VMD 또는 크리스마스 설치 실적임)

※ 하도급실적 불인정

∘ 「산업디자인진흥법」 제9조(산업디자인전문회사에 대한 지원)에 따라

“환경디자인분야(업종코드: 4442)”로 등록된 업체 또는 환경디자인을 포함한 “종합디자인분야(업종코드: 4444)“로 등록된 업체

∘ 「전기공사업법」에 의한 “전기공사업(업종코드: 0037)”로 등록된 업체

∘ 공동계약(분담이행방식)허용

① 단독 또는 공동계약 참여 가능

② 공동수급체 대표자는 환경디자인분야 또는 종합디자인분야로 등록        된 업체로서, 공동수급체 구성원수는 대표자를 포함하여 2인 이하로       하며, 공동수급체를 중복으로 결성하여 입찰에 참여할 수 없음.

※ 기획재정부(계약예규) "공동계약운용요령"제9조에 따라 공동수급체 구성원               은 공동수급체를 중복적으로 결성하여 입찰에 참여할 수 없으며, 입찰참               가 신청 이후 구성원 변경 및 권리의 전부 또는 일부를 양도 할 수 없음.

Ⅳ. 평가요소 및 평가방법

1. 선정 절차 및 방법

가. 평가 일시 및 장소 : 입찰공고문에 따름

나. 평가 방법

∘ 평가는 제안서 기술능력평가와 가격에 대한 종합평가로 실시하며,

종합평가 점수는 100점 만점으로 기술능력평가 90점, 입찰가격평가

10점으로 한다.

다. 제안서 평가 항목 및 배점 : 붙임 1 참조

2. 협상 적격자 선정 및 협상 순서

가. 우선 협상대상자 선정

∘ 입찰가격이 예정가격이하인 자로 제안서 평가(기술평가)점수가 평가

분야 배점한도(90점)의 85%(76.5점)이상인자를 협상적격자로 선정한다.

∘ 종합평가결과(기술평가+가격) 최고점수를 얻은자를 우선협상대상자로

지정하고, 다른 협상대상자에 우선하여 협상을 실시한다.

∘ 기술평가와 가격평가를 합산한 결과 동점발생시 기술평가능력점수가

높은 업체를 선순위로 한다.

∘ 기술평가 능력 점수도 동일 시 기술제안서 세부평가항목 중 배점이

큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 한다. (단, 배점이

동일한 항목의 경우에 평가표 상의 위에서 아래 순 ➊>➋>➌>➍>➎>

➏>➐>➑으로 적용하며, 정량평가항목은 제외함)

∘ 제안서 평가항목별 점수는 평가위원회 평가 점수 중 최고와 최저점수를

제외(최저 또는 최고 점수가 2개이상일 경우 1개만 제외)한 후 산출한다.

∘ 차등점수제 적용하지 않음

나. 협상 및 계약

∘ 협상순서에 의해 협상을 실시하여 낙찰자가 선정될때까지 순차적으로

협상을 실시한다.

∘ 우선협상대상자와 협상이 성립되면, 차순위업체와의 협상은생략한다.

∘ 협상대상자가 제안한 과업내용 및 이행일정 등 제안서 내용과 제시

가격을 대상으로 협상을 하며, 협상을 통하여 그 내용의 일부를 조정

할 수 있다.

∘ 협상방법은 “(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준”에 준한다.

다. 유의 사항

∘ 첨부된 양식과 주의사항을 고려하여 각종 평가근거자료의 누락 또는

오류로 평가에 불이익을 받지 않도록 주의한다.

∘ 공고내용이나 공모지침서 등 제안서 요청과 관련하여 견해를 달리하

는 경우가 있을 때는 발주처의 의견에 따른다.

Ⅴ. 제안서 작성 및 제출

1. 제출방법 : 제출 일시, 장소 등 입찰 공고문에 따름.

2. 제안서 제출 및 제출방법

가. 제안서 형식 : PDF 파일, 300mb 이내로 제출

나. 제출방법 : 국가종합전자조달시스템 나라장터(http://www.g2b.go.kr)을

이용하여 전자제출, 증빙서류는 제안서와 구분하여 제출해야한다.
※ 제안서 제출시 파일명을 아래 예시와 같이 ‘제안서(업체명)’으로 제출

예) 1. 제안서(업체명)

2. 실적증명서류(업체명)

3. 신용평가등급확인서(업체명)

4. 별첨자료(업체명)   - 서약서, 개인정보 수집이용 동의서 등

※ 자세한 사항은 입찰공고문 참조

3. 제안서 작성 지침

가. 전체목차는 제시된 작성지침을 준수하고 세분화하는 경우 세부목차           를 추가할 수 있으나, 요구된 내용을 반드시 포함시켜야 한다.

나. 제안서의 작성은 반드시 PDF를 사용하여야 하며, 필요시 한글과            영문을 병기 할 수 있다.

다. 제안서의 레이아웃은 가로방향(횡방향)으로 하고 A4사이즈

(297mm x 210mm) 기준으로 한다.

라. 표지를 제외한 각면(쪽)하단에 일련번호를 부여하고 표지를 제외한

본문 내용은 30면(쪽) 이내로 작성.

(표지<서식 제1호>, 제안사 일반현황 <서식 제2호>는 제안서포함)

※ 별도 첨부: <서식 제3호>, <서식 제4호>, <서식 제5호>

마. 표지는 백색을 사용하며, 표지는 첨부된 서식 외 일체의 디자인과           장식요소를 넣지 않는다.

바. 제안서 작성요령 또는 요구사항에 명시되지 않은 내용에 대한 추가           적인 제안사항과 별도의 항목을 작성할 수 없다.

사. 제안서 디자인시안은 실사 위주의 이미지, 합성시안으로 구성하며,           디자인은 실현 가능한 시안이어야 한다.

아. 제안서 작성방법을 참조하여 작성하되 지정된 목차 순으로 작성함.

자. 제안서에 누락되거나 제안된 내용만으로는 진위를 확인할 수 없는           경우, 당해 제안 내용은 없는 것으로 판단함.

작 성 항 목	작 성 방 법	비고
표지	제안서 표지	서식 1
목차	제안서 목차
Ⅰ. 제안사 소개	① 연혁 및 일반현황 - 제안사의 연혁 및 일반현황, 주요사업내용 ② 사업수행 실적 기술 - 최근 5년이내 유사사업 수행사례	서식 2
Ⅱ. 디자인 시안	① 5F 컨벤션 로비입구 ② 4F 광장주차장 입구 ③ 3F 프리미엄스토어 입구 ④ 5F 프론트 상단 크리스마스 장식 ⑤ 4F 크리스마스 포토존 ⑥ 4F 카지노영업장 포토존 (대형트리) ⑦ 4F 카지노입구 우측 포토존 ⑧ 밸리콘도 야외 크리스마스 트리 포토존
Ⅲ. 사업수행계획	① 인력 운영계획 - 업무수행 조직체계, 참여인력 기술수준 및 전문성 - 참여 플로리스트 경력내용, 실적 (참여작가 포함) ② 제작, 설치 계획 - 설치물의 설치, 시공방법, 안전조치 방법 ③ 점검, 관리 계획 - 정기점검, 유지보수 관리 계획 ④ 예정 공정표 - 디자인, 설치부터 철거까지의 일정표
Ⅳ. 안전보건 관리방안	① 산업안전보건법 준수계획 (위험성평가,안전점검 절차) ② 중대재해 (감전, 화재, 추락 등) 예방대책 및 안전교육 실시계획 ③ 비상대응 및 사고보고 체계

4. 제안서 작성순서 및 내용

5. 제안서 작성 유의사항

가. 사업에 참여하고자 하는 업체는 제안서 작성지침에 따라 제안서를          작성, 제출하여야 하며, 제출된 제안서를 토대로 사업을 추진하여야

한다.

나. 제안업체는 본 사업수행을 통하여 취득한 사업내용에대한 지식이나

기밀사항에 대하여 (주)강원랜드의 승인 없이 이용 및 누설 시 이에

대한 모든 법적 책임을 진다.

다. 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 아니하며, 본 제안을          위하여 소요되는 일체의 비용은 제안업체의 부담으로 한다.

라. (주)강원랜드는 제안서나 기타첨부자료 상의 오류나 누락에 대하여          책임을 지지 않는다.

마. 제안서와 함께 제출된 모든 자료에 대하여는 업체의 이익을 보호하          기 위하여 업체 선정 이외의 목적으로 외부에 공개하지 않는다.

바. (주)강원랜드의 계획변경으로 인하여 본 제안요청서의 일부 또는           전부를 변경하거나 취소할 수 있으며, 이 경우 제안업체는 이의를           제기하지 못한다.

사. 제안된 제안서의 내용은 (주)강원랜드가 요청하지 않는 한 수정,

추가, 대체할 수 없으며 제출된 제안서는 낙찰자로 선정된 경우

계약서와 동일한 효력을 갖는다.

아. (주)강원랜드는 필요 시 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수

있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안 당시의 제안서와 동일한

효력을 가진다.

6. 제안서 평가원칙

가. 제출된 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증가능 해야 하고

허위로 작성된 사실이 발견될 경우 평가대상에서 제외한다.

나. 제출된 제안서의 기재내용은 발주자가 요청하지 않는 한 수정,

추가, 삭제할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.

다. 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나

담합하였다고 판단되는 경우 제안은 무효로 한다.

라. 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여야 하며 내용 중

“가능하다, 동의한다, 고려한다.”와 같은 모호한 표현은 실행 가능한          것으로 간주한다.

붙    임: 1. 기술평가 항목 및 배점

2. 등급별 배분 기준표

3. 신용등급에 의한 경영상태 평가기준

4. [서식 제1호] 제안서 표지 양식

5. [서식 제2호] 제안사 일반현황

6. [서식 제3호] 용역이행 실적증명원

7. [서식 제4호] 서약서

8. [서식 제5호] 개인정보 수집 이용 동의서

[ 붙임 1 ]

기술평가 항목 및 배점

구 분		평가 항목	평가 내용	배점
기술 제안 평가 (90)	정량평가 (5)	경영상태	신용평가등급에 의한 경영상태 평가	5
	정성평가 (85)	제안사 수행력	➊ 제안사와 참여인력의 능력과 전문성 - 유사사업 수행실적 우수성 - 업무수행 조직체계, 참여인력 전문성	15
			➋ 제안사가 본 용역을 위한 충분한 디자인, 제작, 설치 능력 보유여부	15
		설치물 디자인	➌ 장소별 디자인 시안의 리조트 환경과의 조화	10
			➍ 각 연출물 디자인 시각적 품질의 우수성, 창의성	10
			➎ 하이원리조트만의 차별성, 고객의 흥미유발과 화제성을 일으킬만한 디자인인가	10
		공간연출 품질	➏ 데코레이션 설치 및 개선 작업을 통해 공간품질이 향상될것으로 예상되는가	10
		설치, 점검 관리계획	➐ 설치물의 시공방법과 점검관리 계획의 적정성 - 설치계획 / 정기점검 및 유지보수 관리계획	5
		안전보건 관리방안	➑ 안전보건 관리 계획, 중대재해 예방대책의 적정성 - 산업안전보건법 준수계획 / 중대재해예방대책 계획 - 비상대응 및 사고보고 체계	10
	① 소계			90
② 입찰가격 평가				10
합 계 (① + ②)				100

[ 붙 임 2 ]

등급별 배점 기준표

업체수	등 급
	수	우	미	양	가
2(3)	1	1	(1)
4	1	2	1
5	1	2	1	1
6	1	2	1	1	1
7	1	2	2	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1
11	1	2	5	2	1
12	1	3	5	2	1
13	1	3	5	3	1
14	1	3	6	3	1
15	2	3	6	3	1

• 정성평가 시 각 부문의 배점을 기준으로 수(100%), 우(90%), 미(80%), 양(70%),

가(60%)로 구분한다.

[ 붙 임 3 ]

신용등급에 의한 경영상태 평가기준

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2- ,A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

※ 등급별 평점에 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림함

[주] 1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. [주] 1에도 불구하고 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매종합정보망」 에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다. (이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 수 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

[서 식 제1호]

사 업 제 안 서

사 업 명	2026년 하이원리조트 데코레이션 디자인, 제작 및 설치 용역
주 관 사	㈜ 강원랜드
주관부서	호텔콘도관리팀

2026년   월   일

참 여 업 체 명

대표자 ○ ○ ○ (인)

[서  식 제2호]

제안사 일반현황

회사명		대표자
사업분야		사업자번호
주소
전화번호		FAX
회사설립년도	년 월
주요연혁

* 제안사 일반현황은 제출제안서 내 디자인 반영이 가능하며 위 서식 내용이 반드시 포함되어야함.

[서  식 제3호]

용역이행 실적증명원

신청인	업체명(상호)					대 표 자
	영업소재지					전 화 번 호
	사업자번호					법인등록번호
	증명서용도	입찰 및 제안서심사 제출용				제 출 처
	용역범위 및 기준 (면적,금액 등)
용역이행 실적내용	용 역 명					구 분
	용역개요
	계약번호	계약일자	완료일자 (준공일자)	계약금액			이행실적(금액)			비고
							비율		실적
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기 관 명 : (인) (전화: )
	주 소 : (FAX : )
	발급부서 :				담당자:
註) ① 민간실적은 세금계산서, 계약서 등 증빙자료를 첨부하여야 합니다. ② 용역이행실적은 입찰공고 시에 제시한 용역범위 및 기준(금액) 등이 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 합니다. ③ 이행실적 란은 기재후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 합니다.

[서  식 제4호]

서   약   서

업 체 명 :

사업자등록번호 :

주    소 :

1. 본 사업자는 제안서 내용과 첨부 서류를 사실대로 작성하였음을 확인하며, 허위서류로 확인될 경우 부정당업자 재제, 계약해지 등 귀사의 모든 조차에 이의를 제기 하지 않겠습니다.

2. 『2026년 하이원리조트 데코레이션 디자인, 제작 및 설치 용역』을 위한 제안서 제출과 평가에 있어서 귀사가 결정한 평가 내용, 방법 및 평가 결과를 수용하겠습니다.

3. 또한 본 사업자는 『2026년 하이원리조트 데코레이션 디자인, 제작 및 설치 용역』의 입찰에 참여하면서 제안요청서(과업내용서)등에 기록된 제반사항에 대하여 보안을 유지하겠습니다.

2026 년   월    일

대표이사  :             (인감)

주식회사 강원랜드 대표이사 귀하

[서  식 제5호]

개인정보 수집･이용･제공 동의서

※ 본 과업에 참여하는 인력을 대표하여 대표자가 직접 서명해 주시기 바랍니다.

본인은 ㈜강원랜드의 『2026년 하이원리조트 데코레이션 디자인, 제작 및 설치 용역』의 입찰과 관련하여, 아래와 같이 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다.

가. 수집･이용･제공 목적

- ㈜강원랜드가 수행하는 『2026년 하이원리조트 데코레이션 디자인, 제작 및 설치 용역』의 입찰 참여에 따른 입찰서류 확인을 위해 최소정보를 수집하는데 활용.

나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목

- 제안사 대표자의 성명, 전자우편, 전화번호, 직장주소, 용역수행이력 등

- 참여인력의 성명, 소속/직책, 연령, 학력, 경력 등

- 입찰참가 신청 제출자의 성명, 직위, 전화번호, 전자우편 등.

다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간

- 본 동의서가 작성된 때로부터 ㈜강원랜드 입찰참가 서류 관리를

위한 보유기간까지

라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익

- 상기 업체 및 대표자는 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를       보유하고 있음을 인지하고 있음

- 거부에 따른 불이익: 계약체결 대상에서 제외.

2026년   월    일

대표자          (인)

주식회사 강원랜드 대표이사 귀하