	2026 전국(장애인)체전 홍보관 설치, 운영 및 임차 용역 과 업 지 시 서

(전국체전기획과)

Ⅰ		과업개요

□ 과업목적

ㅇ 2026년 전국체전 및 전국장애인체전 기간 동안 시도 홍보관 등을 설치하여 선수단, 관람객 등에게 볼거리와 즐길거리를 제공하여 누구나 찾아가고 싶은 홍보관 조성

ㅇ 제주월드컵경기장을 중심으로 체전 안내, 홍보와 도정 정책을 포함한 다양한 정보 제공과 각종 전시･체험 등과 연계한 컨텐츠 제공

□ 과업개요

ㅇ (과 업 명) 2026 전국(장애인)체전 홍보관 설치, 운영 및 임차 용역

ㅇ (과업기간) 계약일 ~ 2026. 11. 30.

ㅇ (설치 및 운영기간) 2026. 9. 5.(토) ~ 10. 28.(일) (총 54일간)

구 분	일 자	기 간
설치기간	‘26. 9. 5.(토) ~ ’26. 9. 8.(화)	3일
홍보관 내부준비 등	‘26. 9. 8.(화) ~ ’26. 9. 10.(수)	3일
전국장애인체전	’26. 9. 11.(금) ~ ‘26. 9. 16.(수)	6일
전국체전	’26. 10. 16.(금) ~ ‘26. 10. 22.(목)	7일
철거기간	‘26. 10. 23.(금) ~ ‘26. 10. 28.(수)	5일

ㅇ (과 업 량)

- 컨테이너(20동) 임차 및 설치

- 몽골텐트(119동) 임차 및 설치

- 홍보관 배치, 운영 및 관리

- 컨테이너, 몽골텐트 세부물품(참고 1) 포함 참조

ㅇ (설치장소) 제주월드컵경기장 광장 11,803㎡

ㅇ (과업예산) 금214,720,000원 (금이억일천사백칠십이만 원/부가가치세 포함)

Ⅱ		과업내용 세부사항

□ 컨테이너 및 몽골텐트 사양 및 일반사항

ㅇ 컨테이너

ㅇ 사 양

가. 규    격 : 6m(가로) × 3m(세로) × 2.5m(높이)

나. 수    량 : 20개동(설치 후 3개월 간 설치 기준)

다. 출 입 문 : 개방형태(블라인드 시건장치 포함), 휠체어 경사로 포함

라. 바    닥 : 합판 18mm이상, 카펫타일 마감(색상 협의)

마. 내    부 : 벽체 및 천정은 스티로폼 단열재 사용, 미장합판 마감

바. 전기설비 : LED등, 콘센트, 스위치, 차단기, 환풍기 등 사전 협의 후 설비

사. 기    타 : 테이블 1개, 의자 2개, 멀티탭 2개, 냉․온수기, 현수막 설치,  (현수막 시안은 추후 협의), 외부 디자인(랩핑), 전기물품, 소화기 등 포함

ㅇ 일반사항

가. 모든 물품의 규격은 품목별 물품 사양에 명기된 규격 또는 발주처에서 제시한 규격 이상의 물품이어야 한다. 다만, 부득이한 경우 상호 협의하여 유사한 규격·품질 등의 제품으로 선정할 수 있다.

나. 철강재 사용에 따른 가공, 조립, 용접 등이 기능적으로 처리되어야 하며, 구조적으로 안전해야 한다.

다. 전기는 2구 콘센트 3개소 이상 설치되어야 하며 전등은 충분한 조도가 나와야 한다.

라. 컨테이너 등 설치 전 현장을 반드시 확인하여 설치상 문제 발생요인은 발주처와 사전 협의한다.

마. 컨테이너 등 설치 전 설계도면과 제작 시방서를 발주처에 제출하여야 하며, 배치는 발주처와 협의하여 현장여건에 맞추어 설치하여야 한다.

바. 컨테이너는 견고하여야 하며 퇴색, 탈색, 녹 및 균열, 주름이 없고, 외판의 이음부분은 미려하게 용접으로 제작되어야 한다.

사. 컨테이너에는 개별 냉방기(제조년월 5년 이내)를 설치하여야 하며, 시공 시 전기 과부하가 발생하지 않도록 충분한 용량의 냉방기 전용 차단기를 설치 운영하여야 한다.

아. 컨테이너 등 제작·설치 전 배관, 배선 및 각종 기구류 설치에 대하여 사전에 충분히 협의 하여야 한다.

자. 컨테이너는 우천 시 빗물로 인한 피해가 없도록 설치하여야 하며, 피해 발생 시 조속히 복구 완료한다.

<몽골텐트>

ㅇ 사 양

가. 규    격 : 5m(가로) × 5m(세로) × 2.5m(높이)

나. 수    량 : 1차 59개동, 2차 60개동

다. 출 입 문 : 개폐형

라. 설비사항 : 부스당 테이블 1개, 의자 2개, 현수막 1개, 전기물품(전기등, 콘센트), 소화기 등

ㅇ 일반사항

가. 모든 물품의 규격은 품목별 물품 사양에 명기된 규격 또는 발주처에서 제시한 규격 이상의 물품이어야 한다. 다만, 부득이한 경우 상호 협의하여 가장 유사한 규격·품질 등의 제품으로 선정할 수 있다.

나. 부스 사용에 따른 조립, 결합, 용접 등이 기능적으로 처리되어야 하며, 구조적으로 안전해야 한다.

다. 몽골텐트 부스 설치 전 현장을 반드시 확인하여 설치상 문제 발생 요인은 발주처와 사전 협의한다.

라. 설치 전 배치 도면 등을 발주처에 제출하여야 하며, 발주처와 협의하여 현장여건에 맞추어 설치하여야 한다.

마. 몽골텐트 부스는 견고하여야 하며 퇴색, 탈색, 녹 및 균열, 주름이 없고, 외부의 이음부분 등에 하자가 없도록 설치되어야 한다.

바. 제작․설치 전 전기 배선 및 각종 기구류 설치에 대하여 사전에 충분히 협의하여야 한다.

사. 몽골텐트 부스는 우천 시 빗물로 인한 피해가 없도록 설치하여야 하며, 피해 발생 시 조속히 복구 완료한다.

□ 과업수행 기본방침(공통)

ㅇ 과업착수

가. 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내 착수계[사양서, 산출내역서, 설치계획서 등]를 사업 발주처에 제출하고, 충분히 사전 협의 후 과업에 착수하여야 한다.

나. 산출내역서에는 운반비, 설치비, 유지관리비, 철거비, 원상복구비, 제경비, 부가가치세 등이 포함된 금액이여야 한다.

다. 계약상대자는 본 과업의 진행과정을 수시보고 하여야 하며, 발주처와 협의사항이 발생할 시 적극 검토하고 대안 등을 마련하여야 한다.

라. 계약상대자는 본 과업내용서에 의하여 수행함을 원칙으로 하되, 상이한 사항이 발견될 경우나, 과업내용서상의 문구, 용어의 해석과 실시요령에 대하여 발주처와 의견이 다른 경우에는 상호 협의하여 조정한다.

마. 계약상대자는 본 과업수행을 위해 학식과 경험을 가진 전문 인력을 충분히 확보하여야 하며, 동 전문 인력은 자기가 가진 지식과 경험을 최대한 활용하여 본 과업의 목적을 달성하도록 하여야 한다. 또한 본 과업의 원활한 수행을 위해 발주처의 사전승인을 받아 관련분야의 전문기관 및 전문가를 참여시킬 수 있으며, 과업수행 간 안전사고에 각별히 유의하여야 한다.

바. 발주처는 과업 착수 전 또는 과업 수행 중 당해 과업수행에 있어 인적구성원이 부적합하다고 인정될 때 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이를 수용해야 한다.

사. 과업기간은 원칙적으로 조정할 수 없으나 과업수행 중 발주처의 사정에 따라 일정이 조정된 경우 또는 천재지변 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 상호 협의하여 과업기간을 조정할 수 있다.

ㅇ 설치 및 운영

가. 2026년 전국(장애인)체전 시도홍보관 등의 원활한 운영을 위하여 2026년 9월 8일(화)까지 설치를 완료하여야 한다.(몽골텐트를 철거하는 경우 2026. 10월 13일(화)까지 재설치 완료하여야 함)

나. 현장 상황 및 발주처 필요에 따라 이동 및 재설치를 요할  시는 이에 응해야 한다.

다. 시설 설치 시 운반 및 설치, 이동 등에 따른 시설물 손상이 발생되지 않도록 사전에 충분한 보양조치를 취하여야 하며, 관리기관과 협의 후 설치하여야 한다.

라. 시설설치 시 안전사고에 각별히 유의하여야 하며, 납품 전 설치장소에 대한 사전답사를 통하여 이동경로 및 안전 위해요소를 확인하여야 한다.

마. 바람과 기상 등의 영향에 의해 파손되지 않도록 견고하게 설치하여야 하며, 기상악화에 대비한 적절한 대책을 강구해야 한다.

바. 임대업체는 관련 물품 설치, 운영, 유지관리를 위하여 근무시간 내 직원 2명 이상을 제주월드컵경기장에 상주하여 물품 유지보수에 차질이 없도록 책임지고 유지 관리하여야 한다.

사. 전담직원으로 하여금 수시로 홍보관의 임대물품 상태를 점검하여 분실 및 파손 예방에 철저를 기하여야 하며, 손·망실 시 즉시 보수 또는 교체하고 임대물품 분실 시 동등 이상의 물품으로 대체하여야 하며, 이에 따르는 제반경비 일체는 임대인이 부담하여야 하며, 어떠한 경우라도 소요금액을 청구할 수 없다.

아. 행사 종료 후에는 신속하게 철거하여 분실 및 파손에 예방하여야 하며, 기존 시설물의 훼손이 있어서는 아니 된다.

자. 임차기간 만료 후 철거 시 주변정리를 철저히 하여야 한다.

차. 시설 운반·설치·이동·철거 중 발생된 피해는 계약상대자가 원상복구 한다.

카. 임차물의 배치 등은 본 용역 이외의 행사 주요요소(개폐회식, 문화행사 등)의 상황에 따라 변경될 수 있으며, 최종 설치까지 발주처와 상호 협의하여 진행한다.

타. 과업수행자는 안전보건 관계법령, 「중대재해처벌법」상 안전보건 확보 의무사항을 이행해야 한다.

① 과업수행자는 ‘25년 전국체전 주경기장 홍보관(컨테이너형) 설치․운영 및 임차’ 용역을 수행함에 있어 종사자 및 관람객의 안전을 확보하기 위하여 안전보건 관계법령 및 「중대재해처벌법」상 의무사항을 반드시 이행하고, 의무사항을 이행하지 않아 중대산업재해가 발생할 경우 그에 따라 발생하는 법적 처벌 및 제주특별자치도의 불이익 조치에 대해서 이의를 제기하지 않는다.

② 과업수행자의 귀책사유로 인하여 사고발생 시 이에 대한 책임은 수급업체가 진다.

③ 과업수행자는 종사자 및 관람객 등으로부터 유해·위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수·보강 등 개선작업을 신속히 조치하고, 제주특별자치도 및 관계 행정기관의 이행명령에 따른 개선사항을 성실히 이행한다.

④ 중대산업재해 발생시 즉시 보고 및 사고 처리하여야 한다.

ㅇ 납품검사

가. 발주처는 납품물이 규정된 필요조건과 일치하는지 확인하기 위하여 검사가 필요하다고 판단되면 사양서에 기재된 어떤 검사도 실시할 권리를 가지며, 계약자는 계약기관이 실시하는 모든 검사업무에 적극 협력할 의무가 있다.

나.  컨테이너 검사항목

연번	검사항목	검사방법	비고
1	기초 외부	육안검사
2	내부(천정, 벽, 바닥)	육안검사
3	전기설비	누전차단기 작동 검사, 전선 피복 상태 확인
4	도장 및 마감	육안검사
5	부수기재	육안검사

다. 몽골텐트 검사항목

연번	검사항목	검사방법	비고
1	기초 외부(이음부 등)	육안검사
2	구조부(철골, 천정, 측면 등)	육안검사

ㅇ 결과보고

- 과업 종료 후 7일 이내에 준공계, 컨테이너 등 설치 전‧중‧후 사진, 세부사양 등을 첨부한 용역수행 결과보고서를 제출하여야 한다.

ㅇ 계약해지

가. 임차물품의 품질 및 서비스 수준이 미흡하여 대회에 손실을 초래할 경우

나. 현장실사를 통해 자격요건 등을 확인하고 해당요건이 사실과 다를 경우

다. 정당한 사유 없이 발주처의 물품사용에 대한 제반 업무지시를 이행하지 않거나 위반하였을 때

라. 천재지변, 재난재해 등 명백한 발주처의 불가피한 사정이 발생할 경우 계약을 임차계약 시행일(설치) 이전에 해제․해지할 수 있으며, 이 경우 계약을 위해 투입된 일체의 비용은 상대방에게 지급하지 아니한다.

마. 코로나 등 국가적 전염병 확산의 재유행으로 인해 용역이 취소될 경우 계약은 해제·해지 될 수 있으며 착수 후 기성 부분에 대한 비용만 청구할 수 있다.

ㅇ 기타사항

가. 본 과업내용서에 명시되지 아니한 사항은 발주처와 협의하여 수행하며 협의 없이 임의 진행으로 문제발생 시 모든 책임은 계약상대자가 진다.

나. 납품되기 이전에 발생한 물품의 망실, 파손 등과 운송도중 차량 손괴 및 인명에 관한 안전사고가 발생할 경우 모든 민․형사상의 책임은 계약상대자의 부담으로 한다.

다. 물품관리 전담직원에 대하여 업무수행을 통하여 얻은 모든 정보 또는 기밀사항에 대하여는 보안을 준수하도록 주지시켜야 하며 타 용도에 이용하거나 외부에 누설할 수 없다.

라. 본 과업을 수행함에 있어 발생되는 제반 문제에 관해서는 제주특별자치도와 협의하여야 하며, 양자 간 이견이 있을 때에는 발주처의 의견을 우선적으로 반영 하여야 한다.

마. 본 임대차 계약사항에 대하여 법적 분쟁이 발생되었을 경우 발주처가 소재한 지역의 관할 법원에서 처리한다.

참고1		홍보관 입찰 물품 세부목록

연 번	세 부 목 록				비 고
	품 명	규 격	단위	수량
1	컨테이너 부스 (일반형)	6*3*2.5m	동	20	시건장치, 합판, 바닥타일 등 포함
2	컨테이너 랩핑	추후 협의	식	20	색상형, 도색
3	개폐구	블라인드 문, 시건장치, 장애인 휠체어 슬로프	set	20	블라인드문, 장애인슬로프, 시건장치
4	현수막	6*0.5m	개	30
5	사출의자	-	개	50
6	테이블(사각)	1.8m*0.75m	개	20
7	멀티탭	3구	개	50
8	운송 및 설치비	지게차 등	식	1
9	소화기	-	개	20
10	냉방기	-	개	20
11	노무비 (야간 상주근무)	-	명	13	장애인체전 : 6일 전국체전 : 7일 (주간 및 야간근무-2인)

□ 컨테이너

□ 몽골텐트

연 번	품 명	규 격	단위	수량	비 고
1	몽골텐트 (일반형)	5*5*2.5m	동	59	(9.11.~9.16)
			동	60	(10.16.~10.22.)
2	현수막	추후 협의	식	90	1차, 2차 합계
3	개폐형 출입문	시건장치 포함	식	60	1차, 2차 포함
4	전등	전기등(1개), 콘센트(2개)	식	60	1차, 2차 포함
5	테이블	1.5m	개	60	1차, 2차 포함
6	사출의자	-	개	120	1차, 2차 합계
7	소화기	-	개	60	1차, 2차 포함
8	노무비 (야간 관리 등)	장애인체전 : 6일 전국체전 : 7일	명	2

참고2		제주월드컵경기장 홍보관 배치 및 시안(안)

□ 컨테이너 설치 위치

□ 제주월드컵경기장 광장 설치 예정(면적 11,000㎡ 정도)

- 소재지: 제주특별자치도 서귀포시 월드컵로 33

- 컨테이너형 부스 20동 배치 예정  * 홍보부스(몽골) 별도 운영

□ 부스 배치도(안)

- 사업자 선정 후 기술적 협의·의견 검토 및 주요 행사 요소(개폐회식, 문화행사 등) 확인 후 배치 확정 시행

□ 세부사항

□ 사업자 선정에 따른 홍보관 배치도 검토 및 변경 조정 가능

□ 홍보관 시안